직 인 생 략

서 울 특 별 시 회

우:135-701  주소: 서울 강남구 논현동 71-2 건설회관6층  전화: 547-7301   전송: 545-1761

부서명:조사부       부장:윤종원         담당자:서명덕         (E-Mail):mdsuh@scak.co.kr

선결			지시
접수	일자 시간		결재·공람
	번호
처 리 과
담 당 자

문서번호: 건협서울3013-35

시행일자 : 2002. 6. 11

공개여부 : 공개

수    신 : 대표이사

참    조 : 업무부장

제    목 : 감리보고서(CD-ROM)운영실태 점검결과 안내

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 지난 4.15∼27 건설교통부와 건설감리협회가 합동으로 책임감리대상 건설공사에 대하여 CD-ROM으로 작성토록 하는 감리보고서 작성 현장 운영실태를 점검하였습니다.

3. 이와 관련하여 동 점검결과를 안내하오니 공사관계자들이 공사자료의  협조, 지원 및 많은 관심을 갖고 동 감리보고제도가 차질없이 시행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 감리보고서 작성·운영실태 점검결과 1부. 끝.

대 한 건 설 협 회   서 울 특 별 시 회 장

감리보고서(CD-ROM) 작성·운영실태 점검결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(12개 공사현장)

□ 모범 운영기관(원주지방국토관리청)

- 「감리보고서(CD-ROM) 작성방법 개선」을 내부방침으로 확정하여 모든 책임감리대상 현장에는 단계별 시행일정에 관계없이 금년 3월부터 CD-ROM으로 작성·제출토록 운영중임

- 전산장비의 운영비용은 감리대가의 제경비로 충당하되, 이에 따른 CD-ROM 작성비용은 설계변경시 반영조치(연말)키로 하고, CD보관 및 관리책임자 지정하여 관리하고 있음

□ CD-ROM 작성실태

ㅇ 감리일지 작성

- 감리일지(책임 및 보조감리원)는 개별로 매일 업무내용을 6하원칙에 따라 상세히 기록하지 않거나 일부 내용이 누락되는 등 작성이 미흡함

(사   례)

- 감리일지에 그림(예:구조물 단면도, 치수포함)을 삽입하여 상세하게 작성하는 우수한 현장이 있는 반면

- 감리일지상 공사내용만을 간단히 기록하거나 책임감리원은 보조감리원 업무에 대한 내용검토시 대부분 업무지시 사항란을 활용하지 않음

- 책임감리원 감리일지의 관련문서에 분류코드 및 문서번호 등과 주요작업에 대한 공정률 기록이 일부 누락됨

- 보조감리원 감리일지를 개인별로 입력하지 않고 전체 보조 감리원 일지를 하나로 묶어서 입력 (개인별 입력이 원칙)

- 보조감리원의 업무수행 내용을 주요작업 내용별로 상세히 기록하지 않음

ㅇ CD-ROM 입력

- 감리보고서(CD-ROM)에 주요 감리업무내용이 전부 입력되여야 하고, 특히 각종 대장은 누락되지 않도록 입력하여야 함에도 일부 현장은 이행하지 않음

(사   례)

- 품질시험·검사현황 등 자료가 누락되었거나 첨부되어야 할 시험성과표가 누락됨

- 건설자재별로 작성되는 품질시험·검사현황에 기록하지 않아도 되는 콘크리트 타설현황을 포함하여 작성됨(콘크리트 타설현황은 지침서 별지9호서식으로 별도 작성하여야 함)

- 콘크리트 타설 및 공사참여자 실명부에 기록할 사항(공사내용 및 작업위치)과 일부 서명이 누락되었으며, 기록된 공사내용도 세분화되어 있지 않음 (작업총괄, 거푸집제작, 자재운반 등 해당 업무내용을 상세히 명기하지 않음)

- 검측요청서에 첨부되는 체크리스트의 검사기준이 누락되었거나 검사결과를 단순한 기호(O,X)등으로 표시함(시방서, 설계도서의 검사기준 및 검사결과를 수치 등으로 기록하여 적법여부를 확인할 수 있도록 작성하는 것이 원칙)

□ 전산 프로그램의 운영실태

- 전산프로그램을 이용하여 전산화된 CD-ROM에 보고서를 작성하고 있으나, 일부 현장에서는 전산프로그램 장비사용 및 자료입력 방법이 미숙하여 사용자(감리원)의 불편 및 부분적으로 오류가 발생하여 애로사항을 제기

- 현재 전산프로그램 운영과정에서 나타난 문제점을 상반기까지 감리협회 및 프로그램 개발업체가 세부기능을 보완하여 원활하게 작업할 수 있도록 개선키로 결정(□02.5.10. 관계자회의)

(사   례)

- CD-ROM 작성시 개별적으로 감리원 업무일지를 작성하여 전자 서명한 후 파일을 전산입력하므로써 효율적으로 감리 보고서가 작성됨

- 대형 공사현장에서는 도면, 자료 등이 많아 전산자료 입력시 스캐닝 성능에 따라 입력시간에 차이가 있으므로 성능이 높은 장비를 사용할 것을 제기

- 전산장비(컴퓨터, CD-RW, 스캐너)에 대한 호환성 부족으로 작업이 곤란한 사례가 있음

- 입력된 전산자료의 바이러스 및 장비 고장시에 대비하여 백업등의 처리대책이 부족함

- 대부분의 발주청에서 책자 감리보고서를 포함하여 CD-ROM을 추가로 제출 받고 있어 이중작성으로 인한 감리업무 과중 초래