□ 감리업무수행지침서 개정(안)에 대한 검토의견

현 행	개선내용	본회실무 검토의견
제1조∼제3조 (생략) 제4조(발주청,감리원,시공자의 기본임무)①발주청은 다음 각호의 기본임무를 수행하여야 한다. 1∼3.(생략) 4.( 생략) 가. (생략) 나. 감리원의 배치 및 변경배치시:감리원의 배치 및 변경배치(비상주 감리원을 포함하며, 업체선정 당시의 배치계획 및 당초 발주청에 제출한 배치계획과 다른 감리원을 배치하는 경우로서 영 제52조제9항에 의한 교체를 포함한다)시 규칙 별지 제1의2호서식에 의하여 통보, 이 경우 철수사유란에 □교체□또는 □완료□로 구분 기재하되 규칙 제32조제2항 및 제3항에 의하여 발주청이 조정배치토록 한 경우와 입대, 3월이상 요양을 요하는 부상 등 발주청이 부득이한 사유에 해당된다고 인정한 경우에는 □완료□로 기재 5. (생략) ②∼④ (생략) 제5조(감리원의 근무수칙) ①∼③ (생략) ④비상주감리원은 다음 각호에 따라 업무를 수행하여야 한다. 1∼2.(생략) 3. 정기적(분기 또는 반기별)으로 현장 시공실태를 종합적으로 점검·확인·평가하고 기술지도 제6조∼제20조(생략)	제1조∼제3조(현행과 같음) 제4조(현행과 같음) 1∼3.(현행과 같음) 4.(현행과 같음) 가. (현행과 같음) 나. ------------------------------------ --------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---입대·3월이상의 요양을 요하는 부상 및 입원·퇴직(감리전문회사가 폐업신고된 경우에 한한다)·이민 또는 발주청의 사정으로 인하여 3월 이상 공사가 지연되어 부득이한 ------------------------------- 5. (현행과 같음) ②∼④ (현행과 같음) 제5조(감리원의 근무수칙) ①∼③ (현행과 같음) ④비상주감리원은 다음 각호에 따라 업무를 수행하여야 한다. 1∼2.(현행과 같음) 3. 정기적(월1회이상)으로 현장 시공실태를 종합적으로 점검·확인·평가하고 기술지도 제6조∼제20조 (현행과 같음)	ㅇ 별도의견제출 계획 없음 -감리전문회사 사업수행능력 세부평가기준(교체빈도 평가)와 내용을 동일하게 조정하기 위함 ㅇ 별도의견제출 계획 없음 -현장 공정 진행에 따라 비상주감리원이 현장시공실태를 점검·확인하고 기술지도등의 업무를 지원하기 위함

현 행	개선내용	본회실무 검토의견
(신 설) 제21조(시공자 제출서류의 검토) 감리원은 시공자가 제출하는 다음 각호의 서류는 반드시 접수하여야 하며, 접수된 서류에 하자가 있을 경우에는 시공자에게 문서로 보완 지시하여야 한다. 1.∼12. (생략) (신 설) 제22조∼제24조 (생략) 제25조(제3자 손해방지) ①감리원은 다음 각호의 공사현장 인근상황을 시공자에게 충분히 조사토록 하여 공사시공과 관련하여 제3자에게 손해를 주지 않도록 시공자에게 대책을 강구하게 하여야 한다. 1∼3 (생략) 4. 건조물 5. (생략) ② (생략) 제26조∼제33조 (생략)	제11조의2(건설공사 관련 보험료 및 건설근로자퇴직공제부금비 관리) 감리원은 원가계산에 의한 예정가격작성준칙에 의한 공사원가계산서상의 건설공사 관련 보험료 및 건설근로자퇴직공제부금비 등에 대하여 관련 규정에 의한 관리업무를 하여야 한다. 제21조(시공자 제출서류의 검토) ---------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------- -------- 1∼12 (현행과 같음) 13. 발파계획서 제22조∼제24조 (현행과 같음) 제25조(제3자 손해방지) ① -------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------- --------------------- 1∼3 (현행과 같음) 4. 건조물, 축사 5. (현행과 같음) ② (현행과 같음) 제26조∼제33조 (생략)	ㅇ 신설 반대의견 제출 -통상 기성대가(준공대가) 지급시 보험료 및 퇴직공제부금비에 대해 정산절차를 거치고 있음. 이에 따라 제출된 납부확인서(영수증)등을 통해 실사용여부에 대한 확인이 가능함 -따라서 별도규정을 두어 시공사의 회계집행 세부내역을 확인하는 것은 발주청의 지나친 경영간섭임 ㅇ 별도의견제출 계획 없음 -암발파로 인한 소음 및 진동피해에 대한 민원을 최소화하기 위함 ㅇ 별도의견제출 계획 없음 -암발파로 인한 가축피해에 따른 분쟁해소를 위함

현 행	개선내용	본회실무 검토의견
제34조(시공상세도 승인) ①감리원은 시공자로부터 각종 구조물의 시공상세도를 사전에 제출받아 다음 각호의 사항을 고려하여 검토·확인하고 승인한 후 시공토록 하여야 한다. 또한 철강재 구조물 등 주요구조물인 경우에는 시공상세도를 검토할 때 필요한 경우 발주청과 협의하여 당초 설계자를 참여시킬 수 있다. 1∼7 (생략) ② (생략) 1∼13 (생략) (신설) (신설) (신설) (신설) 제35조∼제40조 (생략) 제41조(주요 기자재 공급원 검토 승인)①감리원은 시공자가 하여금 공정계획에 의거 사전에 주요 기자재(레미콘·아스콘·철근·H형강·시멘트등)공급원 승인신청서를 자재반입전까지 제출하도록 하여야 한다. 다만, 관계법령의 규정에 의하여 품질검사를 받았거나, 품질을 인정받은 재료에 대하여는 예외로 한다. ②∼⑦ (생략) 제42조(주요 기자재 및 지급자재의 검수 및 관리) ①∼⑦ (생략) ⑧자재가 현장에 반입되면 송장 또는 납품서를 확인하고 수량,치수등을 검사한다. ⑨∼⑭ (생략)	제34조(시공상세도 승인) ①----------------각종 구조물 및 암발파작업 시공상세도를 ----------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------- 1∼7 (현행과 같음) ② (현행과 같음) 1∼13 (현행과 같음) 14. 천공패턴 15. 천공배열도 및 기폭배열도 16. 발파용매트나 덮개표준도 제34조의2(시험발파) 감리원은 시공자로부터 시험발파계획서를 사전에 제출받아 다음 각호의 사항을 고려하여 검토·확인하고 발파하도록 하여야 한다. 1. 관계규정 저촉여부 2. 안전성 확보여부 3. 계측계획 적정성 등 제35조∼제40조 (현행과 같음) 제41조(주요 기자재 공급원 검토 승인)① --------- ------------------------------------------ ------------------------------------------ 자재반입 10일 전까지 ------------------------ ------------------------------------------ --------------------- ②∼⑦ (현행과 같음) 제42조(주요 기자재 및 지급자재의 검수 및 관리) ①∼⑦ (현행과 같음) ⑧자재가 현장에 반입되면 송장 또는 납품서를 확인하고 수량,치수등을 검사하여야 하며, 주요 자재 운반차량의 송장을 확인하여 과적차량으로 확인되면 반입을 금지시켜야 한다. ⑨∼⑭ (현행과 같음)	ㅇ 별도의견제출 계획 없음 -암발파에 대한 분쟁을 해소하고 국가예산의 효율적 집행 도모 ㅇ 별도의견제출 계획 없음 -시험발파에 대한 업무규정 미비를 해소하기 위함 ㅇ 별도의견제출 계획 없음 -충분한 승인신청서 검토기간을 주고자 함 ㅇ 별도의견제출 계획 없음 -건설현장에서 과적차량 발생을 방지하기 위함

현 행	개선내용	본회실무 검토의견
제43조∼제56조 (생략) 제57조(기성검사 및 준공검사자 임명) ① (생략) ② 감리전문회사 대표자는 기성부분검사원 또는 준공계를 접수하였을 때는 3일안에 소속 비상주감리원 중 고급감리원급(감리사급)이상의 자로 검사자를 임명하고, 이 사실을 즉시 본인과 발주청에 보고하여야 한다. 다만, 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제55조제7항 본문의 규정에 의한 약식 기성시에는 책임감리원을 검사자로 임명할 수 있다. ③∼⑤(생략) ⑥발주청은 필요한 경우 소속직원으로 하여금 검사과정에 입회토록 하며, 준공검사 과정에는 소속직원을 입회토록 하며, 필요시 시설물 인수기관, 유지관리기관의 직원으로 하여금 검사에 입회·확인토록 조치하여야 한다. (신설) ⑦(생략) 제58조∼제61조 (생략) 제62조(예비준공검사)①공사현장에 주요공사가 완료되고 현장이 정리단계에 있을 때에는 준공 1개월 전에 준공기한내 준공 가능여부 및 미진사항의 사전보완을 위해 예비 준공검사를 실시하여야 한다. 다만, 단순 소규모공사일 경우에는 발주청과 협의한 후 생략할 수 있다. ②∼⑤ (생략) 제63조∼제68조(생략)	제43조∼제56조 (현행과 같음) 제57조(기성검사 및 준공검사자 임명) ① (현행과 같음) ② -------------------------------------- ----------------------------------------- ------------------검사자를 임명(2명 이상을 임명하여 검사팀을 구성)하고, -------------------- ----------------------------------------- ------------------------------------------ ------ ③∼⑤(현행과 같음) ⑥ ---------------------------- 기성검사과정에 입회토록 하고, ---------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ⑦발주청은 제6항의 규정에 의한 준공검사에 입회할 경우 당해공사가 복합공정인 경우에는 공종별 팀을 구성하여 공동입회하고, 준공검사 실시여부를 확인하여야 한다. ⑧ (현행 제7항과 같음) 제58조∼제61조 (현행과 같음) 제62조(예비준공검사)①------------------------------------------------준공 2개월전에 ------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ②∼⑤ (현행과 같음) 제63조∼제68조(현행과 같음)	ㅇ 별도의견제출 계획 없음 ※건교부 부패방지 추진과제임 ㅇ 별도의견제출 계획 없음 ※건교부 부패방지 추진과제임 ㅇ 별도의견제출 계획 없음 -충분한 보수 및 재시공 기간 확보를 위함

※ 본회실무 검토의견에 반대일 경우 반드시 사유를 명시할 것.

◑ 감리업무수행지침서 개정(안)에 대한 의견

현 행	개정(안)	개정(안)에 대한 찬·반여부	사 유 (반대하는 경우 기재)	기타의견

※ 개정(안)에 대한 반대의견이 있을 경우, 그 사유를 기재하여 주시기 바랍니다.