공공 건설공사의 공사기간 산정기준 제정안

2019. 1. 1.

국 토 교 통 부

(기술기준과)

1. 제정이유

공공 건설공사의 공사기간에 근로기준법의 개정에 따른 근로시간 단축, 품질․안전강화 등 건설환경 변화 및 기후요인 등이 제대로 반영되지 않고 있고, 적정 공사기간 산정에 대하여 건설관련 법령에 명문화된 규정이 없어 준공시점의 공기부족 및 발주자의 불합리한 공기단축요구 등으로 시설물 품질저하 및 안전사고 발생 우려가 높은 상태임

따라서, 건설공사 공사기간에 영향을 미침에도 그동안 관행적으로 누락되는 요소, 기후변화요인, 주5일근무제 등 건설환경의 변화를 반영한 「건설공사 공사기간 산정기준」을 마련하여 불합리한 공사기간 산정을 예방하고 시설물 품질향상 및 건설안전 확보와 발주자와 시공자 사이의 공정한 계약관행 정착에 기여하고자 함

2. 주요내용

가. 공공 건설공사의 공사기간 적정성 검토를 의무화하고 대형공사 및 특정공사에 대해서는 기술자문위원회의 심의를 받도록 함

나. 시공자가 해당 공사의 공사기간을 사전에 검토 후 입찰에 참여할 수 있도록 입찰서류(현장설명서)에 산출근거 명시

다. 공사기간은 공사준비/정리기간, 작업일수 비작업일수의 합계로 산출토록 하고 각 구성요소별 정의와 반영기준을 제시

라. 건설공사 공사기간 연장 사유를 구체적으로 규정하여 계약기간 및 계약금액 변경 근거를 마련

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략,

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 전문 별첨

국토교통부 훈령 제1140호

공공 건설공사의 공사기간 산정기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「건설기술 진흥법 시행령」제71조제4항제4호 및 제73조제3항, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제36조제7호 및「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제36조제7호에 따른 “공사기간”의 산정과 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제66조 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제75조에 따른 “공사기간”의 변경 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어는 다음과 같다.

1. "건설공사"란 「건설산업기본법」 제2조제4호에 따른 건설공사를 말한다.

2. "발주청"이란 「건설기술진흥법」제2조제6호에 따른 발주청을 말한다.

3. "설계자"란 기본설계 또는 실시설계용역계약의 계약상대자를 말한다.

4. "시공자"란 공사계약의 계약상대자를 말한다.

5. "공사기간"이란 건설공사 계약의 착수일로부터 완료일까지 기간을 말한다.

6. "계약의 착수일"이란「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」에 따른 공사도급표준계약서(별지 제7호서식)에서 정한 착공연월일을 말한다.

7. "현장설명서"란「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제14조의2에 따라 현장설명 시 교부하는 도서로서 시공에 필요한 현장상태 등에 관한 정보 또는 단가에 관한 설명서 등을 포함한 입찰가격 결정에 필요한 사항을 제공하는 도서를 말한다.

8. "준비기간"이란 착공초기 하도급업체의 선정, 발주청의 인․허가업무 지원, 도면 검토, 측량, 현장사무소·세륜시설·가설건물의 설치, 건설자재·장비 및 공장제작 조달 등 본 공사의 착수준비에 필요한 기간을 말한다.

9. "법정공휴일"이란 일요일, 국경일, 설·추석 명절 등 관공서 공휴일과 근로기준법에서 정한 근로자의 날을 말한다.

10. "정리기간"이란 준공검사 준비를 위한 행정절차 및 청소 등 현장 정리에 소요되는 기간을 말한다.

11. "보증이행업체"란 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제66조제3항에 따른 보증이행업체를 말한다.

12. "시공조건"이란 공사기간에 영향을 미치는 제약조건을 말한다.

제3조(공사기간 산정 시 주의사항) ① 발주청은 건설공사의 공사기간 산정에 관하여 이 기준에 따라 업무를 처리하며, 적정 공사기간을 확보하여야 한다.

② 발주청은 공사기간을 산정할 때 공사 목적물의 품질확보는 물론 공사의 안전성·경제성 등을 확보하면서 해당 공사의 규모 및 특성, 지역여건, 자연조건, 법정근로시간 등 기타 제반여건을 고려하여야 한다.

③ 발주청은 공사기간을 부당하게 삭감하거나 과잉 계상하지 않도록 한다.

제4조(공사기간의 결정 절차) ① 발주청은 설계자로 하여금 이 기준에 따라 공사기간을 산정하고 그 산출근거를 명시하도록 하여야 하며, 공사기간에 영향을 미칠 수 있는 요소들을 고려하여 발주청에 설계 성과품의 일부로 제출하도록 하여야 한다.

② 발주청은 건설공사의 입찰공고를 하기 전에 공사기간의 적정성을 검토하여야 하며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제79조 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제95조에 따른 대형공사 및 특정공사, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제98조 및「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제127조에 따라 기본설계 기술제안입찰 및 실시설계 기술제안입찰에 해당하는 경우에는「건설기술 진흥법」제5조에 따른 지방건설기술심의위원회 또는 제6조에 따른 기술자문위원회의 심의를 거쳐야 한다.

③ 발주청은 공사기간의 적정성을 검토하여 결정한 공사기간과 그 산출근거를 입찰서류인 현장설명서(현장설명을 실시하지 않는 경우에는 계약특수조건)에 명시하여야 한다.

④ 건설공사의 입찰참가자는 입찰서류에 명시된 공사기간 및 산출근거를 검토하여 입찰에 참여하여야 한다.

제2장 공사기간의 산정

제5조(공사기간 산출) 공사기간은 준비기간과 비작업일수, 작업일수, 정리기간을 포함하여 산출한다.

공사기간 = 준비기간 + 비작업일수 + 작업일수 + 정리기간

제6조(준비기간 산정) 발주청은 당해 공사의 내용에 적합한 준비기간을 산정하여야 한다.

[참고] 공사 유형별 준비기간 예시

공종	준비기간	공종	준비기간
공동주택	30일	강교가설공사	90일
도로개량공사	40일	PC교량 공사	70일
포장공사(신설)	50일	교량보수공사	60일
포장공사(수선)	60일	하천공사	40일
공동구공사	80일	항만공사	40일

제7조(비작업일수) ① 비작업일수는 건설현장의 공사 진행이 불가능한 날짜를 말하며, 제8조의 ‘법정공휴일수’와 제9조에 따른 ‘기후여건으로 인한 비작업일수’의 합계에서 중복일수를 제외하여 산정한다. 단 중복일수 산정은 소수점 첫째자리에서 반올림한다.

② 비작업일수는 주공정(critical path)에 대하여 검토하며, 월별 비작업일수가 주 40시간 근무제에 따른 비작업일수보다 작을 경우에는 주 40시간 근무제에 따른 비작업일수를 적용한다.

작업일수 = 달력일수 – 비작업일수

비작업일수 = A + B – C

A : 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수

B : 해당 월에 포함된 법정 공휴일수

C : 월별 중복일수(C) = A × B ÷ 달력일수 (소수점 첫째자리에서 반올림)

[예시] 1월에 시행되는 토공사

토공사가 불가능한 강우일수(강수량 10㎜/일 이상) : 7일          …… A

법정공휴일수 : 4일(일요일)+1일(신정) = 5일                     …… B

중복일수 : 7일(A) × 5일(B) ÷ 31일(달력일수) ≒ 1.1일(1일 적용)   …… C

1월 비작업일수 = 7일 + 5일 – 1일 = 11일 > 8일

※ 주 40시간 근무제에 따른 비작업일수 = 8일

1월 작업일수 = 31일 – 11일 = 20일 (∴가동률 = 20/31 = 65%)

제8조(법정 공휴일수 계산) 법정 공휴일수는 별표 1을 참고하여 당해 공사의 개시일로부터 종료일 사이에 포함된 일수를 모두 계상한다.

제9조(기후여건으로 인한 비작업일수) ① 건설공사의 주공정(critical path)에 영향을 미치는 기상조건을 반영하여 비작업일수를 산정한다. 이때 해당 지역에 대한 최근 10년 동안의 기상정보(기상청의 기상관측 데이터)를 적용하여야 한다.(별표 2 참고)

② 공사의 품질 확보 및 현장 근로자의 안전을 확보하기 위하여 관계법령과 기준(건설기준, 산업안전보건 및 환경기준)에서 공종별로 작업을 제한하고 있는 기상조건을 반영하여 비작업일수를 산정한다.

[참고] 주공정 비작업일수 산정을 위한 기상조건 예시

적용공종 구분	A공종	B공종	…공종
강우	일강수량 10㎜ 이상	일강수량 80㎜ 이상	…
적설	신적설 1㎝ 이상	신적설 5㎝ 이상	…
바람	일최대순간풍속 10.8m/s 이상	일최대순간풍속 13m/s 이상	…
혹서기	일최고기온 33°C 이상	일최고기온 35°C 이상	…
동절기	일최저기온 -12°C 이하	일최저기온 0°C 이하	…
미세먼지	미세먼지 경보 발령시	-	…
파고	1m
:

제10조(작업일수) ① 작업일수는 당해 공사의 공종별 수량을 시공하는데 필요한 총 작업일수를 말한다.

② 작업일수의 산정은 별표 3의 공종별 표준작업량을 활용하거나 발주청에서 보유하고 있는 과거의 경험치를 활용하여 할 수 있다. 다만, 별표 3은 대표적이고 일반화된 공종 및 공법을 기준으로 작성한 것이며 현장 여건 및 공사규모, 지질 조건, 기상·기후조건 등에 따라 조정하여 적용한다.

③ 작업일수 산정 시 건설현장 근로자의 작업조건이 법정 근로시간(1일 8시간, 주 40시간)을 준수하는 것을 원칙으로 한다. 연속작업이 필요한 경우에는 교대근무 및 주·야간 공사로 구분하여 산정한다.

제11조(정리기간 산정) 정리기간은 공정상 여유기간(buffer)과는 다르며, 공사 규모 및 난이도 등을 고려하여 산정한다. 정리기간은 일반적으로 주요공종이 마무리된 이후 준공 전 1개월의 범위에서 계상할 수 있다.

제12조(공사여건 등에 따른 보정) ① 발주청은 제6조부터 제11조에 의하여 산정한 공사기간에 공사여건 등에 따라 공사일수를 가감할 수 있다.

② 공사의 규모 및 성격(고속/일반, 단선/복선, 구조형식, 신설/확장/개량 등), 지역여건(산지/농경지/도심지/도서지역, 군작전지구) 등을 고려하여 추가 공사기간을 반영할 수 있다.

제13조(표준공기 산정공식의 활용) ① 발주청은 제6조 부터 제11조에 따라 산정한 공사기간을 실적 공기와 비교하여 타당성을 검토할 수 있다. 이때 실적 공기를 분석하여 작성된 별표 4의 시설물별 표준공기 산정공식을 활용하여 공사기간의 적정성을 확인해 볼 수 있다.

② 발주청은 별표 4에 제시되지 않은 공사의 경우에는 최근 5년간 준공된 동종 공사의 실제 공사기간의 평균값을 활용하되, 제6조의 준비기간과 제11조의 정리기간을 합산하여 산정할 수 있다.

제14조(시공조건의 명시) 발주청은 별표 5와 같이 당해 공사의 착공 전에 선행되어야 할 행정절차나 인접공사가 미 이행되어 당해 공사의 수행에 차질이 예상되는 경우 그 진행현황을 입찰서류인 현장설명서(현장설명을 실시하지 않는 경우에는 계약특수조건)에 명시하여야 한다.

제15조(공사기간 산정근거 등의 명시) ① 발주청은 공공 공사를 입찰할 때에는 공사기간 산정근거(준비기간, 작업일수, 작업일수 산정 시 활용한 표준작업량 등 근거, 비작업일수 산정 시 적용한 기상조건, 정리기간, 보정사유 및 기간)와 시공조건을 입찰서류인 현장설명서(현장설명을 실시하지 않는 경우에는 계약특수조건)에 명시하여야 한다. 다만, 설계·시공일괄입찰 및 대안입찰, 기술제안입찰의 경우에는 입찰참가자가 실시설계서에 포함하여 제출하여야 한다.

② 시공자는 현장설명서(현장설명을 실시하지 않는 경우에는 계약특수조건)에 명시된 내용을 검토하여 현장설명 시 질의응답을 통해 필요한 내용을 확인하고 입찰에 참여하여야 한다.

제3장 공사기간의 변경

제16조(공사기간의 조정) ① 발주청은 다음 각 호의 사유가 계약기간 내에 발생한 경우 시공자로부터 수정공정표를 제출받아 계약기간의 조정을 검토하여야 한다.

가. 시공자의 책임이 아닌 사유로 공사수행이 지연되는 경우

(예시) 원자재의 수급 불균형으로 인하여 해당 관급자재의 조달지연 또는 사급자재(관급자재에서 전환된 사급자재를 포함)의 구입곤란, 시공자가 대체 사용할 수 없는 중요 관급자재 등의 공급이 지연되어 공사의 진행이 불가능하였을 경우 등

나. 설계변경(시공자의 책임 없는 사유)으로 인하여 준공기한 내 계약을 이행할 수 없는 경우

(예시) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락․오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질․용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 발주청이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에 해당하여 설계 변경한 경우

다. 발주청의 귀책사유로 공사기간이 연장된 경우

(예시) 발주청의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단되었을 경우, 예산의 미확보 및 사업계획 변경 등 발주청의 필요에 의한 경우, 발주청 외에 해당공사와 관련된 인허가기관 등의 요구가 있어 이를 발주청이 수용하는 경우, 공사관련법령(표준시방서, 전문시방서, 설계기준 및 지침 등 포함)의 제․개정으로 인한 경우, 공사관련법령에 정한 바에 따라 시공하였음에도 불구하고 발생되는 민원에 따른 경우, 발주청 또는 공사 관련기관이 교부한 지하매설 지장물 도면과 현장상태가 상이하거나 계약이후 신규로 매설된 지장물에 의한 경우, 토지․건물소유자의 반대, 지장물의 존치, 관련기관의 인허가 불허 등으로 지질조사가 불가능했던 부분의 경우 등

라. 불가항력(태풍·홍수, 폭염, 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동 등 시공자의 통제범위를 벗어난 사태의 발생)의 사유

* 기타 악천후란 태풍이나 홍수를 제외한 모든 기상 상태(가문, 서리, 돌풍, 우박, 안개, 강풍 등등)로서 정상적인 계약이행이 곤란하게 된 경우이며, 이는 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 않는 경우를 의미

마. 관련 법령의 제‧개정으로 준공기한 내 계약을 이행할 수 없는 경우

바. 시공자의 부도 등으로 보증기관이 보증이행업체를 지정하여 보증 시공할 경우

② 발주청은 제1항에 따라 계약기간 연장의 요구가 있는 경우 즉시 그 사실을 조사·확인하고 공사가 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 제2항에 따라 계약기간의 연장은 발주청과 시공자가 연장기간 산정에 대한 근거자료를 바탕으로 협의하여 결정한다. 다만 상호간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 지방건설기술심의위원회 또는 기술자문위원회의 자문을 거쳐 발주청이 결정한다.

④ 제3항에 따라 공사기간이 연장되는 경우 그 변경 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위 안에서 계약금액을 조정할 수 있다.

④ 제1항의 바호 및 시공자의 귀책사유로 인하여 공사가 지연되는 경우에는 공기만회대책을 수립하고, 지체일수에 따라 지체상금을 계상한다.

제17조(공사기간 산정근거에 따른 계약변경 등) ① 제15조제1항에 따라 현장설명서(현장설명을 실시하지 않는 경우에는 계약특수조건)에 명시된 비작업일수 및 시공조건이 당초와 차이가 발생하여 공사 수행이 지연되는 경우 제16조 제1항다호를 준용하여 계약기간 변경 및 계약금액을 조정할 수 있다.

② 시공자는 제1항의 사유로 계약의 변경이 필요한 경우에는 지체 없이 발주청에 보고하여야 하며, 공사기간 연장이 예상되는 시점부터 투입인력, 제경비 투입계획 등을 면밀히 분석하여 현장 운용계획을 수립하여 시행하여야 한다.

제18조(공사기간 변경에 따른 실비산정) ① 발주청은 제16조 및 제17조에 의거 계약금액을 조정하는 경우 「정부 입찰·계약 집행기준」제15장 및 「지방자체단체 입찰 및 계약집행기준」 제13장에 따라 실비를 초과하지 않는 범위 내에서 계약금액을 조정한다.

② 제1항에 따른 실비의 산정은 별표 6을 참고하여 산정한다.

제19조(세부시행기준) ① 발주청은 공사특성 및 지역여건의 반영, 단위작업별 생산성 등 시설물별 공사기간의 산정 및 보정에 필요한 세부기준을 정하여 운영할 수 있다. 발주청이 세부기준을 정한 경우 국토교통부에 세부기준을 제출하여야 한다.

② 발주청은 실적 데이터 기반의 공사기간 산정이 가능하도록 실제 공사기간, 표준작업량, 연장 사유 및 기간 등의 실적자료를 축적하여 공사기간 산정을 위한 기초자료로 활용할 수 있다.

부   칙

제1조(시행일) 이 훈령은 2019.3.1부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 훈령 시행 이후 최초로 입찰공고 하는 건설사업의 기본설계 및 실시설계부터 적용한다. 다만, 발주청은 필요시 이 훈령의 시행 일 이전에 입찰공고 하는 공사에도 이 훈령을 적용할 수 있다.

제3조(유효기간) 이 훈령은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령령 제248호)에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2022년 6월 30일까지 효력을 가진다.

별표 1. 법정 공휴일수(2019-2028년)

번호	구분	월간 법정공휴일												소계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	2019년	5	7	6	4	6	6	4	5	8	6	4	6	67
2	2020년	8	4	5	5	7	5	4	6	5	8	5	5	67
3	2021년	6	8	5	4	8	4	4	5	7	6	4	5	66
4	2022년	7	6	5	4	6	5	5	5	7	6	4	4	64
5	2023년	8	4	5	5	7	5	5	5	7	8	4	6	69
6	2024년	5	7	6	4	7	6	4	5	8	6	4	6	68
7	2025년	8	4	6	4	7	6	4	6	4	9	5	5	68
8	2026년	5	7	5	4	7	5	4	6	8	6	5	5	67
9	2027년	6	7	5	4	8	4	4	5	7	6	4	5	65
10	2028년	9	4	5	5	7	5	5	5	4	9	4	6	68
※ 공휴일은 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 관공서의 공휴일과 「근로기준법」에 따른 근로자의 날을 적용. 단, 공직선거법 제34조에 따른 임기만료에 따른 선거의 선거일과 기타 정부에서 수시 지정하는 날은 매년 불규칙하므로 비작업일수 산정에서 제외 ※ 관공서의 공휴일 · 일요일(52일) · 명절(6일) : 설 연휴, 추석 연휴(대체공휴일 시행) · 국경일(4일) : 3·1절, 광복절, 개천절, 한글날 · 기타(5일) : 1월 1일, 5월 5일(대체공휴일 시행), 6월 6일, 부처님 오신 날(음력 4월 8일), 12월 25일 · 공직선거법 제34조에 따른 임기만료에 따른 선거의 선거일 · 기타 정부에서 수시 지정하는 날

별표 2. 기상상태에 따른 지역별 비작업일수(2008년-2017년)

(1) 혹서기 : 33°C 이상

번호	도	지역	월평균 기상데이터												소계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	강원도	강릉	0	0	0	0	0.7	0.5	5.8	5.2	0	0	0	0	12.2
2	강원도	대관령	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	강원도	동해	0	0	0	0	0	0.3	2.8	2.6	0	0	0	0	5.7
4	강원도	북강릉	0	0	0	0	0.2	0.2	3.5	4	0	0	0	0	7.9
5	강원도	삼척	0	0	0	0	0	0.2	0.3	1	0	0	0	0	1.5
6	강원도	속초	0	0	0	0	0.1	0.2	4	1.9	0	0	0	0	6.2
7	강원도	영월	0	0	0	0	0.6	2	3.5	7.1	0.3	0	0	0	13.5
8	강원도	원주	0	0	0	0	0.2	0.8	3.6	7.7	0.4	0	0	0	12.7
9	강원도	인제	0	0	0	0	0.1	0.4	1.2	4.1	0	0	0	0	5.8
10	강원도	정선군	0	0	0	0	0.2	0.6	2.5	4	0	0	0	0	7.3
11	강원도	철원	0	0	0	0	0	0.3	0.5	3.8	0	0	0	0	4.6
12	강원도	춘천	0	0	0	0	0.1	1.2	2.4	6.3	0	0	0	0	10
13	강원도	홍천	0	0	0	0	0.5	2.3	5.8	9.3	0.3	0	0	0	18.2
14	경기도	동두천	0	0	0	0	0.2	1.6	2.8	5.8	0	0	0	0	10.4
15	경기도	성산	0	0	0	0	0	0	1	3.1	0	0	0	0	4.1
16	경기도	수원	0	0	0	0	0.1	0.9	2.6	8.5	0.3	0	0	0	12.4
17	경기도	양평	0	0	0	0	0.1	0.6	4	7.4	0.1	0	0	0	12.2
18	경기도	이천	0	0	0	0	0.1	0.7	3.6	8.1	0	0	0	0	12.5
19	경기도	파주	0	0	0	0	0	1.3	1.1	6.7	0	0	0	0	9.1
20	경상남도	거제	0	0	0	0	0.2	0	2.6	6.3	0.2	0	0	0	9.3
21	경상남도	거창	0	0	0	0	0.5	0.7	5.7	7.3	0	0	0	0	14.2
22	경상남도	김해시	0	0	0	0	0.4	0.2	7.1	11.4	0.9	0	0	0	20
23	경상남도	남해	0	0	0	0	0.3	0	5	8	0.1	0	0	0	13.4
24	경상남도	밀양	0	0	0	0	0.9	1.7	11.6	13.4	1.8	0	0	0	29.4
25	경상남도	북창원	0	0	0	0	0.4	0.3	4.1	7.5	0.3	0	0	0	12.6
26	경상남도	산청	0	0	0	0	0.6	0.5	5.1	8.5	0.4	0	0	0	15.1
27	경상남도	의령군	0	0	0	0	0.8	0.8	4.1	7	0.2	0	0	0	12.9
28	경상남도	의성	0	0	0	0	0.7	2.7	9.9	11.8	0.7	0	0	0	25.8
29	경상남도	진주	0	0	0	0	0.2	0.1	4.7	8.1	0.3	0	0	0	13.4
30	경상남도	창원	0	0	0	0	0.2	0.1	4.3	7.2	0.2	0	0	0	12
31	경상남도	통영	0	0	0	0	0	0	0.2	2.9	0.1	0	0	0	3.2
32	경상남도	함양군	0	0	0	0	0.6	0.4	6.5	8.2	0.1	0	0	0	15.8
33	경상남도	합천	0	0	0	0	1.2	2.3	10.4	13.3	1.3	0	0	0	28.5
34	경상북도	경주시	0	0	0	0	1	1.1	8.1	7.6	0.7	0	0	0	18.5
35	경상북도	구미	0	0	0	0	0.7	1.6	8.5	10.3	0.2	0	0	0	21.3
36	경상북도	문경	0	0	0	0	0.3	0.5	3.5	6.6	0	0	0	0	10.9
37	경상북도	봉화	0	0	0	0	0	0.3	1.3	2.8	0.1	0	0	0	4.5
38	경상북도	상주	0	0	0	0	0.5	1.4	6.3	8.3	0.2	0	0	0	16.7
39	경상북도	안동	0	0	0	0	0.5	1.3	7.6	9.8	0.5	0	0	0	19.7
40	경상북도	영덕	0	0	0	0	0.4	1.4	9.1	6.7	0.3	0	0	0	17.9
41	경상북도	영주	0	0	0	0	0.2	0.5	2.3	7.1	0.1	0	0	0	10.2
42	경상북도	영천	0	0	0	0	0.8	1.1	8.8	8.9	0.6	0	0	0	20.2
43	경상북도	울릉도	0	0	0	0	0	0	0.2	0.5	0	0	0	0	0.7
44	경상북도	울진	0	0	0	0	0.1	0.4	3.2	1.9	0	0	0	0	5.6
45	경상북도	청송군	0	0	0	0	0.6	0.5	3.8	6	0.1	0	0	0	11
46	경상북도	포항	0	0	0	0	0.2	1.1	8.9	6.9	0.4	0	0	0	17.5
47	광주광역시	광주	0	0	0	0	0.5	0.9	6.3	9.9	1	0	0	0	18.6
48	대구광역시	고산	0	0	0	0	0	0	0.5	2	0	0	0	0	2.5
49	대구광역시	대구	0	0	0	0	1.2	3	12.6	13.5	1.3	0	0	0	31.6
50	대구광역시	대구 기상대	0	0	0	0	0.5	0.2	0.9	0.1	0	0	0	0	1.7
51	대전광역시	대전	0	0	0	0	0.1	0.6	2.7	7.3	0	0	0	0	10.7
52	부산광역시	부산	0	0	0	0	0	0	0.8	3.2	0	0	0	0	4
53	서울특별시	서울	0	0	0	0	0.1	0.4	2.4	5.4	0	0	0	0	8.3
54	울산광역시	울산	0	0	0	0	0.2	0.4	7.1	7.7	0.2	0	0	0	15.6
55	인천광역시	강화	0	0	0	0	0	0.1	0.5	2.4	0	0	0	0	3
56	인천광역시	백령도(인천)	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1
57	인천광역시	인천	0	0	0	0	0	0.2	0	2.2	0	0	0	0	2.4
58	전라남도	강진군	0	0	0	0	0	0.1	1.2	4.4	0	0	0	0	5.7
59	전라남도	고흥	0	0	0	0	0	0	2.6	4.4	0.5	0	0	0	7.5
60	전라남도	광양시	0	0	0	0	0.3	0	4.5	6.8	0.4	0	0	0	12
61	전라남도	목표	0	0	0	0	0	0	1	4.2	0	0	0	0	5.2
62	전라남도	보성군(여수기상대)	0	0	0	0	0.1	0	2.2	5.8	0.2	0	0	0	8.3
63	전라남도	순천	0	0	0	0	0	0.1	3	5.3	0.1	0	0	0	8.5
64	전라남도	순천기상대	0	0	0	0	0.3	0.1	5.5	11.1	0.6	0	0	0	17.6
65	전라남도	여수	0	0	0	0	0	0	0.2	1.4	0	0	0	0	1.6
66	전라남도	영광군	0	0	0	0	0	0	3.9	8.1	0.1	0	0	0	12.1
67	전라남도	완도	0	0	0	0	0	0	2.9	5.1	0	0	0	0	8
68	전라남도	장흥	0	0	0	0	0.1	0	2.6	4.8	0.5	0	0	0	8
69	전라남도	주암(순천)	0	0	0	0	0	0.4	2.2	2.9	0.9	0	0	0	6.4
70	전라남도	진도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	전라남도	진도군	0	0	0	0	0	0	0.3	1.8	0	0	0	0	2.1
72	전라남도	해남	0	0	0	0	0	0	3.2	6.7	0.2	0	0	0	10.1
73	전라남도	흑산도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	전라북도	고창	0	0	0	0	0	0	2.6	6.1	0	0	0	0	8.7
75	전라북도	고창군	0	0	0	0	0.2	0.1	5.7	9.9	0.6	0	0	0	16.5
76	전라북도	군산	0	0	0	0	0	0	1.7	4.7	0.2	0	0	0	6.6
77	전라북도	남원	0	0	0	0	0.3	0.5	4.7	8.4	0.7	0	0	0	14.6
78	전라북도	부안	0	0	0	0	0	0	3.6	8.1	0.4	0	0	0	12.1
79	전라북도	순창군	0	0	0	0	0.3	0.2	4.3	8.3	0.5	0	0	0	13.6
80	전라북도	임실	0	0	0	0	0.1	0.5	3.2	7	0.3	0	0	0	11.1
81	전라북도	장수	0	0	0	0	0	0	0.5	2.3	0	0	0	0	2.8
82	전라북도	전주	0	0	0	0	0.4	1.3	6.7	10.9	1	0	0	0	20.3
83	전라북도	정읍	0	0	0	0	0.2	0.6	2.5	4	0	0	0	0	7.3
84	제주특별시	서귀포	0	0	0	0	0	0	0.6	2.6	0.1	0	0	0	3.3
85	제주특별시	제주	0	0	0	0	0	0.1	5.2	5.2	0.2	0	0	0	10.7
86	충청남도	금산	0	0	0	0	0.2	0.4	4.7	8.9	0.2	0	0	0	14.4
87	충청남도	보령	0	0	0	0	0	0	0.8	3	0.1	0	0	0	3.9
88	충청남도	부여	0	0	0	0	0	0.3	2.9	8	0.3	0	0	0	11.5
89	충청남도	서산	0	0	0	0	0	0	0.3	3.5	0	0	0	0	3.8
90	충청남도	천안	0	0	0	0	0.1	0.2	2.9	6.8	0.1	0	0	0	10.1
91	충청남도	홍성	0	0	0	0	0	0	0.3	2.5	0	0	0	0	2.8
92	충청북도	보은	0	0	0	0	0.1	0.3	2.6	5.5	0	0	0	0	8.5
93	충청북도	제천	0	0	0	0	0.1	0.2	1.3	5	0	0	0	0	6.6
94	충청북도	청주	0	0	0	0	0.3	0.5	6.2	9.1	0.4	0	0	0	16.5
95	충청북도	추풍령	0	0	0	0	0.1	0.1	2.3	4.4	0	0	0	0	6.9
96	충청북도	충주	0	0	0	0	0.1	0.6	3.7	7.6	0.2	0	0	0	12.2

(2) 혹서기 : 35°C 이상

번호	도	지역	월평균 기상데이터												소계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	강원도	강릉	0	0	0	0	0	0.1	1	2.3	0	0	0	0	3.4
2	강원도	대관령	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	강원도	동해	0	0	0	0	0	0.1	0.5	1.2	0	0	0	0	1.8
4	강원도	북강릉	0	0	0	0	0	0.1	0.6	1	0	0	0	0	1.7
5	강원도	삼척	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1
6	강원도	속초	0	0	0	0	0	0.1	0.2	0.7	0	0	0	0	1
7	강원도	영월	0	0	0	0	0.1	0.2	0.3	1.8	0	0	0	0	2.4
8	강원도	원주	0	0	0	0	0	0.1	0.6	1.9	0	0	0	0	2.6
9	강원도	인제	0	0	0	0	0	0	0.2	0.7	0	0	0	0	0.9
10	강원도	정선군	0	0	0	0	0	0	0	1.3	0	0	0	0	1.3
11	강원도	철원	0	0	0	0	0	0	0.1	0.2	0	0	0	0	0.3
12	강원도	춘천	0	0	0	0	0	0	0.2	1.3	0	0	0	0	1.5
13	강원도	홍천	0	0	0	0	0.1	0.2	0.7	3.7	0	0	0	0	4.7
14	경기도	동두천	0	0	0	0	0	0.2	0.1	2.2	0	0	0	0	2.5
15	경기도	성산	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1
16	경기도	수원	0	0	0	0	0	0	0.3	2.3	0	0	0	0	2.6
17	경기도	양평	0	0	0	0	0	0	0.3	2	0	0	0	0	2.3
18	경기도	이천	0	0	0	0	0	0	0	2.1	0	0	0	0	2.1
19	경기도	파주	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0.8	0	0	0	0	1
20	경상남도	거제	0	0	0	0	0	0	0.3	1.9	0	0	0	0	2.2
21	경상남도	거창	0	0	0	0	0	0.1	0.6	1	0	0	0	0	1.7
22	경상남도	김해시	0	0	0	0	0	0	1.6	4.8	0.2	0	0	0	6.6
23	경상남도	남해	0	0	0	0	0	0	0.5	2.8	0	0	0	0	3.3
24	경상남도	밀양	0	0	0	0	0.4	0.4	4.1	7.3	0.2	0	0	0	12.4
25	경상남도	북창원	0	0	0	0	0	0	0.6	2.1	0	0	0	0	2.7
26	경상남도	산청	0	0	0	0	0	0	0.9	2.7	0	0	0	0	3.6
27	경상남도	의령군	0	0	0	0	0.1	0.2	0.8	1.5	0	0	0	0	2.6
28	경상남도	의성	0	0	0	0	0.2	0.2	3.4	6.1	0	0	0	0	9.9
29	경상남도	진주	0	0	0	0	0	0	0.9	2.2	0	0	0	0	3.1
30	경상남도	창원	0	0	0	0	0	0	0.8	2.4	0	0	0	0	3.2
31	경상남도	통영	0	0	0	0	0	0	0.1	0.3	0	0	0	0	0.4
32	경상남도	함양군	0	0	0	0	0.1	0.1	1.6	3.3	0	0	0	0	5.1
33	경상남도	합천	0	0	0	0	0.2	0.3	3.4	5.6	0.1	0	0	0	9.6
34	경상북도	경주시	0	0	0	0	0.3	0.1	3.8	3.9	0.1	0	0	0	8.2
35	경상북도	구미	0	0	0	0	0.2	0	1.4	4.2	0	0	0	0	5.8
36	경상북도	문경	0	0	0	0	0	0.1	0	1.4	0	0	0	0	1.5
37	경상북도	봉화	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0.3
38	경상북도	상주	0	0	0	0	0.1	0.4	0.7	3.6	0	0	0	0	4.8
39	경상북도	안동	0	0	0	0	0	0.2	1	3.7	0	0	0	0	4.9
40	경상북도	영덕	0	0	0	0	0.1	0.4	3	3.4	0	0	0	0	6.9
41	경상북도	영주	0	0	0	0	0.1	0	0.3	1.4	0	0	0	0	1.8
42	경상북도	영천	0	0	0	0	0.3	0.1	3.4	4.3	0	0	0	0	8.1
43	경상북도	울릉도	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.2
44	경상북도	울진	0	0	0	0	0	0.1	0.6	0.9	0	0	0	0	1.6
45	경상북도	청송군	0	0	0	0	0.1	0.2	0.6	1.7	0	0	0	0	2.6
46	경상북도	포항	0	0	0	0	0	0.2	3.3	3.2	0	0	0	0	6.7
47	광주광역시	광주	0	0	0	0	0	0	1.1	3.4	0	0	0	0	4.5
48	대구광역시	고산	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1
49	대구광역시	대구	0	0	0	0	0.4	0.5	5.4	5.9	0.1	0	0	0	12.3
50	대구광역시	대구 기상대	0	0	0	0	0.2	0	0.4	0	0	0	0	0	0.6
51	대전광역시	대전	0	0	0	0	0	0.1	0.1	2.4	0	0	0	0	2.6
52	부산광역시	부산	0	0	0	0	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0.7
53	서울특별시	서울	0	0	0	0	0	0	0.2	1.9	0	0	0	0	2.1
54	울산광역시	울산	0	0	0	0	0	0	1.7	2.7	0	0	0	0	4.4
55	인천광역시	강화	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0.3
56	인천광역시	백령도(인천)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	인천광역시	인천	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.2
58	전라남도	강진군	0	0	0	0	0	0	0.1	1.1	0	0	0	0	1.2
59	전라남도	고흥	0	0	0	0	0	0	0.2	1	0.1	0	0	0	1.3
60	전라남도	광양시	0	0	0	0	0.1	0	0.9	2.8	0	0	0	0	3.8
61	전라남도	목표	0	0	0	0	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0.7
62	전라남도	보성군(여수기상대)	0	0	0	0	0	0	0.3	1.1	0	0	0	0	1.4
63	전라남도	순천	0	0	0	0	0	0	0.5	1.7	0	0	0	0	2.2
64	전라남도	순천기상대	0	0	0	0	0	0.1	1.2	4.2	0.2	0	0	0	5.7
65	전라남도	여수	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1
66	전라남도	영광군	0	0	0	0	0	0	0.2	1.7	0	0	0	0	1.9
67	전라남도	완도	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0	0	0	0	1.2
68	전라남도	장흥	0	0	0	0	0	0	0.2	1.1	0	0	0	0	1.3
69	전라남도	주암(순천)	0	0	0	0	0	0	0.4	0.1	0	0	0	0	0.5
70	전라남도	진도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	전라남도	진도군	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1
72	전라남도	해남	0	0	0	0	0	0	0	2.3	0	0	0	0	2.3
73	전라남도	흑산도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	전라북도	고창	0	0	0	0	0	0	0.3	1.3	0	0	0	0	1.6
75	전라북도	고창군	0	0	0	0	0	0	1.2	4	0	0	0	0	5.2
76	전라북도	군산	0	0	0	0	0	0	0.1	0.7	0	0	0	0	0.8
77	전라북도	남원	0	0	0	0	0	0	0.2	2	0	0	0	0	2.2
78	전라북도	부안	0	0	0	0	0	0	0.2	1.6	0	0	0	0	1.8
79	전라북도	순창군	0	0	0	0	0	0	1	2.2	0	0	0	0	3.2
80	전라북도	임실	0	0	0	0	0	0	0.1	1.8	0	0	0	0	1.9
81	전라북도	장수	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1
82	전라북도	전주	0	0	0	0	0	0	1.1	4.2	0	0	0	0	5.3
83	전라북도	정읍	0	0	0	0	0.3	1	8.4	10.8	0.5	0	0	0	21
84	제주특별시	서귀포	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0.4
85	제주특별시	제주	0	0	0	0	0	0	0.9	0.7	0	0	0	0	1.6
86	충청남도	금산	0	0	0	0	0.1	0	0.2	1.8	0	0	0	0	2.1
87	충청남도	보령	0	0	0	0	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0.7
88	충청남도	부여	0	0	0	0	0	0	0.1	2	0	0	0	0	2.1
89	충청남도	서산	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0.5
90	충청남도	천안	0	0	0	0	0	0	0	1.1	0	0	0	0	1.1
91	충청남도	홍성	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1
92	충청북도	보은	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0.8
93	충청북도	제천	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0	0	0	0	1.2
94	충청북도	청주	0	0	0	0	0	0	0.4	2.7	0	0	0	0	3.1
95	충청북도	추풍령	0	0	0	0	0.1	0	0	0.5	0	0	0	0	0.6
96	충청북도	충주	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0	0	0	0	2.2

(3) 동절기 : 일최고기온 0°C 이하

번호	도	지역	월평균 기상데이터												소계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	강원도	강릉	2.6	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.8	5.5
2	강원도	대관령	21.5	12.5	3.6	0	0	0	0	0	0	0	2	15.2	54.8
3	강원도	동해	2.6	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	4.6
4	강원도	북강릉	3.7	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.6	8.2
5	강원도	삼척	14.9	8	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0.6	9.8	34.4
6	강원도	속초	3.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	8
7	강원도	영월	9.3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	6.2	17.6
8	강원도	원주	10.6	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	7.4	20.6
9	강원도	인제	12.1	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	8.6	23.8
10	강원도	정선군	8	2.3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.1	6.2	16.8
11	강원도	철원	14.2	4.9	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.5	11	30.7
12	강원도	춘천	11.5	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	9.6	23.6
13	강원도	홍천	10.4	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	9	21.9
14	경기도	동두천	9.7	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	7.4	19.1
15	경기도	성산	0.1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3
16	경기도	수원	9.8	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.8	18.3
17	경기도	양평	10.4	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.6	20.3
18	경기도	이천	9.6	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	7.4	19.5
19	경기도	파주	11.2	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	9.8	24.6
20	경상남도	거제	0.3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
21	경상남도	거창	3.2	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7	5.6
22	경상남도	김해시	0.4	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.7
23	경상남도	남해	0.5	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.8
24	경상남도	밀양	0.5	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.8
25	경상남도	북창원	0.9	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	1.4
26	경상남도	산청	2.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	3.1
27	경상남도	의령군	0.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
28	경상남도	의성	4.1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3	7
29	경상남도	진주	0.8	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	1.1
30	경상남도	창원	0.5	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.8
31	경상남도	통영	0.3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
32	경상남도	함양군	2.1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	3.1
33	경상남도	합천	0.7	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1.3
34	경상북도	경주시	2.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.6
35	경상북도	구미	4.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	1.9	7
36	경상북도	문경	7.1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13.9
37	경상북도	봉화	8.2	2.3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	6.3	17
38	경상북도	상주	6.6	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	12.4
39	경상북도	안동	5.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.4	9.9
40	경상북도	영덕	2.5	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	4.4
41	경상북도	영주	9	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	6.3	17.7
42	경상북도	영천	2.7	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	4.9
43	경상북도	울릉도	4	3.7	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2.1	10
44	경상북도	울진	1.3	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	2
45	경상북도	청송군	4.3	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.3	9
46	경상북도	포항	0.9	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	1.6
47	광주광역시	광주	3.3	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.1
48	대구광역시	고산	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
49	대구광역시	대구	2.1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	3.5
50	대구광역시	대구 기상대	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.2
51	대전광역시	대전	6.6	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.7	11.6
52	부산광역시	부산	0.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
53	서울특별시	서울	11.7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	8.8	24.7
54	울산광역시	울산	0.9	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	1.6
55	인천광역시	강화	12.2	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	8.8	25.6
56	인천광역시	백령도(인천)	12.8	7.5	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0.2	7	28.2
57	인천광역시	인천	11.6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	7.9	23.6
58	전라남도	강진군	2.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	3.1
59	전라남도	고흥	0.7	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	1.2
60	전라남도	광양시	0.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.6
61	전라남도	목표	2	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	3.5
62	전라남도	보성군(여수기상대)	0.6	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	1.2
63	전라남도	순천	2.2	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	3.3
64	전라남도	순천기상대	0.6	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.8
65	전라남도	여수	1.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	1.7
66	전라남도	영광군	5.9	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.8	9.2
67	전라남도	완도	1.3	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	2.1
68	전라남도	장흥	1.4	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	2.2
69	전라남도	주암(순천)	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1.8
70	전라남도	진도	8.9	3.7	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	3.7	16.6
71	전라남도	진도군	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3
72	전라남도	해남	1.6	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	2.7
73	전라남도	흑산도	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	1.5
74	전라북도	고창	3.7	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7	6.6
75	전라북도	고창군	5.4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.8	8.2
76	전라북도	군산	6.1	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.7	10.4
77	전라북도	남원	5.7	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	9.1
78	전라북도	부안	5.9	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3	9.6
79	전라북도	순창군	5.8	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3	9.5
80	전라북도	임실	7	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.3	13.8
81	전라북도	장수	8.8	2.7	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.1	5.9	17.7
82	전라북도	전주	5.5	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	8.3
83	전라북도	정읍	5.5	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	9.4
84	제주특별시	서귀포	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
85	제주특별시	제주	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
86	충청남도	금산	6.8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.1	12.9
87	충청남도	보령	6.3	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	10.6
88	충청남도	부여	5.6	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	9.7
89	충청남도	서산	8.6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	4.4	16.1
90	충청남도	천안	9.1	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.4	17
91	충청남도	홍성	1.2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	2
92	충청북도	보은	9.3	2.3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	5.5	17.3
93	충청북도	제천	12.2	3.6	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.2	8.6	24.7
94	충청북도	청주	8.1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.3	15.6
95	충청북도	추풍령	9	2.9	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	6.6	18.7
96	충청북도	충주	10.3	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	7	19.8

(4) 동절기 : 신적설 5㎝ 이상

번호	도	지역	월평균 기상데이터												소계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	강원도	강릉	0.3	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
2	강원도	대관령	2.3	1.7	2.6	0.5	0	0	0	0	0	0	0.6	1.9	9.6
3	강원도	동해	0.4	0.8	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	1.8
4	강원도	북강릉	1.4	2.3	1.3	0.1	0	0	0	0	0	0	0.1	0.8	6
5	강원도	삼척	0.6	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8
6	강원도	속초	1.1	1.9	1.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0.1	0.5	4.9
7	강원도	영월	0.3	0.2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.9
8	강원도	원주	0.3	0.4	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1.5
9	강원도	인제	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
10	강원도	정선군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	강원도	철원	0.8	0.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.8	2.2
12	강원도	춘천	0.8	0.3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	2.4
13	강원도	홍천	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
14	경기도	동두천	0.2	0.1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.8
15	경기도	성산	0.6	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1.4
16	경기도	수원	0.6	0.1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.8	2
17	경기도	양평	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
18	경기도	이천	0.2	0.1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	1
19	경기도	파주	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.9
20	경상남도	거제	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	경상남도	거창	0.1	0.1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	1
22	경상남도	김해시	0	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.3
23	경상남도	남해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	경상남도	밀양	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	경상남도	북창원	0	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.3
26	경상남도	산청	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	경상남도	의령군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1
28	경상남도	의성	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	경상남도	진주	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1
30	경상남도	창원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1
31	경상남도	통영	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1
32	경상남도	함양군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3
33	경상남도	합천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	경상북도	경주시	0.1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.5
35	경상북도	구미	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.3
36	경상북도	문경	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	경상북도	봉화	0.1	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3
38	경상북도	상주	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.4
39	경상북도	안동	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	1
40	경상북도	영덕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	경상북도	영주	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
42	경상북도	영천	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	경상북도	울릉도	7.3	4.7	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0.1	3.8	16.8
44	경상북도	울진	0.7	1.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	2.1
45	경상북도	청송군	0.1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.7
46	경상북도	포항	0.1	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
47	광주광역시	광주	1.6	0.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.3	1.9	4.1
48	대구광역시	고산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	대구광역시	대구	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.5
50	대구광역시	대구 기상대	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	대전광역시	대전	0.4	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	1.3
52	부산광역시	부산	0	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
53	서울특별시	서울	0.9	0.6	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	2.3
54	울산광역시	울산	0.1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.4
55	인천광역시	강화	0.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3
56	인천광역시	백령도(인천)	1.2	0.5	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	1.2	3.1
57	인천광역시	인천	0.7	0.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	1.6
58	전라남도	강진군	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.4
59	전라남도	고흥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	전라남도	광양시	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	전라남도	목표	1	0.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	2.9
62	전라남도	보성군(여수기상대)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2
63	전라남도	순천	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0.5
64	전라남도	순천기상대	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.2
65	전라남도	여수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	전라남도	영광군	0.3	0.2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.9
67	전라남도	완도	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0.5
68	전라남도	장흥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	전라남도	주암(순천)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2
70	전라남도	진도	0.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4	1.9
71	전라남도	진도군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	전라남도	해남	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	전라남도	흑산도	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0.8
74	전라북도	고창	0.7	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	1.5	2.6
75	전라북도	고창군	1.6	0.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.3	2.1	4.3
76	전라북도	군산	0.6	0.1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.3	1.6	2.8
77	전라북도	남원	0.2	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.8
78	전라북도	부안	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
79	전라북도	순창군	0.5	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	1	1.8
80	전라북도	임실	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
81	전라북도	장수	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
82	전라북도	전주	0.5	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.2	1.2	2.1
83	전라북도	정읍	0.9	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.2	1.3	2.6
84	제주특별시	서귀포	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.4
85	제주특별시	제주	0.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3
86	충청남도	금산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	충청남도	보령	0.4	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	1.7	2.6
88	충청남도	부여	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	충청남도	서산	1.1	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0.4	1.7	3.8
90	충청남도	천안	0.7	0.1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.2	1.4	2.6
91	충청남도	홍성	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1
92	충청북도	보은	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	충청북도	제천	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
94	충청북도	청주	0.5	0.2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0.3	1	2.3
95	충청북도	추풍령	0.1	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.5
96	충청북도	충주	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4

(5) 동절기 : 일최고기온 0°C 이하 및 신적설 5㎝ 이상

번호	도	지역	월평균 기상데이터												소계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	강원도	강릉	2.9	1.1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1.8	6
2	강원도	대관령	23.8	14.2	6.2	0.5	0	0	0	0	0	0	2.6	17.1	64.4
3	강원도	동해	3	1.6	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3	6.4
4	강원도	북강릉	5.1	4.2	1.3	0.1	0	0	0	0	0	0	0.1	3.4	14.2
5	강원도	삼척	15.5	8	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0.6	9.8	35.2
6	강원도	속초	4.7	3.5	1.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0.1	3.3	12.9
7	강원도	영월	9.6	2.2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0.1	6.3	18.5
8	강원도	원주	10.9	2.9	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0.1	7.9	22.1
9	강원도	인제	12.2	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	8.6	23.9
10	강원도	정선군	8	2.3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.1	6.2	16.8
11	강원도	철원	15	5.3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.6	11.8	32.9
12	강원도	춘천	12.3	2.7	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	10.8	26
13	강원도	홍천	10.5	2.3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.2	9	22.1
14	경기도	동두천	9.9	2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.1	7.7	19.9
15	경기도	성산	0.7	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1.7
16	경기도	수원	10.4	2.8	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0.1	6.6	20.3
17	경기도	양평	10.5	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.6	20.4
18	경기도	이천	9.8	2.5	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0.1	7.7	20.5
19	경기도	파주	11.4	3.6	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.2	10.1	25.5
20	경상남도	거제	0.3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
21	경상남도	거창	3.3	0.8	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3	6.6
22	경상남도	김해시	0.4	0.3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	1
23	경상남도	남해	0.5	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.8
24	경상남도	밀양	0.5	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.8
25	경상남도	북창원	0.9	0.3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	1.7
26	경상남도	산청	2.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	3.1
27	경상남도	의령군	0.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.6
28	경상남도	의성	4.1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3	7
29	경상남도	진주	0.8	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	1.2
30	경상남도	창원	0.5	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.9
31	경상남도	통영	0.3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.6
32	경상남도	함양군	2.1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.4
33	경상남도	합천	0.7	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1.3
34	경상북도	경주시	2.2	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	4.1
35	경상북도	구미	4.6	0.5	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	2	7.3
36	경상북도	문경	7.1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13.9
37	경상북도	봉화	8.3	2.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0.1	6.3	17.3
38	경상북도	상주	6.7	1.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	12.8
39	경상북도	안동	5.7	1.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	3.8	10.9
40	경상북도	영덕	2.5	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	4.4
41	경상북도	영주	9	2.3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	6.3	17.8
42	경상북도	영천	2.7	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	4.9
43	경상북도	울릉도	11.3	8.4	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	5.9	26.8
44	경상북도	울진	2	1.5	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	4.1
45	경상북도	청송군	4.4	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.5	9.7
46	경상북도	포항	1	0.3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	2.1
47	광주광역시	광주	4.9	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.3	2.9	9.2
48	대구광역시	고산	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
49	대구광역시	대구	2.2	0.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3	4
50	대구광역시	대구 기상대	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.2
51	대전광역시	대전	7	1.3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	12.9
52	부산광역시	부산	0.4	0.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7
53	서울특별시	서울	12.6	4.6	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.2	9.4	27
54	울산광역시	울산	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	2
55	인천광역시	강화	12.4	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	8.8	25.9
56	인천광역시	백령도(인천)	14	8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0.3	8.2	31.3
57	인천광역시	인천	12.3	4.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	8.3	25.2
58	전라남도	강진군	2.2	0.5	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	3.5
59	전라남도	고흥	0.7	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	1.2
60	전라남도	광양시	0.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.6
61	전라남도	목표	3	0.9	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2.4	6.4
62	전라남도	보성군(여수기상대)	0.6	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	1.4
63	전라남도	순천	2.3	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	3.8
64	전라남도	순천기상대	0.6	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	1
65	전라남도	여수	1.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	1.7
66	전라남도	영광군	6.2	1.7	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	10.1
67	전라남도	완도	1.4	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	2.6
68	전라남도	장흥	1.4	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	2.2
69	전라남도	주암(순천)	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	2
70	전라남도	진도	9.3	3.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	5.1	18.5
71	전라남도	진도군	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3
72	전라남도	해남	1.6	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	2.7
73	전라남도	흑산도	1.2	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	2.3
74	전라북도	고창	4.4	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	3.2	9.2
75	전라북도	고창군	7	1.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.3	3.9	12.5
76	전라북도	군산	6.7	1.7	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.3	4.3	13.2
77	전라북도	남원	5.9	1.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2.7	9.9
78	전라북도	부안	6	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3	9.8
79	전라북도	순창군	6.3	1.5	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	3.3	11.3
80	전라북도	임실	7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.3	14
81	전라북도	장수	8.8	2.8	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.1	5.9	17.8
82	전라북도	전주	6	0.9	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.2	3.1	10.4
83	전라북도	정읍	6.4	1.4	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.2	3.8	12
84	제주특별시	서귀포	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.5
85	제주특별시	제주	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4
86	충청남도	금산	6.8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.1	12.9
87	충청남도	보령	6.7	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	4.5	13.2
88	충청남도	부여	5.6	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	9.7
89	충청남도	서산	9.7	3.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0.5	6.1	19.9
90	충청남도	천안	9.8	2.6	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.2	6.8	19.6
91	충청남도	홍성	1.2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	2.1
92	충청북도	보은	9.3	2.3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	5.5	17.3
93	충청북도	제천	12.3	3.6	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.2	8.6	24.9
94	충청북도	청주	8.6	2.4	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0.3	6.3	17.9
95	충청북도	추풍령	9.1	2.9	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0.1	6.7	19.2
96	충청북도	충주	10.5	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	7	20.2

(6) 동절기 : 일최저기온 -12°C 이하

번호	도	지역	월평균 기상데이터												소계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	강원도	강릉	0.3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
2	강원도	대관령	18.7	10.8	2	0	0	0	0	0	0	0	0.3	12.1	43.9
3	강원도	동해	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4
4	강원도	북강릉	0.8	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	1.4
5	강원도	삼척	12.1	4.7	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	5.3	22.4
6	강원도	속초	0.6	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8
7	강원도	영월	11.3	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.6	19.8
8	강원도	원주	7.6	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.3	12.2
9	강원도	인제	14.2	5.1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	6.9	26.4
10	강원도	정선군	7.6	2.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	3.9	14
11	강원도	철원	18	7.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.2	11	36.7
12	강원도	춘천	12.7	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.9	23.5
13	강원도	홍천	13.8	4.5	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	7.8	26.2
14	경기도	동두천	9.8	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.6	18.1
15	경기도	성산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	경기도	수원	4.7	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	6.9
17	경기도	양평	10.2	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.7	17.3
18	경기도	이천	10.4	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.2	18.3
19	경기도	파주	15	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.1	30.3
20	경상남도	거제	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	경상남도	거창	5.4	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	7.2
22	경상남도	김해시	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
23	경상남도	남해	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	경상남도	밀양	1.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2
25	경상남도	북창원	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
26	경상남도	산청	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.6
27	경상남도	의령군	2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	2.4
28	경상남도	의성	13.1	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.1	23.9
29	경상남도	진주	1.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	1.6
30	경상남도	창원	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
31	경상남도	통영	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	경상남도	함양군	1.3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	1.5
33	경상남도	합천	2.5	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	2.9
34	경상북도	경주시	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1
35	경상북도	구미	0.9	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	1.5
36	경상북도	문경	2.8	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.7
37	경상북도	봉화	16	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	8.3	30.6
38	경상북도	상주	1.4	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	2.5
39	경상북도	안동	5.7	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	8.6
40	경상북도	영덕	0.4	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6
41	경상북도	영주	6.6	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7	10
42	경상북도	영천	1.8	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	2.6
43	경상북도	울릉도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	경상북도	울진	0.3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
45	경상북도	청송군	7.5	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.7	12.5
46	경상북도	포항	0.3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4
47	광주광역시	광주	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	대구광역시	고산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	대구광역시	대구	0.3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
50	대구광역시	대구 기상대	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	대전광역시	대전	2.2	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	3.3
52	부산광역시	부산	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
53	서울특별시	서울	2.5	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	4.9
54	울산광역시	울산	0.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3
55	인천광역시	강화	8.5	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.1	14.7
56	인천광역시	백령도(인천)	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8
57	인천광역시	인천	1.4	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	2.7
58	전라남도	강진군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	전라남도	고흥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	전라남도	광양시	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	전라남도	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	전라남도	보성군(여수기상대)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	전라남도	순천	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3
64	전라남도	순천기상대	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	전라남도	여수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	전라남도	영광군	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1.5
67	전라남도	완도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	전라남도	장흥	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
69	전라남도	주암(순천)	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
70	전라남도	진도	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
71	전라남도	진도군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	전라남도	해남	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.4
73	전라남도	흑산도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	전라북도	고창	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	1.1
75	전라북도	고창군	0.9	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	1.3
76	전라북도	군산	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1
77	전라북도	남원	5.1	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
78	전라북도	부안	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	2.5
79	전라북도	순창군	4.5	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	5.1
80	전라북도	임실	9.2	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.9	14.4
81	전라북도	장수	10.6	2.9	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	3.3	16.9
82	전라북도	전주	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	1.2
83	전라북도	정읍	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	1.3
84	제주특별시	서귀포	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	제주특별시	제주	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	충청남도	금산	8.2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.3	13.5
87	충청남도	보령	0.5	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6
88	충청남도	부여	4.2	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	6.1
89	충청남도	서산	2.5	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	3.5
90	충청남도	천안	6.5	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.2	10.8
91	충청남도	홍성	0.8	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9
92	충청북도	보은	10.3	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.5	18.2
93	충청북도	제천	16.2	5.9	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	9.2	31.5
94	충청북도	청주	2.4	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	3.7
95	충청북도	추풍령	2	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	3.4
96	충청북도	충주	9.5	2.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	4.1	15.8

(7) 일강수량 : 5㎜ 이상

번호	도	지역	월평균 기상데이터												소계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	강원도	강릉	3	2.6	4.5	3.9	2.7	3.7	8	8.3	5.7	3.3	3.7	2.1	51.5
2	강원도	대관령	2.1	2.2	3.3	4.4	3.3	5.1	9.2	8.9	5.4	2.9	3.7	2	52.5
3	강원도	동해	2.5	2.7	4.2	3.6	2.3	3.2	6.6	7.6	5.5	3.5	4	1.7	47.4
4	강원도	북강릉	2.4	3	4.3	3.4	2.4	2.6	7.2	8.2	5.4	3.3	3.8	2	48
5	강원도	삼척	1.5	1.4	3	4.8	3.5	5.2	8.1	8	4.9	3.4	2.8	1.3	47.9
6	강원도	속초	2.4	2.7	4	3.9	2.8	3.6	8.5	8.3	4.5	3.4	4.7	1.7	50.5
7	강원도	영월	0.8	1.7	3.1	4.5	3.6	4.7	8.9	8.1	3.9	2.4	2.5	1.8	46
8	강원도	원주	1.1	1.8	2.6	4.7	3.6	4.8	10	8.7	4.3	2.9	2.9	1.9	49.3
9	강원도	인제	0.8	1.1	2.5	4.5	3.8	4.7	10.9	7.8	3.8	2.3	3.3	1.7	47.2
10	강원도	정선군	0.4	1.4	1.2	3.5	2.3	3.1	6.5	6.2	3.4	2	2	0.9	32.9
11	강원도	철원	0.8	1.2	1.7	4.3	4.3	4.6	10.3	8.4	3.9	2.8	3.7	2	48
12	강원도	춘천	12.7	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.9	23.5
13	강원도	홍천	0.5	1.1	1.9	4	3.5	4	10.1	8.1	4.4	2.6	2.9	1	44.1
14	경기도	동두천	0.7	1.1	1.9	4.3	4.1	4.5	10.5	8.6	4.2	3	3.4	2	48.3
15	경기도	성산	3.8	4.4	6	6.4	5.6	8.6	6.6	9	6.5	4	5.7	4.4	71
16	경기도	수원	0.8	1.6	2.5	4	3.2	4.1	10.4	7.8	4	2.8	3	1.9	46.1
17	경기도	양평	0.7	1.4	2.4	4.6	3.5	4.8	10.5	8.6	4.1	2.9	3	1.7	48.2
18	경기도	이천	0.7	1.5	2.9	4	3.5	4	9	7.7	4.2	2.9	2.4	1.9	44.7
19	경기도	파주	0.8	1.1	1.9	4.2	4.3	4.1	9.5	7.7	3.2	2.3	2.8	1.9	43.8
20	경상남도	거제	2.2	2.8	4.9	6.7	4.7	5.4	8.2	6.5	5	3	3.3	1.5	54.2
21	경상남도	거창	1	1.5	3.4	4.2	3.4	4	7.9	7.2	4.4	3.1	2.6	1.5	44.2
22	경상남도	김해시	1	2.3	3.8	5.8	3.7	4.7	7	5.8	4.9	2.8	2.6	1.5	45.9
23	경상남도	남해	1.7	2.8	4.5	6.3	4.7	6	8	7.7	4.8	2.8	3.1	1.6	54
24	경상남도	밀양	0.8	2.2	3.8	5.2	3.5	4	8.4	7	4.5	2.5	2.3	1.5	45.7
25	경상남도	북창원	0.9	2.1	3.4	5.4	3.2	4.2	7.7	7	4	2.1	2.7	1.4	44.1
26	경상남도	산청	1.1	1.9	3.5	5	3.8	5.1	8.1	7.3	4.6	2.8	2.7	1.3	47.2
27	경상남도	의령군	0.4	1.2	2.3	3.9	2.6	3.4	6.3	6.6	4.6	2.7	2.2	1.2	37.4
28	경상남도	의성	0.6	1.2	2.6	4.3	2.9	3.8	6.6	7.7	4.2	2.8	2	1.2	39.9
29	경상남도	진주	1.4	2.4	3.9	5.6	3.8	5	8.2	7.5	4.9	3.1	2.7	1.4	49.9
30	경상남도	창원	1.1	2.3	3.9	5.6	4.1	4.9	7.6	7	4.2	2.6	2.8	1.3	47.4
31	경상남도	통영	1.5	2.6	4.5	5.8	4.2	5	7.2	6.6	4.4	2.5	3	1.5	48.8
32	경상남도	함양군	0.4	1.1	2.2	3.6	2.1	2.8	6.1	6.2	4	2.9	2.2	1.1	34.7
33	경상남도	합천	0.8	1.6	3.1	4.8	3.6	4.2	9.1	8.2	4.7	2.9	2.4	1.2	46.6
34	경상북도	경주시	1	1.2	2.4	4.2	2.2	2.9	4	4.7	4.7	2.8	1.7	1.2	33
35	경상북도	구미	0.7	1.5	2.7	4.3	2.8	3.7	7.2	7.1	4	2.8	2.7	1.2	40.7
36	경상북도	문경	0.8	1.7	2.9	4.6	3.4	4.3	9.4	8.1	3.9	3.1	2.8	1.8	46.8
37	경상북도	봉화	0.6	1.4	3	4.8	3.4	4.4	8.4	8.4	3.8	2.6	2	1.7	44.5
38	경상북도	상주	1.1	1.5	3	4.2	2.9	3.9	7.3	8.2	4.4	3	2.6	1.8	43.9
39	경상북도	안동	0.6	1.3	2.9	4.3	3.2	3.9	7.4	8.3	4	2.8	2.6	1.4	42.7
40	경상북도	영덕	1.4	2.1	2.7	3.9	2.5	3.3	5.4	6.4	4.8	3.1	3.4	1.7	40.7
41	경상북도	영주	0.6	1.5	3.3	5.1	3.4	4.7	8.9	9	4.2	2.6	2.5	1.8	47.6
42	경상북도	영천	0.7	1.7	3.1	5	3.6	3.8	7.3	6.6	4.6	2.8	2.1	1.5	42.8
43	경상북도	울릉도	9.5	6.8	4.7	5.1	3.4	2.8	4.3	5.1	5	4.9	7.1	9	67.7
44	경상북도	울진	2.5	2.6	3.2	4.2	2.4	3.1	6.1	6.8	4.8	3.4	3.6	2.1	44.8
45	경상북도	청송군	0.3	1.2	1.7	3.2	2.3	2.4	4.6	5.5	3.7	2.7	1.8	0.9	30.3
46	경상북도	포항	2	2.5	3.3	4.3	3.1	3.8	5.6	6.3	5	2.9	2.6	1.9	43.3
47	광주광역시	광주	2.1	2.5	3.4	4.9	3.7	4.8	8.8	8.4	3.8	3.2	3.5	2.2	51.3
48	대구광역시	고산	2.1	3.3	4.7	4.9	4.2	6.2	4.7	6.1	4.3	3	3.5	2.4	49.4
49	대구광역시	대구	1	1.6	3.4	4.5	3.3	3.9	7.2	7.4	4.3	2.6	2.2	1.4	42.8
50	대구광역시	대구 기상대	0.2	0.2	0.8	1.1	0.5	0.2	0.6	1.3	0.4	0.7	0.4	0.1	6.5
51	대전광역시	대전	1.5	1.8	2.7	3.8	3.6	4.4	10	8.4	4.4	2.9	3	2.4	48.9
52	부산광역시	부산	1.8	2.6	4.3	6	4.3	4.9	7	5.8	4.3	3.2	2.6	1.7	48.5
53	서울특별시	서울	0.7	1.6	2.6	4.2	3.6	4.6	10.2	8.4	4.1	2.7	2.8	1.4	46.9
54	울산광역시	울산	1.9	2.8	4	5.3	3.3	4	6.9	5.7	4.4	2.7	2.1	1.7	44.8
55	인천광역시	강화	0.5	1.3	1.8	3.6	3.9	3.8	9.3	5.9	3.3	2.7	2.8	1.4	40.3
56	인천광역시	백령도(인천)	0.9	1.3	0.8	1.9	3	2.8	6.8	4.6	2.8	1.5	2.5	1.3	30.2
57	인천광역시	인천	0.6	1.5	2.4	3.8	3.5	3.8	9	7.3	3.5	2.6	2.8	1.7	42.5
58	전라남도	강진군	1.3	2.1	3	4.5	3.5	3.8	5.7	5.7	3.8	2.5	3	2	40.9
59	전라남도	고흥	1.6	2.6	4.6	5.7	4.6	5.4	6.7	6.3	4.4	2.7	3.1	1.5	49.2
60	전라남도	광양시	0.8	1	2.9	3.9	2.9	3.6	5.2	5.5	3.1	2.2	2.7	1.2	35
61	전라남도	목표	2.1	2.2	3.9	4.4	3.8	4.7	7.2	6	3.7	3.1	3.6	2.7	47.4
62	전라남도	보성군(여수기상대)	0.4	1.8	3.2	4.9	3.5	3.9	6.4	6.5	3.8	2.7	2.4	1.4	40.9
63	전라남도	순천	0.7	1.1	2.5	4.1	3	3.3	6	5.4	3.9	2.5	2.9	1.1	36.5
64	전라남도	순천기상대	1.1	2.5	3.6	5.6	3.6	3.9	7.3	5.6	4.3	2.5	2.5	1.6	44.1
65	전라남도	여수	1.3	2.4	4	5.1	4.6	5	6.8	6.7	4.2	2.9	3.1	1.2	47.3
66	전라남도	영광군	2	2.3	3	4.5	4.2	3.8	7.9	6.9	4.3	2.9	3.5	3.7	49
67	전라남도	완도	1.7	3.4	4.5	5.2	4.7	5.9	6.4	6.9	4.7	2.7	3.5	2.1	51.7
68	전라남도	장흥	1.5	2.8	4.1	5.1	4.9	5.1	8.2	7.3	4.2	2.9	3.1	1.8	51
69	전라남도	주암(순천)	0.6	1.5	2.1	2.3	2	2.5	4.7	3	1	1.2	1	0.6	22.5
70	전라남도	진도	1.6	3.5	4.3	5.5	4.7	5	6.9	6.9	4.2	3.1	3.9	3.4	53
71	전라남도	진도군	0.8	0.5	0.7	2	1.9	1.6	2.4	2.6	1.5	1.4	1.7	1.4	18.5
72	전라남도	해남	1.6	2.9	4.1	4.9	4.5	4.8	6.4	6.1	3.8	2.7	3.7	2.5	48
73	전라남도	흑산도	1.5	2.3	3.1	4.3	3.8	4.4	6.4	5.8	4.4	2.7	3	2	43.7
74	전라북도	고창	1.5	1.2	1.6	3.4	2.1	2.5	6.5	5.2	2.8	2.1	2.4	3	34.3
75	전라북도	고창군	2.7	2.1	2.9	4.8	3.8	3.7	9	8.5	3.8	2.9	3.4	3.5	51.1
76	전라북도	군산	1.9	1.9	2.6	4.4	3.5	4	8.5	7.1	3.8	2.1	3.3	2.8	45.9
77	전라북도	남원	1.3	1.9	3.1	4.9	3.6	4	9.6	7.4	4.6	3.4	2.9	1.8	48.5
78	전라북도	부안	1.8	1.9	2.7	4.5	4.2	3.3	8.5	7.2	3.8	2.3	3.8	3.9	47.9
79	전라북도	순창군	1.3	2.4	3.1	4.6	3.6	3.9	9.4	8.6	4.7	3.5	3.6	2.4	51.1
80	전라북도	임실	1.2	1.7	3.2	4.8	4	4.3	11.1	8.6	4.2	3.5	3.2	3	52.8
81	전라북도	장수	1.4	2.1	3.5	5	4	4.4	11.4	8.4	4.6	3.8	3.4	2.9	54.9
82	전라북도	전주	1.5	1.8	3.3	4.6	4.1	4.1	9.3	8.6	4	3	3	3	50.3
83	전라북도	정읍	2.7	1.9	3.3	5	4.3	4.4	9	8.1	3.9	3.1	3.6	3.5	52.8
84	제주특별시	서귀포	2.9	4.5	4.9	6.2	4.9	8.2	6.4	8.8	6.1	3.9	4.5	2.9	64.2
85	제주특별시	제주	3	3.8	4.7	5.4	3.9	6.3	5.1	6.5	5.1	3.7	4.4	3.4	55.3
86	충청남도	금산	1.4	1.6	3.3	4.7	3	4.3	9.3	8.9	3.9	3.2	3	2.4	49
87	충청남도	보령	1	1.8	2.7	4.1	4.1	3.6	8.6	7.3	3.8	3	2.8	3	45.8
88	충청남도	부여	1.1	1.8	3	4.1	3.8	3.9	9.7	8.5	3.7	3	2.9	2.9	48.4
89	충청남도	서산	1.3	1.7	2.4	3.6	3.3	3.9	8.6	6.6	3.8	2.8	3.2	3.1	44.3
90	충청남도	천안	0.6	1.6	2.4	3.8	3.3	3.3	9.2	7.9	4.2	2.6	3.1	2.1	44.1
91	충청남도	홍성	0.1	0.6	0.2	0.8	0.8	0.2	1.8	1.2	0.4	0.8	0.8	0.9	8.6
92	충청북도	보은	1.1	1.4	3.2	4.3	3.8	3.8	10.6	8.8	4.7	3	2.9	2.3	49.9
93	충청북도	제천	0.6	1.8	3	5.1	3.6	4.5	9.9	8.8	4.1	2.9	3.3	1.8	49.4
94	충청북도	청주	0.9	1.6	2.6	4.1	3.3	4.1	10.5	7.8	4.7	2.7	2.9	2.2	47.4
95	충청북도	추풍령	1	1.8	3.4	4.3	3	4.2	7.8	8.3	4.5	3	3.2	2.1	46.6
96	충청북도	충주	1.1	1.6	2.7	5	3.6	3.4	8.6	8.6	4.1	2.7	2.6	1.8	45.8

(8) 일강수량 : 10㎜ 이상

번호	도	지역	월평균 기상데이터												소계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	강원도	강릉	1.8	1.9	2.7	2.2	1.7	2.1	5.6	6.2	4.1	1.8	3	1.3	34.4
2	강원도	대관령	1.2	1.3	1.9	1.9	2.2	3	6.6	5.7	3.7	2.1	1.9	0.7	32.2
3	강원도	동해	1.5	1.8	2.5	1.9	1.6	1.7	4.5	5.3	4	2.1	2.4	1.2	30.5
4	강원도	북강릉	1.4	2.1	2.2	1.9	1.5	1.6	5	6	4	1.7	3	1.2	31.6
5	강원도	삼척	0.5	0.8	1.7	2.7	2	3.7	5.7	5.8	3.7	1.6	1.5	0.6	30.3
6	강원도	속초	1.4	1.8	2.2	2.7	1.9	2.2	5.9	6.1	2.9	1.7	3.2	1.5	33.5
7	강원도	영월	0.3	1.1	1.8	2.1	1.7	3.3	6.9	6.5	2.8	1.6	1	0.7	29.8
8	강원도	원주	0.3	0.9	1.3	2.8	2.2	3.2	7.8	6	2.8	1.7	1.3	0.9	31.2
9	강원도	인제	0.2	0.7	1.2	2.7	2.8	3.2	8.5	5.9	2.7	1.7	1.5	0.7	31.8
10	강원도	정선군	0.1	0.7	0.8	2	1.5	1.9	5.6	4.5	2.7	1.1	1.2	0.4	22.5
11	강원도	철원	0.1	0.8	1	2.3	2.8	2.8	8.9	6.4	2.9	1.6	1.6	0.6	31.8
12	강원도	춘천	0.2	0.8	1	2.1	2.9	3.6	8.3	5.6	2.6	1.7	1.6	0.9	31.3
13	강원도	홍천	0.1	0.7	1.2	2	2.1	3	7.5	6	3.2	1.6	1.4	0.5	29.3
14	경기도	동두천	0.1	0.7	1	2.2	3	3.2	8.8	7	2.6	1.7	1.3	0.9	32.5
15	경기도	성산	2.4	3.1	5.1	5.6	4.4	6.9	4.9	7.3	4.7	3	3.5	2	52.9
16	경기도	수원	0.2	1	1.5	2.4	2.7	3	8.4	5.9	3	2.1	1.3	0.8	32.3
17	경기도	양평	0.2	0.9	1.4	1.8	2.6	3.5	8.8	7	3	1.6	1.5	0.8	33.1
18	경기도	이천	0.4	1.3	1.4	2.6	2.3	2.9	7.6	5.8	2.8	1.6	1.6	0.7	31
19	경기도	파주	0.2	0.9	1	2.2	2.9	3.2	8.5	5.6	2.2	1.5	1.4	0.8	30.4
20	경상남도	거제	0.8	1.6	3.6	4.7	4.1	4.3	6.1	5.4	3.9	2.5	2.5	1.3	40.8
21	경상남도	거창	0.3	0.9	2.2	3	2.4	2.6	6.7	5.9	3.1	2.3	1.5	0.6	31.5
22	경상남도	김해시	0.7	1.6	2.9	3.9	3.2	3.2	5.6	4.3	3.8	1.8	1.4	1	33.4
23	경상남도	남해	1	1.9	3.3	4.3	3.7	4.2	6.2	6.3	3.9	2.6	2.1	1.1	40.6
24	경상남도	밀양	0.5	1.2	2.1	3.7	2.9	2.3	6.4	5.8	3.3	1.8	1.5	0.9	32.4
25	경상남도	북창원	0.5	1.1	2.3	3.8	2.6	2.3	5.8	4.4	3.2	1.9	1.6	0.9	30.4
26	경상남도	산청	0.7	1.2	2.2	4	2.5	3.2	6.4	6.2	3.7	2.5	1.6	1	35.2
27	경상남도	의령군	0.3	0.6	1.8	3	1.6	2.1	5.1	4.6	3.2	2.2	1.4	0.9	26.8
28	경상남도	의성	0.2	0.6	1.4	2.4	2.3	2.5	4.9	5.4	2.7	1.5	1.1	0.6	25.6
29	경상남도	진주	0.7	1.4	2.7	4.3	2.9	3.8	7.1	6.1	3.8	2.5	1.3	1.1	37.7
30	경상남도	창원	0.8	1.5	2.7	4.6	3.1	3.5	6.1	5	3.3	2.1	1.7	0.9	35.3
31	경상남도	통영	0.8	1.5	3.1	4.4	3.7	3.8	6.3	5	3.5	2.1	1.9	1.1	37.2
32	경상남도	함양군	0.2	0.6	1.6	2.1	1.6	1.5	5.2	5	2.6	2.3	1.3	0.7	24.7
33	경상남도	합천	0.4	0.9	2.3	3.5	2.8	2.3	6.9	6	3.4	2.4	1.5	1	33.4
34	경상북도	경주시	0.4	0.5	1.5	2.2	1.3	1.6	3	3.5	3.8	1.7	1.4	0.9	21.8
35	경상북도	구미	0.4	0.8	1.4	2.8	2.2	2.5	5.2	5.9	2.7	2	1.2	0.8	27.9
36	경상북도	문경	0.3	1.2	2.1	2.9	2.5	2.7	6.8	7	2.8	1.8	1.7	1	32.8
37	경상북도	봉화	0.3	0.8	1.4	2.7	2.8	3.3	6.1	6.2	2.7	1.8	1.2	0.8	30.1
38	경상북도	상주	0.3	0.9	1.8	2.7	1.9	2.4	6.3	5.6	2.8	2.2	1.5	0.7	29.1
39	경상북도	안동	0.3	1	1.8	2.5	2.2	2.7	5.2	6.6	3.2	1.8	1.3	0.9	29.5
40	경상북도	영덕	0.9	1.1	1.3	2.8	1.7	2.5	3.9	4.3	3.1	2.5	2.2	1	27.3
41	경상북도	영주	0.2	1.2	2.1	3.1	2.2	3.2	6.4	6.9	3.1	1.9	1.6	0.8	32.7
42	경상북도	영천	0.3	0.5	2.2	3.1	2.5	2.4	5.2	5.4	2.9	2.4	1.2	1.2	29.3
43	경상북도	울릉도	6.4	3.6	2.9	3.1	2.4	2.2	3.1	3.6	3.5	3.7	4.1	5.8	44.4
44	경상북도	울진	1.2	1.4	1.5	2.7	1.6	2	4	4.5	3.3	2.1	1.8	1.3	27.4
45	경상북도	청송군	0.1	0.4	1	2.3	1.3	1.8	3.4	3.7	2.9	2.1	0.9	0.6	20.5
46	경상북도	포항	1.1	1.3	2.2	3	2	2.8	4.5	4.2	3.2	2.5	1.5	1.1	29.4
47	광주광역시	광주	0.6	0.9	2.1	3.7	2.9	3	7.3	5.9	3	2	1.6	0.9	33.9
48	대구광역시	고산	1	1.8	2.5	3.8	3.2	4.7	3.9	4.9	3	1.9	2.7	1.1	34.5
49	대구광역시	대구	0.4	0.6	2.1	2.9	2.6	2.8	6.1	5.7	2.9	2.2	1.1	0.9	30.3
50	대구광역시	대구 기상대	0	0	0.6	0.6	0.2	0	0.5	1.1	0.1	0.7	0.3	0	4.1
51	대전광역시	대전	0.4	1	1.7	3.2	2.6	3.2	7.6	6.8	3.5	1.7	1.7	1.1	34.5
52	부산광역시	부산	0.8	1.6	3.2	4.7	3.3	3.3	5	4.4	3.3	2.2	1.9	1.1	34.8
53	서울특별시	서울	0.2	1	1	2.1	2.5	3.4	8.3	5.9	3.1	1.8	1.2	0.8	31.3
54	울산광역시	울산	1.4	1.7	2.3	3.6	2.6	2.3	5.4	3.6	3.6	2	1.6	1.2	31.3
55	인천광역시	강화	0.1	0.9	0.8	1.9	3.1	2.7	8.3	4.4	2.5	1.6	1.3	0.9	28.5
56	인천광역시	백령도(인천)	0.1	0.7	0.4	1.4	1.6	2	5.3	3.7	2.1	1	1.1	0.4	19.8
57	인천광역시	인천	0.2	0.9	1.2	2	2.5	3	7.4	5.2	2.8	1.9	1.4	0.8	29.3
58	전라남도	강진군	0.6	1.1	2	3.2	2.2	2.9	4	4.4	2.8	1.5	1.8	0.9	27.4
59	전라남도	고흥	0.6	1.8	2.8	4	3.3	4	5.7	5.5	2.9	2.1	1.7	0.6	35
60	전라남도	광양시	0.4	0.7	1.8	2.9	2.2	2.5	3.7	4.2	2.6	1.6	1.4	0.7	24.7
61	전라남도	목표	0.9	1	2.2	3	2.7	3.1	5.3	4.5	2.6	2.1	1.8	1.3	30.5
62	전라남도	보성군(여수기상대)	0.2	1.1	1.9	3.5	2.3	2.4	4.7	4.9	2.8	2	1.7	0.9	28.4
63	전라남도	순천	0.3	0.6	1.8	3	2.1	2.4	4.7	3.9	2.7	1.8	1.6	0.8	25.7
64	전라남도	순천기상대	0.7	1.7	2.6	3.8	2.8	2.5	5.7	3.7	3.4	2	1.5	1.1	31.5
65	전라남도	여수	0.6	1.5	2.7	3.7	3	3.8	5.4	5.8	2.8	2.4	1.6	1	34.3
66	전라남도	영광군	0.3	0.8	2.1	3.2	2.8	2.7	6.1	6	2.8	1.8	1.8	0.9	31.3
67	전라남도	완도	1	2.2	3.5	3.8	3.6	4	4.8	4.7	3.2	2	2	1	35.8
68	전라남도	장흥	0.6	1.3	2.6	3.3	3.7	3.9	6	5.4	2.7	1.8	1.7	1.2	34.2
69	전라남도	주암(순천)	0.4	0.7	1	1.7	1.2	1.6	3.6	2.7	1	0.9	0.6	0.2	15.6
70	전라남도	진도	0.5	1.8	3.2	3.8	3.8	3.9	4.7	5.5	3.1	2.4	2.2	1.1	36
71	전라남도	진도군	0.4	0.5	0.4	1.3	1.1	1	1.5	1.9	1.2	1.1	1	0.7	12.1
72	전라남도	해남	1	1.5	2.6	3.3	3.3	3.6	4.4	4.5	3.2	1.9	1.4	1.2	31.9
73	전라남도	흑산도	0.5	0.9	2	2.4	3.1	3.4	4.8	4.5	3.1	2.1	1.6	1.1	29.5
74	전라북도	고창	0.3	0.4	1.4	2.4	1.4	1.4	4.8	3.7	1.8	1.3	1.3	0.7	20.9
75	전라북도	고창군	0.4	0.8	2	3.1	2.5	2.7	6.8	7.4	2.3	1.4	1.7	0.9	32
76	전라북도	군산	0.8	0.9	1.7	3	2.7	2.6	6.4	5.1	2.7	1.6	1.7	0.8	30
77	전라북도	남원	0.2	0.9	1.7	3.5	2.5	2.9	6.6	6	3.5	2.6	1.4	1	32.8
78	전라북도	부안	0.4	0.7	1.9	2.7	2.6	2.2	6.6	5.5	2.6	1.6	1.6	1.6	30
79	전라북도	순창군	0.3	1.2	2	3.7	2.7	2.9	7.7	6.8	3.3	2.3	1.5	1	35.4
80	전라북도	임실	0.3	1	1.8	3.5	2.8	2.4	8.6	6.7	2.8	2.4	1.5	1.2	35
81	전라북도	장수	0.6	1.2	2.3	3.6	3	2.6	9.2	6.6	3.1	3.1	2	1.4	38.7
82	전라북도	전주	0.5	0.9	1.7	2.9	2.5	3	7	7.3	3	1.8	1.6	1.1	33.3
83	전라북도	정읍	0.6	1	1.9	3.3	2.8	2.2	7.1	6.3	2.6	1.5	1.5	1.4	32.2
84	제주특별시	서귀포	1.5	2.5	3.7	5.2	4.2	6.4	5.1	6.4	5	2.7	2.9	1.4	47
85	제주특별시	제주	1.8	2.2	3.1	3.5	2.6	4.9	3.8	5.5	3.8	2.9	2.8	1.4	38.3
86	충청남도	금산	0.7	1.2	1.7	3.4	2.2	3	6.4	6.7	2.8	2.2	1.6	1.1	33
87	충청남도	보령	0.4	1.1	1.5	2.7	3.2	2.2	6.7	4.9	2.6	1.5	1.7	1	29.5
88	충청남도	부여	0.4	1.1	1.4	3.2	2.6	2.6	7.1	6.5	2.9	1.5	1.4	1.1	31.8
89	충청남도	서산	0.2	1	1.8	2.6	2.4	2.4	6.6	5.2	2.8	1.8	1.4	1	29.2
90	충청남도	천안	0.3	1.1	1.1	2.5	2.1	2.4	7.7	6.6	3	1.9	1.4	0.9	31
91	충청남도	홍성	0	0.4	0.1	0.6	0.6	0.2	1.4	0.9	0.4	0.3	0.6	0.5	6
92	충청북도	보은	0.4	0.9	1.7	3.1	2.6	2.7	8	6.7	3.6	1.7	1.9	1.3	34.6
93	충청북도	제천	0.5	1.2	1.7	2.8	2.3	2.7	7.2	6.8	3.1	1.7	1.3	0.8	32.1
94	충청북도	청주	0.3	0.9	1.5	2.7	2	3.2	7.5	6.1	3.2	1.8	1.7	0.8	31.7
95	충청북도	추풍령	0.3	1	1.8	2.9	1.9	2.8	5.8	6.7	2.7	2.2	1.9	0.9	30.9
96	충청북도	충주	0.5	1.2	1.7	2.5	2.2	2.4	6.6	6.9	3.2	1.6	0.8	0.8	30.4

(9) 일강수량 : 20㎜ 이상

번호	도	지역	월평균 기상데이터												소계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	강원도	강릉	0.4	0.9	0.8	1.3	0.5	1.1	3.5	4	2.6	1	1.8	1	18.9
2	강원도	대관령	0.3	0.5	0.5	1	1	1.6	4.3	3.6	2.2	1	1	0.2	17.2
3	강원도	동해	0.6	0.8	0.8	0.9	0.7	0.9	2.8	3	2.3	0.9	1.4	0.3	15.4
4	강원도	북강릉	0.5	0.8	0.5	1	0.5	0.8	3.2	3.9	2.4	1	1.7	0.6	16.9
5	강원도	삼척	0.2	0.2	0.6	1.4	1.3	1.9	4.1	3.9	2.1	0.8	0.4	0.3	17.2
6	강원도	속초	0.5	0.8	0.5	1.3	0.7	1.2	3.3	4.2	2.1	1	2.1	1	18.7
7	강원도	영월	0.1	0.4	0.4	0.5	1.2	1.9	4.6	4.4	1.8	0.7	0.2	0.1	16.3
8	강원도	원주	0	0.4	0.3	1.1	1.1	2	5.5	3.8	1.9	0.7	0.2	0	17
9	강원도	인제	0	0.2	0.3	1.1	0.8	1.4	5.9	3.8	1.5	0.9	0.4	0.2	16.5
10	강원도	정선군	0.1	0.4	0.3	0.5	0.6	1	3.9	2.5	1.5	0.8	0.3	0.2	12.1
11	강원도	철원	0	0.5	0.3	1	1.3	1.6	7.5	4.9	1.4	0.8	0.6	0.2	20.1
12	강원도	춘천	0.1	0.4	0.3	1.2	1.2	2	6.7	3.6	1.5	0.9	0.5	0.3	18.7
13	강원도	홍천	0	0.3	0.3	0.7	1.4	1.5	5.7	3.4	1.8	0.6	0.5	0.3	16.5
14	경기도	동두천	0	0.5	0.3	1.2	1.3	1.9	7	4.2	1.4	1	0.4	0.3	19.5
15	경기도	성산	1.1	1.8	3	3.6	2.9	4.4	3.2	4.8	3	2	2.3	1.1	33.2
16	경기도	수원	0	0.4	0.2	1.1	1.4	1.5	6.1	4	1.6	0.9	0.4	0.2	17.8
17	경기도	양평	0.1	0.3	0.3	1.1	1.4	1.9	6.7	4.1	2.2	0.8	0.6	0.2	19.7
18	경기도	이천	0.1	0.4	0.4	1.1	1.3	2	6.1	3.9	2.1	0.8	0.5	0.2	18.9
19	경기도	파주	0	0.6	0.3	0.8	1.4	1.6	6.4	4.2	1.3	1	0.3	0.2	18.1
20	경상남도	거제	0.4	1.1	1.8	3.2	3	2.6	4.4	3.5	2.7	1.8	1.2	0.8	26.5
21	경상남도	거창	0.2	0.5	0.6	1.8	1.3	1.2	4.3	3.8	1.7	1.5	0.6	0.2	17.7
22	경상남도	김해시	0.1	0.7	1.1	2.3	1.7	1.5	3.8	3.1	2.4	1.4	0.6	0.6	19.3
23	경상남도	남해	0.3	0.8	2.1	2.9	2.4	2.9	4	4.5	2.4	1.7	1.2	0.7	25.9
24	경상남도	밀양	0	0.3	0.8	1.9	2.1	1.2	3.9	3.7	1.9	1.1	0.6	0.4	17.9
25	경상남도	북창원	0.2	0.6	1	2.4	1.4	1	3.9	3	2.2	1.3	0.8	0.4	18.2
26	경상남도	산청	0.1	0.7	1.1	2.5	1.5	1.6	4.7	4.4	2.3	1.7	0.8	0.3	21.7
27	경상남도	의령군	0	0.4	0.7	2.1	1.3	1.1	3.3	3.3	1.8	1.2	0.5	0.3	16
28	경상남도	의성	0	0.2	0.5	1	1.3	1.2	2.9	3.3	2	0.9	0.3	0	13.6
29	경상남도	진주	0.1	0.7	1.5	2.8	2	1.9	4.3	3.6	2.5	1.7	1	0.3	22.4
30	경상남도	창원	0.3	0.7	1.4	2.7	1.8	1.8	3.9	3.5	2.1	1.6	0.8	0.4	21
31	경상남도	통영	0.4	0.9	1.8	2.9	2.6	2.5	4.5	3.3	2.4	1.8	0.7	0.8	24.6
32	경상남도	함양군	0	0.1	0.6	1.3	0.5	1	3.3	3.2	1.8	1.3	0.8	0.1	14
33	경상남도	합천	0	0.5	0.7	2	1.6	1.4	4.5	4	2	1.6	0.8	0.3	19.4
34	경상북도	경주시	0.1	0.1	0.6	1.4	0.8	0.5	1.9	2.3	2	1.2	0.6	0.2	11.7
35	경상북도	구미	0.1	0.2	0.7	1.1	1.4	1.5	3.3	4.2	1.8	1.2	0.6	0.1	16.2
36	경상북도	문경	0.2	0.4	0.6	1.6	1.5	1.9	4.8	4.4	2.1	1.1	0.4	0.2	19.2
37	경상북도	봉화	0.1	0.5	0.5	0.9	1.2	1.9	3.3	3.8	2.2	0.8	0.1	0.2	15.5
38	경상북도	상주	0.1	0.3	0.4	1.2	1	1.4	4.1	3.8	2.1	1	0.5	0.3	16.2
39	경상북도	안동	0.1	0.4	0.7	1.1	1	1.3	3	3.8	1.7	1.1	0.2	0	14.4
40	경상북도	영덕	0.3	0.4	0.7	1.2	1	1.4	2.6	2.9	2.2	1.4	0.7	0.4	15.2
41	경상북도	영주	0.2	0.5	0.6	1.7	1.4	2	4.2	4.4	2.3	0.9	0.5	0.4	19.1
42	경상북도	영천	0	0.3	0.6	1.4	1.3	0.9	3.3	3.2	1.9	1.1	0.3	0.1	14.4
43	경상북도	울릉도	2.6	1.7	1	1.9	1.2	1.3	2.3	2.3	2	1.9	2.2	2.1	22.5
44	경상북도	울진	0.6	0.4	0.6	1.2	0.7	0.9	2.4	2.8	1.7	1.3	0.8	0.5	13.9
45	경상북도	청송군	0	0.1	0.4	0.9	0.6	0.8	2	2.1	1.6	0.9	0.2	0	9.6
46	경상북도	포항	0.6	0.5	1.1	1.4	1.3	1.3	2.4	2.9	2.5	1.6	0.7	0.3	16.6
47	광주광역시	광주	0.1	0.7	0.9	1.5	1.3	1.4	4.6	4	1.5	1.1	0.8	0.3	18.2
48	대구광역시	고산	0.3	0.8	1.1	1.9	1.6	3.3	1.9	3.2	1.4	1	1.2	0.6	18.3
49	대구광역시	대구	0	0.2	0.5	1	1	1.3	3.7	4.1	1.9	0.9	0.4	0.1	15.1
50	대구광역시	대구 기상대	0	0	0.2	0.2	0	0	0.2	0.8	0.1	0.3	0.2	0	2
51	대전광역시	대전	0.3	0.3	0.6	1.4	1.2	1.8	4.8	4.1	2.2	1.1	0.8	0.3	18.9
52	부산광역시	부산	0.5	0.9	1.8	2.2	2.5	2.1	3.5	3.4	2.4	1.9	1	0.7	22.9
53	서울특별시	서울	0	0.5	0.3	1.2	1.4	1.9	6.3	3.3	1.8	0.9	0.6	0.3	18.5
54	울산광역시	울산	0.3	0.6	1	2	1.5	1.4	3.2	2.4	2	1.2	0.7	0.6	16.9
55	인천광역시	강화	0	0.5	0.3	1	1.6	1.6	6.6	3.2	1.7	1.1	0.6	0.2	18.4
56	인천광역시	백령도(인천)	0	0.2	0.1	0.5	1.1	1.5	3.3	2.7	0.8	0.7	0.4	0.1	11.4
57	인천광역시	인천	0	0.5	0.2	0.8	1.2	1.4	5.5	3.2	1.7	0.9	0.5	0.3	16.2
58	전라남도	강진군	0	0.5	1.3	1.7	1.6	1.1	2.8	3.1	1.8	1	1	0.3	16.2
59	전라남도	고흥	0.1	0.9	1.3	2.7	2.1	2.4	3.8	3.4	1.8	1.2	0.9	0.5	21.1
60	전라남도	광양시	0.1	0.3	1.2	1.7	1.5	1.5	2.5	3.1	1.7	1.1	0.9	0.2	15.8
61	전라남도	목표	0.1	0.5	1.2	1.8	1.5	1.7	4.1	3.1	1.5	0.9	0.7	0.3	17.4
62	전라남도	보성군(여수기상대)	0	0.6	1.1	2.1	1.7	1.5	3.1	3.5	1.6	1.1	0.9	0.3	17.5
63	전라남도	순천	0.1	0.3	0.9	1.3	1.4	1.2	2.9	2.6	1.6	1.2	0.8	0.4	14.7
64	전라남도	순천기상대	0.2	0.6	0.9	2.2	1.6	1.5	3.6	2.6	2.6	1.5	0.8	0.6	18.7
65	전라남도	여수	0.1	0.7	1.5	2.4	2.1	2.3	3.5	4	2.1	1.4	0.7	0.4	21.2
66	전라남도	영광군	0	0.4	0.9	1.5	1.6	1.8	4.2	4.2	1.4	1.2	0.7	0.2	18.1
67	전라남도	완도	0.3	0.8	1.4	2.8	2.3	2.7	3.7	3.5	2.1	1.3	0.9	0.5	22.3
68	전라남도	장흥	0	0.7	1.3	2.1	1.9	2.4	3.7	3.9	1.7	1.2	0.7	0.4	20
69	전라남도	주암(순천)	0.1	0.5	0.5	0.9	0.9	1.1	2.3	1.8	0.6	0.2	0.5	0	9.4
70	전라남도	진도	0.3	0.7	1.6	2.4	2.6	2.7	3.5	3.8	2.3	1.5	1	0.4	22.8
71	전라남도	진도군	0	0.2	0.3	0.7	0.8	0.7	1.1	1.4	0.8	0.7	0.3	0.2	7.2
72	전라남도	해남	0	0.5	1.3	2.2	1.5	2	3.2	2.8	1.7	1.3	0.9	0.4	17.8
73	전라남도	흑산도	0.1	0.5	1.1	1.4	1.4	2.2	3.3	3.4	1.8	1	0.8	0.3	17.3
74	전라북도	고창	0	0.1	0.6	0.9	0.7	0.9	3.4	2.5	0.6	0.8	0.5	0.2	11.2
75	전라북도	고창군	0	0.3	0.5	1.6	1.6	1.3	4.5	4.6	1.4	1.1	0.4	0.2	17.5
76	전라북도	군산	0.1	0.4	0.6	1.5	1.5	1.8	4.1	3.6	1.9	1.1	0.7	0.2	17.5
77	전라북도	남원	0	0.5	0.8	1.2	1.1	1.5	4.4	3.7	1.8	1.6	0.6	0.2	17.4
78	전라북도	부안	0	0.5	0.7	1.7	1.2	1.3	4.8	3.7	1.3	1.1	0.5	0.2	17
79	전라북도	순창군	0	0.6	0.9	1.6	0.8	1.2	5.1	4.5	1.7	1.3	0.9	0.3	18.9
80	전라북도	임실	0	0.4	0.7	1.6	1.2	1.2	5.5	4.1	1.5	1.3	0.7	0.2	18.4
81	전라북도	장수	0	0.7	1	2	1.6	1.2	5.9	4.3	2.2	1.6	1	0.3	21.8
82	전라북도	전주	0	0.3	0.6	1.1	1.2	2.2	4.6	4.2	1.4	1.1	0.6	0.1	17.4
83	전라북도	정읍	0	0.4	0.6	1.3	1.5	1.4	5.4	3.7	1.4	1.1	0.5	0.2	17.5
84	제주특별시	서귀포	0.5	1.3	2.4	3.7	2.7	4.8	3.1	4.2	2.3	1.8	1.5	0.9	29.2
85	제주특별시	제주	0.9	1.1	1.4	1.4	1.2	3.1	2.1	3.3	2.3	1.7	1.4	0.5	20.4
86	충청남도	금산	0.1	0.7	0.7	1.2	1.1	1.9	4.6	4.1	1.6	0.9	0.5	0.1	17.5
87	충청남도	보령	0.1	0.4	0.4	1.3	1.6	1.3	4.4	3.3	1.4	0.8	0.5	0.1	15.6
88	충청남도	부여	0.3	0.6	0.7	1.5	1.6	1.8	5.1	4.3	1.5	1.1	0.7	0.2	19.4
89	충청남도	서산	0.2	0.5	0.2	1.4	1.5	1.5	4.5	3.7	1.6	0.6	0.6	0.3	16.6
90	충청남도	천안	0.1	0.2	0.4	1	1.1	1.5	5.5	4.1	1.8	0.8	0.4	0.1	17
91	충청남도	홍성	0	0	0	0.3	0.3	0.1	1.1	0.6	0.4	0.1	0.2	0.1	3.2
92	충청북도	보은	0.2	0.4	0.5	1.1	1.3	1.5	5.1	4.5	2.1	1.1	0.6	0.2	18.6
93	충청북도	제천	0.2	0.7	0.8	1.4	1.3	1.8	5.1	4.2	1.9	0.9	0.5	0.3	19.1
94	충청북도	청주	0.1	0.3	0.6	1	1.1	1.4	5.2	3.9	1.8	0.7	0.3	0.1	16.5
95	충청북도	추풍령	0.1	0.3	0.7	1.3	1.2	1.7	3.5	3.7	1.6	1	0.7	0	15.8
96	충청북도	충주	0.2	0.3	0.5	0.6	1	1.7	5	4.6	1.9	1	0.1	0.2	17.1

(10) 일최대순간풍속 : 15m/s 이상

번호	도	지역	월평균 기상데이터												소계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	강원도	강릉	1.8	1	2.3	3.3	2.8	0.5	0.4	0.5	0.3	0.7	1.9	2	17.5
2	강원도	대관령	7.1	5.5	7.7	8	7.3	1.4	2.3	2.7	0.8	3.8	7.7	10.7	65
3	강원도	동해	3	1.6	2.6	3.6	2.8	0.4	0.6	1.1	0.4	1.2	3.2	4.2	24.7
4	강원도	북강릉	1	0.6	1	2.2	2.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	1.1	2.1	11.4
5	강원도	삼척	0.4	0.7	0.2	1.2	0.9	0.1	0.7	0.5	0.2	0.5	0.6	1.1	7.1
6	강원도	속초	3.1	1.8	3.5	4	3.5	0.6	0.8	1.2	0.3	1.6	3.8	5.3	29.5
7	강원도	영월	0	0.2	0.4	0.4	0.8	0.1	0.1	0.2	0	0.2	0.4	0.6	3.4
8	강원도	원주	0.1	0.1	0.1	0.2	0	0	0.1	0.2	0.2	0	0.2	0	1.2
9	강원도	인제	0.2	0.3	0.7	0.7	0.9	0	0.3	0.3	0.2	0.2	0	0.3	4.1
10	강원도	정선군	3	3.4	4.5	6.1	4.1	0.6	0.8	0.5	0.4	1.7	4.2	5.2	34.5
11	강원도	철원	0	0	0.3	0.6	0.6	0.1	0.3	0.5	0.3	0.1	0.3	0	3.1
12	강원도	춘천	0	0	0.1	0.4	0.3	0	0	0.1	0.1	0	0.1	0	1.1
13	강원도	홍천	0	0.1	0	0	0.1	0	0.2	0.2	0.1	0	0	0	0.7
14	경기도	동두천	0.1	0.4	1.3	1.4	0.9	0.2	0.7	0.5	0.4	0.3	1.1	0.3	7.6
15	경기도	성산	3.3	4.5	7.2	4.7	1.8	1	1.4	1.3	1.1	1.9	2.5	3.1	33.8
16	경기도	수원	0.2	0.3	0.5	0.9	0.2	0.3	0.8	0.6	0.3	0.3	0.7	0.5	5.6
17	경기도	양평	0	0	0.2	0.8	0.4	0	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	2.8
18	경기도	이천	0	0	0.2	0.2	0	0	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0.9
19	경기도	파주	0	0	0.1	0.5	0.4	0	0.4	0.3	0.1	0	0.2	0.1	2.1
20	경상남도	거제	0.4	0.4	0.9	1.2	0.8	0.4	1.3	1.1	0.3	0.5	0.4	0.4	8.1
21	경상남도	거창	0.3	0.5	2.1	1.3	0.6	0.1	0.6	0.6	0.1	0.2	0.2	0.9	7.5
22	경상남도	김해시	0.9	0.7	1.1	1.8	1.1	0.2	0.7	1.1	0.3	0.3	1.3	1.1	10.6
23	경상남도	남해	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0	0	0.1	0.1	0	0	0.2	1.4
24	경상남도	밀양	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.4	2.3
25	경상남도	북창원	0.6	0.7	0.4	0.6	0.2	0.1	0.7	0.6	0.3	0.3	0.5	0.6	5.6
26	경상남도	산청	2	0.8	2.4	2.2	0.6	0	0.1	0.6	0.1	0.4	2.7	3.5	15.4
27	경상남도	의령군	0.3	0.2	0.9	0.7	0.5	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.5	0.6	4.8
28	경상남도	의성	0.4	0.1	0.6	0.7	0.2	0	0	0.2	0	0	0.3	0.7	3.2
29	경상남도	진주	0	0.2	0.3	0.1	0.4	0	0.2	0.4	0.1	0.1	0	0.1	1.9
30	경상남도	창원	0.3	0.2	0.5	0.9	0.4	0.3	0.5	0.9	0.2	0.2	0.1	0.4	4.9
31	경상남도	통영	0.9	1.7	2.6	4.2	2	1.3	4.2	2.7	0.8	1.6	1.7	2	25.7
32	경상남도	함양군	0.3	0.3	0.8	1	0.6	0.1	0.2	0.4	0	0	0.4	0.5	4.6
33	경상남도	합천	0.1	0	0	0.2	0	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0.8
34	경상북도	경주시	2.7	2	2	2	1.3	0.1	0.5	0.6	0.5	1	1.5	3.4	17.6
35	경상북도	구미	0	0	0.3	0.6	0.3	0	0	0.1	0	0.1	0.1	0.3	1.8
36	경상북도	문경	0.5	0.6	1.4	1.4	0.4	0	0.1	0.2	0.1	0.4	0.6	1	6.7
37	경상북도	봉화	0.4	0.1	0.2	0.2	0.5	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.6	1.1	4
38	경상북도	상주	1.2	1.1	2.2	1.7	0.5	0	0.4	0.3	0	0.2	1.9	2	11.5
39	경상북도	안동	0.4	0.2	0.7	0.8	0.7	0	0.2	0.4	0	0	0.4	0.7	4.5
40	경상북도	영덕	7.4	4	5.5	5.3	3.2	0.6	0.9	0.8	1.8	2.7	4.7	7	43.9
41	경상북도	영주	4.3	2.8	3.2	3	1.6	0.2	0	0.3	0.1	0.9	3	5.5	24.9
42	경상북도	영천	0.7	0.5	1.4	1	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0	1	1.4	7.3
43	경상북도	울릉도	12.7	12.8	15.1	14.5	11.6	4.2	8.8	6.3	5.4	8	11.6	14.4	125.4
44	경상북도	울진	3.2	2.6	5	6.1	4.2	1.2	1.4	1.3	1.8	1.8	3.4	4.1	36.1
45	경상북도	청송군	0.2	0	0.3	0.2	0.4	0	0	0.1	0	0	0.5	0.4	2.1
46	경상북도	포항	2	0.7	1.8	1.9	0.8	0.1	0.2	0.6	0.3	0.6	0.7	1.1	10.8
47	광주광역시	광주	0.1	0.4	0.7	1.3	0.3	0.9	1.3	1	0.5	0.3	0.3	0.4	7.5
48	대구광역시	고산	22.2	18.9	17.5	12.9	7.7	4	5.1	5.8	5.8	11.1	15.5	22.4	148.9
49	대구광역시	대구	0.4	0.2	0.5	0.8	0.4	0.1	0.4	0.5	0.1	0.1	0.4	0.7	4.6
50	대구광역시	대구 기상대	0	0.1	0.4	0.2	0	0	0.2	0	0	0	0.1	0.5	1.5
51	대전광역시	대전	0	0	0.3	0.8	0.2	0.1	0.4	0.6	0.2	0	0.2	0.2	3
52	부산광역시	부산	5	3.6	5.2	4.3	2.8	1.5	4	3	1.4	2.4	3.9	5.7	42.8
53	서울특별시	서울	0.2	0.3	1.7	2.2	1.6	0.5	1.2	1.2	0.5	0.4	1.2	0.5	11.5
54	울산광역시	울산	2.7	1.3	2	2.2	1.1	0.2	1.1	1.2	0.8	1.1	1.5	2.1	17.3
55	인천광역시	강화	0.1	0.3	0.9	1.3	0.6	0.8	1.4	0.9	0.4	0.4	0.7	0.5	8.3
56	인천광역시	백령도(인천)	8.3	7.1	7.6	8.7	9.5	3.1	5	2.8	0.9	4.7	9.6	12.6	79.9
57	인천광역시	인천	1.8	1.6	3.3	2.3	1.1	0.7	1.7	1.4	0.4	1.6	3	3.5	22.4
58	전라남도	강진군	1.5	1.4	2.1	2.1	0.7	0.4	0.7	1.5	0.6	1	2.6	3	17.6
59	전라남도	고흥	2.5	2.3	3.2	3.3	1.2	0.1	0.3	1.3	0.5	0.7	1.9	3.9	21.2
60	전라남도	광양시	0.4	0.2	1	0.6	0.5	0.1	0.3	0.6	0.5	0.1	0.8	0.2	5.3
61	전라남도	목표	6	5.5	5.6	3.9	1.6	0.8	2	1	1.1	2.7	5.6	9.5	45.3
62	전라남도	보성군(여수기상대)	2.9	2.8	3.1	2.8	1.1	0.1	0.7	1.3	0.6	0.9	1.7	2.9	20.9
63	전라남도	순천	0.3	0.2	1	0.8	0.2	0.1	0.3	0.8	0.2	0.1	0.4	0.3	4.7
64	전라남도	순천기상대	1.1	0.8	1.8	2.2	0.5	0	0.5	0.6	1.1	0.8	0.6	0.8	10.8
65	전라남도	여수	15	11.5	12.1	11.1	6.6	1.6	4.9	4.6	3.8	6.9	10.1	14.4	102.6
66	전라남도	영광군	2.5	2.3	2.7	2.3	1	0.5	1.1	1	0.6	1	2.9	5.3	23.2
67	전라남도	완도	5.5	4.4	6.5	6.1	3.2	1.8	3.5	2.2	1.1	1.9	3.4	7	46.6
68	전라남도	장흥	2.8	2.3	3	2.4	1.2	0.5	1	1.4	0.5	0.7	2.3	3	21.1
69	전라남도	주암(순천)	0.2	0.3	0.7	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	2.9
70	전라남도	진도	11.8	10.1	12.2	11.6	8.8	3.5	6.8	4.9	2.6	4.6	7.3	12.8	97
71	전라남도	진도군	0	0.1	0	0.3	0.1	0	0	0.1	0	0.4	0.3	0.3	1.6
72	전라남도	해남	1.8	2.6	1.4	2.2	0.7	0.5	1.1	0.8	0.5	0.7	0.5	1.2	14
73	전라남도	흑산도	14.6	12.4	12.4	9.3	6.2	3.5	6.8	3.9	3.4	7.8	11.1	16.6	108
74	전라북도	고창	1.5	1.9	2.1	2.6	1.3	1	1.6	1.2	0.2	1.3	2.4	3.4	20.5
75	전라북도	고창군	0	0.2	0	1.2	0.6	0.6	0.4	0.6	0.4	0	0.4	0.4	4.8
76	전라북도	군산	1.4	0.9	2.2	2.5	0.8	0.7	1.5	1.2	0.4	1.1	2.1	3.4	18.2
77	전라북도	남원	0.3	0.4	0.9	1	0.4	0.2	0.1	0.5	0.2	0.1	0.6	0.2	4.9
78	전라북도	부안	0.1	0.2	0.2	1	0.1	0.4	0.7	0.3	0.1	0	0.4	0.1	3.6
79	전라북도	순창군	0.7	1.1	2.7	2.5	1.1	0.3	0.8	0.9	0.1	0.6	1.9	1.7	14.4
80	전라북도	임실	0	0.1	0.2	1	0	0.1	0.2	0.4	0	0.1	0.4	0.1	2.6
81	전라북도	장수	0.4	0.4	1.5	2.4	0.6	0.3	0.6	0.6	0.2	0.3	1	0.8	9.1
82	전라북도	전주	0.3	0.4	0.3	1.4	0.7	0.2	0.7	0.6	0.2	0.2	0.2	0.3	5.5
83	전라북도	정읍	0	0.1	0.2	0.2	0.1	0	0.4	0.5	0.1	0.2	0	0.3	2.1
84	제주특별시	서귀포	0.7	0.4	1.4	1.5	0.5	0.4	0.4	1.7	0.6	1.2	0.5	1.1	10.4
85	제주특별시	제주	6	4.8	5.3	4.2	1.9	1.5	3	2.4	0.7	2.4	4.8	10.2	47.2
86	충청남도	금산	0.1	0	0.2	0.4	0.2	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.1	1.7
87	충청남도	보령	0	0.4	0.3	1.1	0.6	0.5	1.3	1	0.3	0.1	0.1	0.5	6.2
88	충청남도	부여	0.1	0	0.3	0.5	0.3	0	0.6	0.2	0.2	0	0	0.2	2.4
89	충청남도	서산	0.5	0.5	1.5	1.8	0.6	0.9	1.5	1.1	0.3	0.8	1.1	1.6	12.2
90	충청남도	천안	0.1	0.2	0.7	0.9	0.2	0	0.4	0.6	0.1	0.3	0.5	0.6	4.6
91	충청남도	홍성	0	0	0	0.2	0.3	0	0.1	0.1	0	0	0.1	0.2	1
92	충청북도	보은	0	0	0.6	0.9	0.2	0	0	0.1	0.1	0	0.3	0.3	2.5
93	충청북도	제천	0.2	0	0.2	0.9	0.6	0.2	0.1	0.1	0	0.2	0.5	0.3	3.3
94	충청북도	청주	0	0	0	0	0.1	0	0	0.2	0.1	0	0	0	0.4
95	충청북도	추풍령	4.1	3.5	4.5	4.4	2.7	0.2	0.9	1.1	0.2	1.1	3.3	4.7	30.7
96	충청북도	충주	0	0	0	0.5	0.2	0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.6

<참고> 기상특보 발표기준

종류	주의보	경보
폭염	6월~9월에 일최고기온이 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때	6월~9월에 일최고기온이 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때
한파	10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될때 ② 아침 최저기온이 -12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때	10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 -15℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때
대설	24시간 신적설이 5cm이상 예상될 때	24시간 신적설이 20cm이상 예상될 때. 다만, 산지는 24시간 신적설이 30cm이상 예상될 때.
호우	6시간 강우량이 70mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm이상 예상될 때	6시간 강우량이 110mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm이상 예상될 때
황사	황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(PM10) 농도 400㎍/㎥이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때	황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(PM10) 농도 800㎍/㎥이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때
강풍	육상에서 풍속 14m/s 이상 또는 순간풍속 20m/s 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 17m/s 이상 또는 순간풍속 25m/s 이상이 예상될 때	육상에서 풍속 21m/s 이상 또는 순간풍속 26m/s 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 24m/s 이상 또는 순간풍속 30m/s 이상이 예상될 때
태풍	태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우, 폭풍해일 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때	태풍으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 강풍(또는 풍랑) 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 ② 총 강우량이 200mm이상 예상될 때 ③ 폭풍해일 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때
폭풍 해일	천문조, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준값 이상이 예상될 때. 다만, 발효기준값은 지역별로 별도지정	천문조, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준값 이상이 예상될 때. 다만, 발효기준값은 지역별로 별도지정
지진 해일	한반도 주변해역(21N~45N, 110E~ 145E)등에서 규모 7.0 이상의 해저지진이 발생하여 우리나라 해안가에 해일파고 0.5~1.0m 미만의 지진해일 내습이 예상될 때	한반도 주변해역(21N~45N, 110E~ 145E)등에서 규모 7.0 이상의 해저지진이 발생하여 우리나라 해안가에 해일파고 1.0m 이상의 지진해일 내습이 예상될 때
풍랑	해상에서 풍속 14m/s 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3m 이상이 예상될 때	해상에서 풍속 21m/s 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 5m 이상이 예상될 때

<참고> 미세먼지 경보기준 및 행동요령

항목		주의보	경보
미세 먼지 PM10	발령	기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM10 시간평균농도가 150㎍/㎥ 이상 2시간 지속	기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM10 시간평균농도가 300㎍/㎥ 이상 2시간 지속
	해제	주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여, 대기자동측정소의 PM10 시간평균농도가 100㎍/㎥ 미만	경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여, 대기자동측정소의 PM10 시간평균농도가 150㎍/㎥ 미만인 때는 주의보로 전환
초미세먼지 PM2.5	발령	기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM2.5 시간평균농도가 75㎍/㎥ 이상 2시간 지속	기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM2.5 시간평균농도가 150㎍/㎥ 이상 2시간 지속
	해제	주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여, 대기자동측정소의 PM2.5 시간평균농도가 35㎍/㎥ 미만	경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여, 대기자동측정소의 PM2.5 시간평균농도가 75㎍/㎥ 미만인 때는 주의보로 전환
행동 요령 및 조치 사항	시민 건강보호	어린이·노인·폐질환 및 심장질환자 등 민감군은 실외활동 제한 일반인은 장시간 또는 무리한 실외할동을 줄임(특히, 눈이 아프거나, 기침 또는 목의 통증이 있는경우 일외활동 자제) 외출시 황사(보호)마스크 착용(폐기능 질환자는 의사와 충분한 상의후 사용) 교통량이 많은 지역 이동 자제 어린이집·유치원·초등학교 실외수업 금지 중·고등학교 실외수업 자제 공공기관 운영 야외 체육시설 운영 제한 공원·체육시설·고궁·터미널·철도 및 지하철 등을 이용 하는 시민에게 과격한 실외활동 자제 홍보 그밖에 시민건강 보호를 위해 필요한사항	어린이·노인·폐질환 및 심장질환자 등 민감군은 실외활동 금지 일반인은 장시간 또는 무리한 실외할동을 자제(기침 또는 목의통증이 있는 경우 실내생활유지) 외출시 황사(보호)마스크 착용(폐기능 질환자는 의사와 충분한 상의후 사용) 교통량이 많은 지역 가급적 이동 금지 어린이집·유치원·초등학교 등 하교시간 조정, 수업단축 또는 휴교 중·고등학교 실외수업 금지 공공기관 운영 야외 체육시설 운영 중단 공원·체육시설·고궁·터미널·철도 및 지하철 등을 이용하는 시민에게 과격한 실외활동 금지 홍보 그밖에 시민건강 보호를 위해 필요한사항
	대기오염 개선노력	행정기관 관용차량 운행감축(비상용차량 제외) 자동차 운행 자제 및 대중교통 이용 권장, 주,정차시 공회전 금지 공공기관 운영 대형 사업장 조업시간 단축 도로 물청소 또는 진공청소 등 시행 사업장의 연료사용량 감축 권고 공사장의 조업시간 단축 또는 일부 작업중지 권고등	행정기관 관용차량 운행제한(비상용차량 제외) 자동차 운행 제한(부제 운행 등), 주,정차시 공회전 금지 공공기관 운영 대형 사업장 조업시간 단축 도로 물청소 또는 분진청소 등 강화 사업장의 연료사용량 감축 명령 공사장의 조업시간 단축 또는 일부 작업중지 명령등

별표 3. 공종별 표준작업량

(1) 도로시설물

가. 포장공사

구분	작업조건			산출근거	표준작업량
1. 아스팔트포장(기계시공/본선포장)
가. 작업준비 (1단계)	스틱 설치간격 10m			인수인계/위치측량, 유도선 설치 등 포함	1,900m/일	5일
	스틱 설치간격 6m				1,600m/일
나. 동상방지층 (선택)	-			대형 다짐장비를 사용한 본선 포장구간의 동상방지층 포설	600㎥/일
다. 보조기층	-			대형 다짐장비를 사용한 본선 포장구간의 보조기층 포설	550㎥/일
라. 배수로시공	-			-	별도계상
마. 작업준비 (2단계)	스틱 설치간격 10m			자재발주(검측), 유도선 설치 등 포함	1,900m/일	3일
	스틱 설치간격 6m				1,600m/일
라. 택코팅	-			역청재 살포작업을 기준	20,000㎡/일
마. 프라임코팅	-			역청재 살포작업을 기준, 양생기간으로 2일 별도 계상	20,000㎡/일
바. 기층	3m≤폭	5∼7㎝		아스팔트 기층 포설을 기준	4,900㎡/일
		8∼10㎝			4,500㎡/일
사. 중간층/표층	3m≤시공폭, 5∼7㎝			아스팔트 표층 및 중간층을 포설	4,800㎡/일
아. 부대공사	준공 전 단계적 수행			차선도색, 안전시설 설치 등	3일/km
2. 콘크리트포장
가. 작업준비 (1단계)	스틱 설치간격 10m			인수인계/위치측량, 유도선 설치 등 포함	1,900m/일	5일
	스틱 설치간격 6m				1,600m/일
나. 동상방지층 (선택)	-			대형 다짐장비를 사용한 본선 포장구간의 동상방지층 포설	600㎥/일
다. 린콘크리트				린 콘크리트 기층 포설 기준	550㎥/일
라. 배수로시공	-			-	별도계상
마. 작업준비 (2단계)	스틱 설치간격 10m			자재발주(검측), 유도선 설치 등 포함	1,900m/일	3일
	스틱 설치간격 6m				1,600m/일
라. 콘크리트표층	일반구간		1차로	콘크리트 표층의 포설 기준, 단, 교량구간은 별도 계상	300㎥/일
			2차로		700㎥/일
마. 포장절단 및 줄눈설치	-			표층 포설기간에 절대공기를 추가하여 산정	3일
바. 부대공사	준공 전 단계적 수행			차선도색, 안전시설 설치 등	3일/km
비고 아스팔트포장과 콘크리트 포장을 구분/적용하며 표준품셈의 생산성을 기준(일반국도 도로포장 기준으로 작업1조를 투입한 결과)으로 공사물량에 따른 공기를 산정한다. 도로포장은 배수시설 시공을 기준으로 1단계(하부), 2단계(아스팔트:기층-표층, 콘크리트: 슬래브)로 구분하여 시공하며, 배수시설의 공사기간은 현장 특성에 따라 별도 계상한다. 부대공사(차선도색, 안전시설 설치 등)는 도로포장 공사와 연속적으로 발생하지 않으며, 준공 전에 단계적으로 수행하며 1km당 3일을 반영한다. 동상방지층은 지역특성에 따라 선택적으로 적용한다. 각 단계별로 공사 준비를 위한 소요기간 5일을 반영한다.

나. 교량공사

구분		산출근거	표준작업량
1. 기초공
가. 직접기초		암반청소(3일) + 버림타설(2일) + 철근조립(2일) + 거푸집 조립(2일) + 콘크리트 타설(1일)+ 양생(7일) + 기타(1일)	18일/개소
나. 말뚝기초		SDA : 20m 이상(8본/일), 20m 이하(12본/일)	10본/일
2. 하부공
가. 교대 벽체		벽체 철근조립(3일) + 거푸집조립(2일) + 콘크리트 타설(1일) + 양생(4일)	10일/1Lot (1Lot = 2.5m적용)
나. 교각	기둥	철근가공/조립(2일) + 거푸집조립(1일) + 콘크리트 타설(1일) + 양생(3일)	7일/1Lot (1Lot = 3.0m적용)
	코핑	동바리 설치(5일) + 거푸집조립 및 철근조립(7일) + 콘크리트 타설(1일) + 양생(7일)	20일/개소
3. 상부공
가. 거더 제작	부지조성	토공사(부지 조성 및 평탄화) : 10일	10일
	제작	작업대설치(2일) + 철근조립(3일) + 쉬즈관 조립(2일) + 콘크리트 타설(1일) + 양생(7일) + 강선인장 및 그라우팅(3일)	18일/본
나. 거더 운반 및 거치		운반 및 거치	2본/일
다. 상부슬래브		동바리 설치(7일) + 거푸집(5일) + 슬래브 철근조립(5일) + 콘크리트 타설 (1일) + 양생(7일)	25일/1경간 40일/2경간
라. 교면 포장(LMC)	포설	교면포장(200㎡/일)	200㎡/일
	마무리	자재 및 장비반입(3일) + 양생 및 마무리(5일)	8일/경간
마. 교량부대공사		교량난간 + 교량배수시설 + 교량방음벽 등	15일/교량
비고 본 기준은 거더교 중 PSC Beam교(도로교, 1경간 30m)에 가장 적합하며, 철근콘크리트 공사에 한하여 적용한다. 해당 생산성 기준은 공종별로 작업1조를 투입한 결과이며, 작업조(1조)의 구성은 장비사용 공종(기초, 포장 등)의 경우 적정규모의 장비1대 투입을 기준으로 적용한다. 교량 하부공의 1Lot(1회 시공) 높이는 교대 2.5m, 교각 3.0m를 적용하였으나, 강재거푸집의 제작 규격에 따라 시공높이를 조절할 경우 공사기간은 변경가능하다. 본구조물의 시공과 병행하여 절대공기에 반영이 필요한 부대공종에 대해서는 추가 공기를 반영하여야 한다. 동시에 수행되는 공정은 공종간의 간섭을 고려하여 표준 공기산정에 있어 현장 여건별로 다양한 작업계수를 적용할 수 있다. 교량별로 달라지는 사전작업(공사 준비, 가시설, 토공사 등)은 별도 계상하여야 한다.

다. 터널공사

구분	작업조건		산출근거	표준작업량
가. 갱구부 보강	시점부		실제 시공사례 및 전문가 의견에 근거	25일/개소
	종점부			25일/개소
나. 굴착 및 보강	P-1		해당 타입의 암판정+뚫기+버력처리+숏크리트+록볼트의 사이클타임	4.3m/일
	P-2		상동	4.1m/일
	P-3		상동	2.9m/일
	P-4	상반	상동	2.6m/일
		하반		7.1m/일
	P-5	상반	상동	2.2m/일
		하반		3.6m/일
	P-6	상반	상동	2.2m/일
		하반		2.9m/일
다. 보조공법	강관보강 그라우팅		실제 시공사례 및 전문가 의견에 근거	3일/개소
	차수 그라우팅		상동	5일/개소
라. 후속 공종	방수		상동	50m/일
	배수공동구		상동	25m/3일
	라이닝 콘크리트		상동	10m/3일
	갱문조성		상동	25일/개소
비고 터널 내 일 작업시간을 16시간 기준으로 적용하였고, 표준품셈의 생산성을 기준으로 공사물량에 따른 공기를 산정한다. 상기 기준은 단방향, 단면적 66.2㎡(표준단면도 1타입 기준)의 2차선 C군 터널을 기준으로 모든 공종에 작업1조(굴착 1조/2팀/2교대, 부대공 1조/1팀)을 투입하는 것으로 산정한 결과이다. 강관보강 그라우팅과 차수 그라우팅은 현장특성을 반영하여 선별적으로 적용한다. 암반청소는 배수공동구 공기에 포함되어 별도 계상하지 않는다. 후속공종인 방수, 배수공동구, 라이닝 콘크리트는 시공여건 및 공사 책임자의 판단에 따라 공사기간을 일부 중첩하여 수행할 수 있으나 표준공정에서는 순차시공으로 판단하여 적용한다. 6. 제어발파(선대구경등), 프리그라우팅, 선진수평보링, 시공중 탐사(TSP) 및 발파불가지역(무진동 굴착등)은 별도로 공기를 산정하여야 한다.

(2) 철도시설물

가. 노반구조물

구조물	고속철도	일반철도
교 량	- 준비기간 : 77일 - 확대기초 및 교각(25m) 44일/1기당 (40m) 60일/1기당 - 파일기초 및 교각(25m) 45일/1기당 (40m) 62일/1기당 - 우물통기초 및 교각 113일/1기당 - MSS가설장비 거치기간 : 53일 - 상부:・MSS(2ⓐ40m, 3ⓐ25m): 56일 - 부대공(방수·방음벽, EXP.Joint): 60일 · PC BOX : 준비기간(81)+{하부공(44～113)×3+ 상부공가설장비거치(53)+상부공(경간수/장비수량×45)+부대공(60)}×휴지계수(1.274) =약 1200～1500일	◦ 교량(복선) - 준비기간 : 60일 - 확대기초 및 교각 : 25일/1기당 ※ 파일기초 및 교각 : 40일/1기당 - 상부 : 20일/1련 - 부대공 : 30일 ◦ 교량(단선) - 준비기간 : 60일 - 확대기초 및 교각 : 20일/1기당 ※ 파일기초 및 교각 : 35일/1기당 - 상부 : 20일/1련 - 부대공 : 30일
터 널	- 준비기간 : 77일 - 갱구부 보강 : 66일 - 터널굴착(NATM) ・2,000m 이하 : 1.5m/일/heading ・2,000m 이상 : 2.5m/일/heading - 라이닝(굴착완료후) : 4m/일/heading - 갱구부 개착터널 : 30일/10m당 - 영구갱문 및 마무리작업 : 44일 - 사갱 3.2m/일, - 수직갱 1.5m/일 (최소공기 : 60일) ※ 개략산정 : 510일+굴착기간	◦ 터널(복선) - 준비기간 : 60일 - 갱구부설치 : 60일 - 굴착(NATM) : 2.1m/일 - 라이닝 : 3.3m/일 - 개착부라이닝 : 45일 - 부대공사 : 60일 ◦ 터널(단선) - 준비기간 : 60일 - 갱구부설치 : 60일 - 굴착(NATM) : 3.8m/일 - 라이닝 : 4.2m/일 - 개착부라이닝 : 30일 - 부대공사 : 60일
토 공	- 준비기간 : 77일 - 깍기 : 3.3m/일, 돋기 : 3.1m/일 - 강화노반 : 60일	- 준비기간 : 70일 - 깍기 : 3.3m/일 - 돋기 : 3.1m/일

나. 건축물

구조물	고속철도	일반철도
건물	- 역사 : 3년 ※ 노반공사 1년 병행작업 - 변전건물(SS,SP, SSP), 신호장 : 1년 - 역무관련 및 운전관련 기계실은 건물완료 6개월전 시스템 인계	- 역사 : 1년6개월～2년 - 변전건물(SS,SP,SSP), 신호장 : 1년 - 역무관련 및 운전관련 기계실은 건물완료 6개월전 시스템 인계

다. 궤도

구조물	고속철도	일반철도
궤도	- 노반 합동측량 후 인수 - 공동관로 및 통신케이블, 배전케이블, 신호케이블 포설 후 인수 - 콘크리트궤도부설 · 복선 : 150m/일 -장대레일운반(부설)(300m 기준) · 300m 26본 주1회 운송 · 557m/일 (단선기준)	◦ 자갈궤도 부설/철거 - 궤도 부설 : 100m/일 - 궤도 철거 : 130m/일 - 분기기 부설 : 1틀/3일 - 분기기 철거 : 1틀/1일 ◦ 자갈살포 - 10량/1일(기관차 이용시) ◦ 다지기/운반 - 선로다지기(MTT):５００m/일 - 분기기다지기(SIT):2틀/일 - 장대레일운반 : 400m/일 - 침목운반 : 150정/일

라. 시스템

공종	산 정 기 준
전 차 선	․ 전주기초 : 5개소/일 ․ 전철주건식 : 10본/일 ․ 전차선, 조가선 가선 : 400m/일 ․ 터널브라켓 : 7본/일 ․ 구분장치 : 4개소/일 ․ 인류장치 : 5개소/일
송전설비	- 총소요공기 : 24개월 ․ 시공측량 : 2개월 ․ 가선 : 3개월 ․ 진입로 개설 : 6개월 ․ 전선이도조정 : 1개월 ․ 기초공사 : 5개월 ․ 시험 : 3개월 ․ 철탑신설 : 4개월
변전설비	- 총소요공기 : 24개월 ․ 시공측량 : 1개월 ․ 기지설치 : 3개월 ․ 기초파일타설 : 2개월 ․ 전선가선 : 1개월 ․ 기초공사 : 5개월 ․ 케이블설치 : 5개월 ․ 구조물 설치 : 4개월 ․ 시험 : 3개월
배전설비	․ 관로신설 : 100m/일 ․ 지중케이블신설 : 800m/일 ․ 가공전선신설 : 300m/일 ․ 전기실 설비 : 2개소/월 ․ 기존선로철거 : 600m/일
통신설비	․ 관로신설 : 250m/일 ․ 동케이블신설 : 250m/일 ․ 광케이블신설 : 1,000m/일 ․ 기타설비 : 2개월(1개소당) (광단국, 방송설비, 토크백, CCTV, 사령설비 등)
신호설비	- ABS/연동장치 시공 ․ 선로변설비 : 200m/일 ․ 역설비 : 4개월(1개소당) - CTC장치개수 : 1개월(1역당)

마. 종합시험(철도종합시험운행 시행지침)

분 야	고속철도	일반철도
시험	◦ 신설선 : 90일이상 ◦ 일반철도 전체구간을 고속철도로 개량 : 90일이상 ◦ 일반철도 일부구간을 고속철도로 개량 : 40일이상 ◦ 고속철도와 일반철도 연결구간 : 40일이상	◦ 신설 : 60일이상 ◦ 개량 : 40일이상 - 선로, 전차선로, 열차제어장치 신설, 이설, 개량 시

※ 종합시험운행기간은 실제로 시설물검증과 영업시운전을 시행한 기간을 말한다.

(3) 공동주택

구 분				산정기준		비 고
토목공사기간	토공사 (터파기)			․ 토목 토공사 : 현장여건에 따라 산정 ․ 지하층 1개층 : 10일		토목터파기8일+ 건축터파기2일
				․ 지하층 1개층 초과 : 10일 추가 ․ 지하층 4.5M 초과 : 10일 추가 ․ 암반,전석이 있는 경우 : 현장여건에 따라 공사기간 추가 조정		초과하는 매층마다 (토목터파기)
	흙막이			․ 자립식 10일, E/A식 20일		L=120M, H=7M
건축공사기간	기초공사			․ 파일기초 - 15m이하 : 24일 - 16m～30m이하 : 44일 - 30m초과 : 별도산정 - 15m이하 선굴착 : 40일 - 16m～30m이하 선굴착 : 80일 - 선굴착공법 지지력시험 : 11일 등		파일 혼합시 혼합비율에 따라 산정
				․ 지하주차장 부상방지 어스앵커 10일
				․ 내림기초 - 3m : 15일, 6m : 30일, 9m : 45일
	골조공사	지하층		지하층	․ 1개층 31일, 2개층 51일 ․ 2개층 초과시 초과하는 매층마다 21일	좌측 기준에 따라 일수산정하며, 실작업일임
				지하 주차장	․ 주동통합(1개층, 150대미만) 7일 ․ 주동통합(1개층, 150대이상) 14일
		지상층	골조	1층	․ 18일(골조동절기기간에는 19일)
				2층이상	․ 층당 8일(골조동절기기간에는 9일)
			보정	욕실	․ 조립실욕실 : 6층이상 층당 1일 감(최대15일)
				지역	․ 군소재지 이하, 강원관서(태백시) : 10일 ․ 제주도 등 도서지역 : 20일
				단차	․ 단차가 있는 층 : 30일(테라스하우스 등)
				지붕	․ Con'c 경사 15일, 철골 경사 10일
	마감공사			․ 185일(임대), 195일(분양,공임)
건축공사 준공후 토목공사 기간				․ 건축공사 준공 후 : 15일		1000세대 이상 10일 추가
토목공사 준공후 조경공사 기간				․ 토목공사 준공 후 : 15일

별표 4. 시설물별 공기 산정공식

※ 최근 5년간 준공된 총공사비 10억원 이상인 공사의 실적 공기를 분석하여 작성

구분	시설물	산정공식	변수 정의	적용범위
건축	건축(공통)	Y = -68.550 + 18.192·B + 12.079·G – 5.25·ln(A) + 167.632·ln(C)	C = 총공사비(억원) A = 연면적(100㎡) G = 지상층수(층) B = 지하층수(층)	총공사비 10억원 이상
	공동주택	Y = -21.674 + 7.953·G + 116.835·ln(C)
	체육시설	Y = -278.109 + 189.438·ln(C)
토목	도로포장	Y =-637.009+173.198·ln(L)+0.049·C	C = 총공사비(백만)	총공사비 350억원 이하
			L = 도로연장(m)
	도로 (토공+교량)	Y=-160.855-14.288·W+164.473· ln(L)-1.474·BL+0.052·C	C = 총공사비(백만)	총공사비 350억원 이하
			W = 도로폭원(m)
			L = 도로연장(m)
			BL = 교량연장(m)
	농업용수	Y = -2251.569 + 415.137·ln(C)	C = 총공사비(백만)	총공사비 10~200억원
	상수도	Y=-1175.174+119.731·S–0.273·D +222.426·ln(C)	C = 총공사비(백만)	총공사비 80억원 이하
			D = 관경(mm)
			S = 양수장/배수장/ 가압장 개수
	하수도	Y =-452.433 + 98.364·ln(SL)+0.083·C	C = 총공사비(백만)	총공사비 150억원 이하
			SL= 하수도 연장(m)
	철도(궤도)	Y=-1723.316–74.260·ln(RL) +372.266·ln(C)	C = 총공사비(백만)	총공사비 1,200억원 이하
			RL = 궤도연장(m)
비고 위 공식은 해당 시설물의 적용범위(총공사비, 연장 등)를 확인하여 적용하며, 산정공식은 단위에 주의하여 적용한다. ‘건축(공통)’은 공동주택과 체육시설을 제외한 건축물(업무시설, 교육연구시설, 복지시설, 문화시설, 교정 및 군사시설 등)에 적용한다. ‘도로포장’은 포장공사(토공 포함)에만 적용하고, 토공구간과 교량구간이 공존할 경우에는 ‘도로(토공+교량)’의 산정공식을 적용한다. 철도(궤도)는 철도 중 노선에 관하여 적용하며, 설비관련 부분의 공기는 별도로 계상한다. 총공사비는 추정금액(추정가격에 부가가치세와 관급자재비를 합한 금액)을 말한다. 장기계속공사의 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제8조제2항 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제9조제2항의 규정에 따른 총공사금액을 적용한다. 위의 공식에 의해 산정한 결과에 당해 공사의 현장여건 및 공사특성 등을 고려하여 공기를 가감하여 적용할 수 있다.

별표 5. 시공조건 명시 항목 예시

(1) 용지보상

공사의 용지보상이 아직 처리되지 않은 부분이 있어 공사착수에 차질이 예상되는 경우에는 그 장소, 범위 및 처리 예정 시기

공사용지 등의 사용종료 후의 복구내용

공사용 가설도로․기자재 보관용의 토지를 임대하는 경우 그 장소, 범위, 시기, 기간, 사용조건, 복구방법 등

시공자에게 가설 야드로서 시유지 등 및 발주자가 임대토지를 사용하는 경우에는 그 장소, 범위, 시기, 기간, 사용조건, 복구방법 등

(2) 인·허가 및 심의 절차

관계기관, 지자체 등과의 협의결과, 특정 조건이 부여되어 당해 공사의 공정에 영향이 있는 경우에 그 항목 및 영향 범위

당해 공사의 관계기관 등과의 협의에 미완료된 부분이 있는 경우는 제약내용 및 그 협의 내용, 완료 예정 시기

타 공사의 개시 또는 완료 시기에 의해 당해 공사의 시공시기, 전체공사 등에 영향이 있는 경우 영향 개소 및 타 공사의 내용, 개시 또는 완료 시기

시공시기, 시공시간 및 시공방법이 제한되는 경우는 제한되는 작업내용 및 시기, 시공시간 및 시공방법

(3) 지장물 이설·철거공사 등

공사착수 전에 지하매설물 등의 사전조사를 필요로 하는 경우에는 그 항목 및 조사기간. 또 지하매설물 등의 이설이 예정되어 있는 경우에는 그 이설 기간

지상, 지하 등에 점용물건의 유무 및 점용물건 등에서 공사지장물이 존재하는 경우는 지장물건명, 관리자, 위치, 이설시기, 공사방법, 방호 등

지상, 지하 등의 점용물건공사와 중복하여 시공하는 경우는 그 공사내용 및 기간 등

(4) 문화재 시·발굴

공사착수 전에 지장문화재 등의 사전조사를 필요로 하는 경우에는 그 항목 및 조사기간

문화재의 시·발굴이 예정되어 있는 경우에는 그 기간

(5) 환경 관련

공사착수 전에 사후환경영향조사를 필요로 하는 경우에는 그 항목 및 조사기간

공사에 따른 공해방지(소음, 진동, 분진, 배출가스 등)를 위해 시공방법, 건설기계․설비, 작업시간 등을 설정할 필요가 있는 경우는 그 내용

물갈이․유입방지시설이 필요한 경우는 그 내용, 기간

탁수, 용수 등의 처리로 특별한 대책이 필요한 경우는 그 내용(처리시설, 처리조건 등)

공사의 시공에 따라 발생하는 지반침하(씽크홀), 지하수의 고갈, 전파장애 등으로 인한 손실이 우려되는 경우에는 사전․사후 조사의 구분과 그 조사 시기, 미연에 방지하기 위해 필요한 조사방법, 범위 등

(6) 안전대책

철도, 가스, 전기, 전화, 수도 등의 시설과 근접하는 공사의 시공방법, 작업시간 등에 제한이 있는 경우는 그 내용

낙석, 폭설·토사에 따른 붕괴 등에 대한 방호시설이 필요한 경우는 그 내용

교통유도원, 경계선 및 발파작업 등의 안전설비, 보안요원의 배치를 지정하는 경우 또는 발파작업 등에 제한이 있는 경우는 그 내용

유독가스 및 산소결핍 등의 대책으로 환기설비 등이 필요한 경우는 그 내용

(7) 공사용도로 관계

일반도로를 반입로로 사용하는 경우

① 공사용 기자재 등의 반입경로, 사용기간, 사용시간대 등의 제한이 있는 경우는 그 경로, 기간, 시간대 등

② 반입로의 사용 중 및 사용 후의 처치가 필요한 경우는  그 처치내용

가설도로를 설치하는 경우

① 가설도로에 관한 안전시설 등이 필요한 경우는 그 내용, 기간

② 가설도로의 공사종료 후의 처치(존치 또는 철거)

③ 가설도로의 유지보수가 필요한 경우는 그 내용

(8) 가설공사 관계

가토류벽, 가교, 비계 등의 가설물을 다른 공사에 인도하는 경우 및 계속 사용하는 경우는 그 내용, 기간, 조건 등

가설비의 구조 및 그 시공방법을 지정하는 경우는 그 구조 및 그 시공방법

가설비의 설계조건을 지정하는 경우는 그 내용

(9) 건설부산물 관계

건설발생토가 발생하는 경우는 잔토의 유입장소 및 가적치 장소까지의 거리, 시간 등의 처분 및 보관조건

건설부산물의 현장 내에서의 재이용 및 감량화가 필요한 경우는 그 내용

건설부산물 및 건설폐기물이 발생하는 경우는 그 처리방법, 처리 장소 등의 처리조건. 또 재자원화처리시설 또는 최종 처분장을 지정하는 경우는 그 유입장소, 거리, 시간 등의 처분조건

(10) 기타

지급자재 및 대여품이 있는 경우는 그 품명, 수량, 품질, 규격 또는 성능, 인도장소, 인도기간 등

공사용 전력 등을 지정하는 경우는 그 내용

신기술․신공법․특허공법을 지정하는 경우는 그 내용

부분사용을 실시할 필요가 있는 경우는 그 개소 및 사용시기

급수의 필요가 있는 경우는 취수개소․방법 등

별표 6. 공사기간 변경에 따른 실비 산정

1. 간접노무비

(1) 대상

공사 및 현장관리를 위해 현장사무소에 근무한 인원. 단, 현장의 공사작업과 관련된 업무를 수행한 인원 및 산업안전보건관리비 정산대상인 안전관리 업무를 수행한 자는 제외한다.

① 현장소장 ② 현장사무원(총무, 경리, 급사 등) ③ 기획·설계부문 종사자 ④ 노무관리원 ⑤ 자재·구매관리원 ⑥ 공구담당원 ⑦ 시험관리원 ⑧ 교육·산재담당원 ⑨ 복지후생부문종사자 ⑩ 경비원 ⑪ 청소원

(2) 노무량

계약상대자는 공사기간의 변경사유가 발생하는 즉시 예상되는 기간 동안 현장유지·관리에 소요되는 인력투입계획을 발주청에 제출하고, 발주청의 승인 후 인력을 투입하여야 한다.

(3) 임금

공사기간의 변경사유 발생 전 최근 3개월의 급여 등 임금 지급 관련서류(급여 연말정산서, 임금지급대장, 공사감독의 현장확인복명서 등 객관적 자료)를 참고하여 지급이 확인된 임금

정상적인 공사기간 중에 실제 지급된 임금수준을 초과할 수 없다.

(4) 산정기준

기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액. 작업상 통상적으로 지급되는 임금 또는 수당이라 볼 수 없는 성과격려금, 학자금, 개인연금 등은 급여지불조서 및 보수규정(근로계약서)을 확인하여 제외한다.

기본급 : 급여명세서상에 지불된 급여로서 기본급 및 본봉을 계상

제수당 : 시간외수당, 야간수당, 휴일수당 등 통상적 지급 금액

상여금 : 기본급의 400%/년을 초과하지 않는 범위내의 실 지급액

퇴직급여충당금 : (월별 기본급+제수당+상여금/12) × 근무개월수

2. 경비

(1) 직접계상 항목

공사기간 연장과 관련하여 시공자가 제출한 객관적 증빙자료(계약서, 요금고지서, 영수증, 세금계산서, 카드전표 등)를 확인하여 산정한다.

지급임차료 : 계약목적물을 시공하는데 직접 사용되거나 제공되는 토지, 건물, 기계 기구(건설기계 제외)의 사용료에 한함. 공기가 연장됨에 따라 임차기간이 연장되어 추가로 발생한 비용

보관비, 가설비 : 게약목적물의 시공에 소요되는 자재 등을 보관하기 위한 비용. 일시적으로 사용하는 재료, 시설, 설비 등의 비용으로서 공기가 연장됨에 따라 사용기간이 연장되어 추가 발생한 비용

유휴장비비 : 공기가 연장됨에 따라 건설장비의 유휴가 발생하게 되는 경우 즉시 발생사유 등을 발주청에 통지하여야 하며, 계약담당공무원은 계약의 이행여건상 타당하다고 인정될 경우에 유휴비용을 산정. 임대장비는 유휴기간 중 실제로 부담한 장비임대료를, 보유장비는 표준품셈에 따른 시간당 손료의 50%를 계상

※ 보유장비 = (장비가격×시간당장비손료계수)×(연간표준가동시간÷365일)×(유휴일수)×1/2

기타실비 : 경비지출관련 계약서, 요금고지서, 영수증 등 실비를 확인할 수 있는 객관적인 자료로 공기연장과 관련 있다고 판단되는 비용

(2) 비율계상 항목

산출내역서상 승률비율 적용하며, 관련규정에서 정한 요율을 초과할 수 없다.

산재보험료 : 건설근로자의 산업재해를 보상하기 위한 비용으로, 노무비의 합계액에 산출내역서상의 산재보험료요율을 곱하여 산출된 금액과 당초 산출내역서상의 금액과의 차액으로 함

고용보험료 : 고용보험사업에 필요한 비용을 충당하기 위해 필요한 비용으로, 노무비의 합계액에 산출내역서상의 고용보험료요율을 곱하여 산출된 금액과 당초 산출내역서상의 금액과의 차액으로 함

기타경비 : 경비의 주요 항목 이외에 7개 항목의 제경비 항목(수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비·교통비·통신비, 세금과공과, 도서인쇄비, 지급수수료). 재료비와 노무비의 합계액에 산출내역서상의 기타경비율을 곱하여 산출된 금액과 당초 산출내역서상의 금액과의 차액으로 함

3. 일반관리비 및 이윤

일반관리비 : 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로, 공사원가 소계에 산출내역서상 일반관리비율을 곱하여 산출

※ 일반관리비 = (간접노무비+경비) × 일반관리비비율

이윤 : 영업이익. 공사원가 소계와 일반관리비의 합계에 산출내역서상 이윤율을 곱하여 산출

※ 이윤 = (간접노무비+경비+일반관리비) × 이윤율

4. 공사손해보험료 등 보증수수료

공사손해보험료 등 보증수수료 : 계약상대자의 책임없는 사유로 공사기간이 연장되어 당초 제출한 계약보증서․공사이행보증서․하도급대금지급보증서 및 공사손해보험 등의 보증기간을 연장함에 따라 소요되는 추가비용. 보증수수료의 영수증 등 객관적인 자료에 의해 확인된 금액을 기준으로 산출