「2024 적정공사기간 확보를 위한 가이드라인」주요내용

□ 공사기간 연장조건 명확화

○ 계약금액 및 기간 조정 등 조치 의무화

- (시공품질 및 안전확보) 시방서, 산업안전보건기준 개정 등으로 추가 조치 필요시 발주청은 계약기간 연장 및 금액 조정 등 조치 의무(p.10)

- (기상조건) 폭염, 악천후 등 불가항력의 사유로 인한 공사기간의 증가*시 계약기간 연장 조치 의무(p.10)

* 공사기간 산정시보다 실제 공사중 기상조건에 의한 비작업일수가 많은 경우

□‘공동주택 공사기간 산정 실무가이드’마련

○ 공동주택 택지 유형별 준비기간 구체화 등

- (준비기간) 택지지구 45일, 비택지지구 60일로 구체화

- (작업일수) 공종작업일수의 구성을 순작업일수, 간접작업일수, 보정일수로 나누어 세부적인 기준을 제시하여 일수 구체화

구분	내용	비고
순작업일수	해당 공사의 공종별 수량을 시공하는데 소요되는 작업일수
간접작업일수	검측, 점검, 양생, 장비조립, 보강, 운반 등 시공을 위한 전·후 작업준비와 품질·안전확보에 소요되는 작업일수
보정일수	공사의 규모 및 성격, 지역여건을 고려하여 공사기간 반영

※ 위 작업일수는 공사의 규모 및 시공조건, 기후여건, 공법 등을 고려하여 요인을 추가하거나 일수를 조정하여 반영할 수 있음

○ 공정별 표준공정표 작성 사례 마련

- (공동주택 표준공정표) 주공정(CP)의 작업일수(순,간접작업입수)를 산출 및 보정일수를 고려하여 공사기간 산정

- (공사기간 산정법) 해당 현장의 설계조건(적용공법, 작업조건, 수량 등) 및 현장여건을 고려하여 산정(가이드라인 예시 참고)