<첨 부2>

SOC현장 실태조사 결과

1. 조사대상 현황

구 분	06년도	07년도
기업별 현황 조사	15개사 638개 현장	21개사 409개 현장
현장별 세부 조사	40개 현장	110개 현장

2. 원활 현장 : 부족 현장

구 분	06년도	07년도
원활 : 부족	46.1% : 53.9%	52.6% : 47.4%

3. 현장 운용실태

구 분	06년도	07년도
사전공사	29.40%	45.40%
공종 및 인원 축소 운영	37.80%	48.50%
기타(적자시공, 공사타절 등)	32.80%	6.10%

4. 계약 첫해년도 예산배정액(평균)

구 분	06년도	07년도
건 축	미조사	6.0%
도 로		4.0%
항 만		3.0%
교 량		1.9%
철 도		3.6%
계		3.8%

5. 공기 연장 실태

구 분	06년도	07년도
1년 미만	-	19.40%(13개)
1년이상～2년미만	17.40%(4개)	25.40%(17개)
2년이상～3년미만	69.60%(16개)	1.49%(9개)
3년 이상	13.0%(3개)	41.79%(28개)
소 계(연장비율)	57.50%(23개)	60.90%(67개)
공기미연장	42.50%(17개)	39.1%(43개)

※공기연장 예상 현장 포함

6. 3개년(‘05-‘07) 배정예정액 대비 실제배정액

(단위 : 억원)

구 분	도로	항만	교량	철도	건축	평균액
당초 배정 예산액(3개년평균)	443	863	561	685	312	517
실제 배정 예산액(3개년평균)	298	746	409	461	207	365
비 율	67.2%	86.4%	73.0%	67.3%	66.3%	70.6%

※연도별 예상액 대비 실제배정액 : (‘05) 71.8%, (’06) 68.8%, (‘07) 71.6%

7. 당초 예상공정율 대비 현재공정율

구 분	도로	항만	교량	철도	건축	평균액
당초 공정율	75.3%	80.7%	73.4%	77.1%	74.6%	76.0%
현재 공정율	48.1%	65.3%	52.0%	57.0%	53.5%	51.8%
비 율	63.9%	80.9%	70.8%	74.0%	71.6%	68.2%

8. SOC 예산부족으로 제기되는 문제점 우선순위

구 분	1순위	2순위	3순위	4순위	소 계
품질관리	23.8%(5개)	42.9%(9개)	23.8%(5개)	9.5%(2개)	100.0%(21개)
안전관리	28.6%(6개)	14.3%(3개)	23.8%(5개)	33.3%(7개)	100.0%(21개)
민원발생	14.3%(3개)	19.0%(4개)	19.0%(4개)	47.7%(10개)	100.0%(21개)
경영부담	33.3%(7개)	23.8%(5개)	33.3%(7개)	9.5%(2개)	100.0%(21개)

9. 사전공사 시행에 따른 보상실태

구 분	①전혀 보상 없음	②ESC적용을 통한 전액 보상	③ESC 적용을 통한 일부 보상	④기 타
비 율	42.9%	4.8%	47.5%	4.8%