주요자재 수급불안에 따른 공사중단 현황(양식)

▢ 공사중단 현황

○ㅇㅇ건설

현장명	공사금액	발주 구분	중단일수							관급자재 대상품목	공기연장
			총 중단일	철근			형강	레미콘	콘크리트 파일
				SD300	SD400	SD500					요청여부	승인여부
A	1000억원	공공	26일	12일	23일				11일	철근, 레미콘	요청	승인
B	500억원	공공	12일	7일	12일				11일	철근	미요청	-
C		민간	13일	7일			2일		4일	-	-	-

주) 1. 조사대상 : ’21.3.1 ∼ ’21.4.30까지 자재 수급불안으로 인해 공사중단이 발생한 현장
2. 현장명 : 구체적 현장명을 기재하지 말고 A, B 등 구분 용도로만 작성
3. 총 지연일 : 각 자재별 중단일수 중복을 고려하여 산정

※ 예시 : 철근(SD400) 중단 기간이 4.1 ∼ 4.10 까지이고,
레미콘 중단기간이 4.6 ∼4.16 까지인 경우 총 중단일은 4.1 ∼ 4.16까지인 16일이 되는 것임

4. 관급자재 대상품목 : 철근, 레미콘 등 해당 현장의 관급자재를 작성