1. 정부입찰‧계약집행기준

현  행

개  정

제8조(집행기준) ①계약담당공무원은 시행령 제26조제1항제2호 가목 내지 바목에 의한 수의계약을 할 때에는 다음 각 호의 기준에 해당하는 경우로서 경쟁이 성립할 수 없는 경우에 한하여 체결하여야 한다.

제8조(집행기준) ①--------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

1. ∼ 3. (생 략)

1. ∼ 3. (현행과 같음)

4. 시행령 제26조제1항제2호 "라" 및 "마"목에서 규정하고 있는 사실상 경쟁이 불가능한 경우라 함은 금차공사가 접적지역, 도서지역, 고산벽지 또는 이에 준하는 특수지역의 공사이거나 특허공법에 의한 공사 및 「건설기술진흥법」제14조에 따라 지정·고시된 신기술, 「환경기술 및 환경산업지원법」제7조에 따라 인증 내지 검증받은 기술 또는 「전력기술관리법」제6조의2에 따른 신기술(같은 법에 따라 지정된 보호기간 내로 한정한다)을 적용하는 공사로서 입찰적격자가 한정되어 경쟁이 실질적으로 곤란한 경우를 말한다.

4. ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 도서지역(연륙교로 육지와 연결된 지역은 제외한다.) ---------------특허공법에 의한 공사 및 「건설기술진흥법」제14조에 따라 지정·고시된 신기술, 「환경기술 및 환경산업지원법」제7조에 따라 인증 내지 검증받은 기술 또는 「전력기술관리법」(법률제13741호로 개정되기 전의 것을 말한다)제6조의2에 따라 지정·고시된 새로운 전력기술 또는 「자연재해대책법」제61조에 따라 지정·고시된 방재신기술(각 해당 법률에 따라 지정된 보호기간 또는 유효기간 내의 경우로 한정한다)을-------------------------
--------------------------------------------------------------------.

5. (생 략)

5. (현행과 같음)

② (생  략)

② (현행과 같음)

제10조(소액수의계약 체결절차 등) ① 계약담당공무원은 시행령 제26조제1항제5호가목에 따라 수의계약을 체결함에 있어 추정가격이 2천만원(시행령제30조제1항제2호 단서에 따른 여성기업 또는 장애인기업과 계약을 체결하는 경우에는 5천만원)을 초과하는 경우에는 시행령 제14조제3항에 따라 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 국가종합전자조달시스템(이하 "전자조달시스템"이라 한다)을 이용하여 견적서를 제출하도록 하여야 하고, 시행령 제36조 각 호에 정한 사항 중 필요한 사항을 견적서제출마감일 전일부터 기산하여 3일(공휴일과 토요일은 제외하고 산정한다)전까지 전자조달시스템을 이용하여 안내공고를 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제10조(소액수의계약 체결절차 등) ① ----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(같은 목 5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우에는 5천만원)-----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

1.∼4. (생 략)

1.∼4. (현행과 같음)

② (생 략)

② (현행과 같음)

③계약담당공무원은 제1항 본문에 따라 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하게 하는 공사의 경우에는 설계서, 공종별 목적물 물량내역서(이하 "물량내역서"라 한다), 기타 견적서 제출에 필요한 서류를 작성·비치하여야 하고, 견적서제출마감일까지 견적서를 제출하려는 자에게 열람하게 하고 교부(설계서의 경우에는 교부를 요구한 경우에 한정한다)하여야 한다. 다만, 계약담당공무원은 물량내역서 및 견적서 제출에 필요한 서류를 전자조달시스템에 게재함으로써 열람 또는 교부에 갈음할 수 있다.

③ -----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------교부하여야--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

④∼⑦ (생  략)

④∼⑦ (현행과 같음)

제10조의9(예비계약의 체결)①(생  략)

제10조의9(예비계약의 체결)① (현행과 같음)

②계약담당공무원은 제1항의 계약을 체결함에 있어 다음 각 호의 사항을 부관으로 약정하여야 한다.

②----------------------------------------------------------------------.

1.∼4. (현행과 같음)

1.∼4. (현행과 같음)

<신 설>

5. 본계약을 체결함에 있어 제10조의12 제2항에 따라 계약금액 조정이 가능하다는 취지

제10조의10(발주기관 검토가격 작성) ①∼③ (생  략)

제10조의10(발주기관 검토가격 작성) ①∼③ (현행과 같음)

<신 설>

④ 계약담당공무원은 제1항에 따라 발주기관 검토가격을 작성함에 있어서, 당초 산출내역서상의 물량・단가를 조정 반영하는 경우에는 그 내역 및 사유를 상대방에게 고지하여야 한다.

제10조의11(가격협상) ①∼③(생 략)

제10조의11(가격협상) ①∼③ (현행과 같음)

<신 설>

④ 계약담당공무원(조달사업에 관한 법률 제5조의2에 따라 조달청장에게 계약을 의뢰하는 공사에 대하여는 수요기관 담당공무원을 말한다)은 최소 협상가격이 예산금액을 초과하는 등 예산금액의 범위 내에서 가격협상이 곤란하다고 판단되는 경우에는 설계서 변경 등을 통해 공사물량을 감축할 수 있다. 다만, 당초 입찰안내서 등에서 명시 또는 반영하도록 되어 있는 사항을 제외하여서는 아니된다.

제34조(적용범위) ①∼⑨(생 략)

제34조(적용범위) ①∼⑨(현행과 같음)

⑩ 계약담당공무원은 선금을 지급할 수 있는 경우에도 잔여이행기간이 선금지급 신청일을 기준으로 30일을 초과하지 아니할 경우에는 선금을 지급할 수 없다. 다만, 선금을 지급하지 아니하고는 계약이행이 곤란하다고 인정되는 다음 각호의 경우에는 잔여이행기간이 선금지급 신청일을 기준으로 30일 이내인 경우에도 선금을 지급할 수 있다.

<삭 제>

1. 긴급을 요하는 공사

2. 원자재 가격급등, 환율변동, 그 밖의 긴급한 사유로 선금을 지급하지 아니하면 계약이행이 곤란하다고 판단되는 경우

⑪∼⑫ (생 략)

⑪∼⑫ (현행과 같음)

제36조(선금의 사용) ①(생 략)

제36조(선금의 사용) ①(현행과 같음)

② 계약담당공무원은 지급된 선금이 제1항에 의한 용도로 사용되었는지 여부를 확인하기 위하여 선금전액 사용시에는 계약상대자로 하여금 사용내역서를 제출하게 하여야 한다. 다만, 고시금액 미만의 물품‧용역계약에서 선금을 30% 미만 지급한 경우에는 해당 선금의 사용내역서를 제출하지 아니하게 할 수 있다.

<삭 제>

③∼⑤ (생 략)

③∼⑤ (현행과 같음)

제37조(선금의 정산) 선금은 기성부분 또는 기납부분의 대가 지급시마다 다음 방식에 의하여 산출한 선금정산액 이상을 정산하여야 한다.

선금정산액 = 선금액 × [기성(또는기납) 부분의 대가상당액 / 계약금액]

제37조(선금의 정산) ①---------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------.

------------------------------------------------

<신 설>

②계약담당공무원은 계약 이행기간의 종료일 이전에 제1항에 따라 선금 전액의 정산이 완료된 경우로서, 계약상대자의 신청이 있는 경우에는 선금의 정산이 완료되었음을 증명하는 서류를 발급하여야 한다.

제73조(공사이행기간의 변경에 따른 실비산정) ①(생 략)

제73조(공사이행기간의 변경에 따른 실비산정) ①(현행과 같음)

②제1항에 따라 노무량을 산출하는 경우 계약담당공무원은 계약상대자로 하여금 공사이행기간의 변경사유가 발생하는 즉시 현장유지·관리에 소요되는 인력투입계획을 제출하도록 하고, 공사의 규모, 내용, 기간 등을 고려하여 해당 인력투입계획을 조정할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 계약상대자에게 이의 조정을 요구하여야 한다.

②------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 계약상대자와 협의하여 이를 조정하여야 한다.

③∼⑤(생  략)

③∼⑤(현행과 같음)

부   칙(2019.12.18.)

제1조(시행일) 이 계약예규는 2019년 12월18일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 계약예규는 부칙 제1조에 따른 시행일 이후 입찰공고하거나 수의계약체결 하는 경우부터 적용한다.

2. 예정가격 작성기준

현 행	개 정
제2조(계약담당공무원의 주의사항) ①∼③ (생 략)	제2조(계약담당공무원의 주의사항) ①∼③ (현행과 같음)
<신 설>	④계약담당공무원은 공사원가계산에 있어서 공종의 단가를 세부내역별로 분류하여 작성하기 어려운 경우 이외에는 총계방식(이하 "1식단가"라 한다)으로 특정공종의 예정가격을 작성하여서는 아니된다.
<제2절 제조원가계산> 제11조(경비)①∼②(생 략)	<제2절 제조원가계산> 제11조(경비)①∼②(현행과 같음)
③경비의 세비목은 다음 각호의 것으로 한다.	③------------------------------------------ -------.
1.∼20. (생 략)	1.∼20. (현행과 같음)
<신 설>	21. 법정부담금은 관련법령에 따라 해당 제조와 직접 관련하여 의무적으로 부담하여야 할 부담금을 말한다.
21. 기타 법정경비는 위에서 열거한 이외의 것으로서 법령에 규정되어 있거나 의무지워진 경비를 말한다.	22. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
<제3절 공사원가계산> 제19조(경비)①∼②(생 략)	<제3절 공사원가계산> 제19조(경비)①∼②(현행과 같음)
③경비의 세비목은 다음 각호의 것으로 한다.	③------------------------------------------ --------.
1.∼25. (생 략)	1.∼25. (현행과 같음)
<신 설>	26. 법정부담금은 관련법령에 따라 해당 공사와 직접 관련하여 의무적으로 부담하여야 할 부담금을 말한다.
26. 기타 법정경비는 위에서 열거한 이외의 것으로서 법령에 규정되어 있거나 의무지워진 경비를 말한다.	27. -----------------------------------------------------------------------------.
	부 칙(2019.12.18.) 제1조(시행일) 이 계약예규는 2019년 12월18일부터 시행한다. 제2조(적용례) 이 계약예규는 부칙 제1조에 따른 시행일 이후 예정가격을 작성하는 분부터 적용한다.

3. 입찰참가자격사전심사요령

현  행

개  정

제7조(심사기준의 조정) ①∼② (생   략)

제7조(심사기준의 조정) ①∼② (현행과 같음)

③ 계약담당공무원은 제6조를 적용함에 있어 해당공사의 성질·내용 등을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우에는 별표 2 및 3의 분야별·항목별 배점한도를 가·감 조정하거나, 항목별 세부사항을 추가 또는 제외할 수 있다. <단서 신설>

③ -----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 신인도 항목을 추가 또는 제외하려는 경우에는 기획재정부장관과 협의를 거쳐야 한다.

④ (생   략)

④ (현행과 같음)

[별표 2] 기술적 공사이행능력부문 분야별 심사항목 및 배점기준(제6조제5항제1호의 경우에 적용)

[별표 2] 기술적 공사이행능력부문 분야별 심사항목 및 배점기준(제6조제5항제1호의 경우에 적용)

심사분야		심 사 항 목
분야별	배점 한도	항 목 별	배점 한도
5. 신인도	+3 -10	가. (생 략)
		1) (생 략)	-2
		2)「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조제1항 각 호에 따라 6개월 이상의 입찰참가자격 제한을 받은 후 입찰참가자격 제한기간 만료일로부터 해당 제한기간 만큼의 기간이 경과하지 아니한 자	-2
		3) (생 략)	-5
		나. (생 략)
		다. 건설재해 및 제재처분사항
		1) 최근 3년간 고용노동부장관이 산정한 환산재해율의 가중평균이 평균환산재해율의 가중평균 이하인 자	+1
		2)~4) (생 략)
		<신 설>	<신 설>
		5) (생 략)
		라.∼마. (생 략)

심사분야		심 사 항 목
분야별	배점 한도	항 목 별	배점 한도
5. 신인도	+3 -7	가. (현행과 같음)
		1) (현행과 같음)	-2
		2)<삭 제>	<삭 제>
		3) (현행과 같음)	-5
		나. (현행과 같음)
		다. 건설재해 및 제재처분사항
		1) 최근 3년간 고용노동부장관이 산정한 사고사망만인율의 가중평균이 평균사고사망만인율의 가중평균 이하인 자	+1
		2)~4) (현행과 같음)
		5) 최근 1년동안 산업안전보건법령 위반으로 동일현장에서 벌금이상의 행정형벌을 2회 이상 받은 자 ·2회 받은 자 ·3회 이상 받은 자	-0.5 -1
		6) (현행과 같음)
		라.∼마. (현행과 같음)

주1)～주4) (생략)

주1)～주4) (현행과 같음)

주5) 신인도분야 평가방법

주5) 신인도분야 평가방법

1～6.(생략)

1～6.(현행과 같음)

7. 환산재해율 및 평균환산재해율의 가중평균은 다음 산식에 의하여 산정한다

·[최근년도 환산재해율×0.5+최근년도 1년전 환산재해율×0.3+최근년도 2년전 환산재해율×0.2(단, 최근년도 1년전 환산재해율 또는 최근년도 2년전 환산재해율을 산정하지 않은 경우에는 평균값으로 한다)]

7. 사고사망만인율 및 평균사고사망만인율------------------------------------.

·[최근년도 사고사망만인율×0.5+최근년도 1년전 사고사망만인율×0.3+최근년도 2년전 사고사망만인율×0.2(단, 최근년도 1년전 사고사망만인율 또는 최근년도 2년전 사고사망만인율을 산정하지 않은 경우에는 최근년도 사고사망만인율과 산정한 연도사고사망만인율의 평균값으로 한다)]

8.～10-4.(생략)

8.～10-4.(현행과 같음)

<신 설>

11. 산업안전보건법령 위반에 따른 행정형벌에 대한 감점은 공공공사 현장에서 발생한 법령 위반사항에 한하며, 해당공사의 발주기관(「조달사업에 관한 법률」 제5조의2에 따라 조달청장에게 계약을 의뢰하는 공사에 대하여는 수요기관을 말한다)의 입찰에서 감점한다.

주6) (생략)

주6) (현행과 같음)

[별표 3] 기술적 공사이행능력부문 분야별 심사항목 및 배점기준(제6조제5항제2호의 경우에 적용)

[별표 3] 기술적 공사이행능력부문 분야별 심사항목 및 배점기준(제6조제5항제2호의 경우에 적용)

심사분야		심 사 항 목
분야별	배점 한도	항 목 별	배점 한도
5. 신인도	+3 -10	가. (생 략)
		1) (생 략)	-2
		2)「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조제1항 각 호에 따라 6개월 이상의 입찰참가자격 제한을 받은 후 입찰참가자격 제한기간 만료일로부터 해당 제한기간 만큼의 기간이 경과하지 아니한 자	-2
		3) (생 략)	-5
		나. (생 략)
		다. 건설재해 및 제재처분사항
		1) 최근 3년간 고용노동부장관이 산정한 환산재해율의 가중평균이 평균환산재해율의 가중평균 이하인 자	+1
		2)~3) (생 략)
		4) 최근 1년동안 ｢산업안전보건법 시행규칙｣ 별표1 제1호 및 제7호의 규정에 따른 산업재해발생 보고의무 위반건수가 배분된 자	-2
		<신 설>	<신 설>
		5) (생 략)
		라.∼마. (생 략)

심사분야		심 사 항 목
분야별	배점 한도	항 목 별	배점 한도
5. 신인도	+3 -7	가. (현행과 같음)
		1) (현행과 같음)	-2
		2)<삭 제>	<삭 제>
		3) (현행과 같음)	-5
		나. (현행과 같음)
		다. 건설재해 및 제재처분사항
		1) 최근 3년간 고용노동부장관이 산정한 사고사망만인율의 가중평균이 평균사고사망만인율의 가중평균 이하인 자	+1
		2)~3) (현행과 같음)
		4) 최근 1년동안 ｢산업안전보건법 시행규칙｣ 별표1 제1호 및 제6호의 규정에 따른 산업재해발생 보고의무 위반건수가 배분된 자	-2
		5) 최근 1년동안 산업안전보건법령 위반으로 동일현장에서 벌금이상의 행정형벌을 2회 이상 받은 자 ·2회 받은 자 ·3회 이상 받은 자	-0.5 -1
		6) (현행과 같음)
		라.∼마. (현행과 같음)

주1)～주2) (생략)

주1)～주2) (현행과 같음)

부   칙(2019.12.18.)

제1조(시행일) 이 계약예규는 2020년 3월18일부터 시행한다. 다만,  [별표2]5.다.1) 및 주5)7.과 [별표3]5.다.1)의 개정규정은 2020년7월1일부터 시행한다.

제2조(일반적 적용례) 이 계약예규는 부칙 제1조에 따른 시행일 이후 입찰공고 하는 분부터 적용한다

제3조(신인도분야 평가방법에 관한 적용례) [별표2]5.다.1) 및 주5)7.과 [별표3] 5.다.1)의 가중평균은 다음 각 호에 따라 산정한다.

1. 시행일로부터 1년 이내: 최근년도 사고사망만인율

2. 시행일로부터 2년 이내: 최근년도 사고사망만인율과 최근년도 1년전 사고사망만인율의 평균값(단, 최근년도 사고사망만인율 또는 최근년도 1년전 사고사망만인율을 산정하지 않은 경우에는 산정한 연도 사고사망만인율로 한다)

제4조(산업안전보건법령 위반에 따른 행정형벌에 대한 신인도 감점 관련 경과규정) [별표2] 5.다.5) 및 [별표3] 5.다.5)에 따른 감점은 이 계약예규 시행일 이후 발생한 위반행위에 대해 행정형벌을  부과받은 분부터 산정한다.

4. 적격심사기준

현 행	개 정
제5조(심사항목 및 배점한도)①∼②(생 략)	제5조(심사항목 및 배점한도)①∼②(현행과 같음)
③각 중앙관서의 장은 제1항 및 제2항에 따른 심사기준을 정함에 있어 다음 각호의 사항을 심사항목으로 포함하여야 한다. 다만, 가점항목으로 포함하는 경우에는 이행(수행)능력의 배점한도 범위 내에서 가산점을 부여한다.	③------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1.∼4. (생 략)	1.∼4. (현행과 같음)
<신 설>	5. 공사계약: 최근 1년간 산업재해예방활동 실적이 우수한 자에 대한 신인도 가점 및 최근 1년동안 산업안전보건법령 위반으로 동일 공공공사 현장에서 벌금이상의 행정형벌을 2회 이상 받은 자에 대한 신인도 감점
④∼⑤ (생 략)	④∼⑤ (현행과 같음)
제10조(부정한 방법으로 심사서류를 제출한 자 및 미제출자의 처리) ① (생 략)	제10조(부정한 방법으로 심사서류를 제출한 자의 처리)① (현행과 같음)
②각 중앙관서의 장은 제1항에 해당하는 자, 정당한 사유없이 심사서류의 전부 또는 일부를 제출하지 아니한 자 및 심사서류 제출 후 낙찰자 결정전에 정당한 사유없이 심사를 포기한 자에 대하여는 시행령 제76조에 의한 입찰참가자격제한조치를 하여야 한다.	②----------------- 제1항에 해당하는 자------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
[별표] 적격심사항목 및 배점한도(제5조 관련)	[별표] 적격심사항목 및 배점한도(제5조 관련)
1. 추정가격이 100억원이상인 공사	1. (현행과 같음)
2. 추정가격이 100억원 미만 50억원 이상인 공사	2. 추정가격이 100억원 미만 50억원 이상인 공사
주1) 입찰가격 평점산식 (생 략) ·입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림	주1) 입찰가격 평점산식 (현행과 같음) ·(입찰가격-A)을 (예정가격-A)------------ -------------------------------------------------------
·입찰가격이 예정가격이하로서 예정가격의 100분의 90.5이상인 경우의 평점은 45점으로 한다	·(입찰가격-A)이 (예정가격-A)이하----(예정가격-A)--------------------------------- ---------
(생 략)	(현행과 같음)
3. 추정가격이 50억원 미만 10억원 이상인 공사(전문공사 및 전기․정보통신․소방공사․문화재공사 등 은 50억원 미만 3억원 이상)	3. 추정가격이 50억원 미만 10억원 이상인 공사(전문공사 및 전기․정보통신․소방공사․문화재공사 등 은 50억원 미만 3억원 이상)
주1) 입찰가격 평점산식 (생 략) ·입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림	주1) 입찰가격 평점산식 (현행과 같음) ·(입찰가격-A)을 (예정가격-A)------------ -------------------------------------------------------
·입찰가격이 예정가격이하로서 예정가격의 100분의 89.25이상인 경우의 평점은 65점으로 한다.	·(입찰가격-A)이 (예정가격-A)이하----(예정가격-A)--------------------------------- -------------
(생 략)	(현행과 같음)
4. 추정가격이 10억원미만 3억원이상인 공사(일반 건설공사에 해당)	4. 추정가격이 10억원미만 3억원이상인 공사(일반 건설공사에 해당)
주1) 입찰가격 평점산식 (생 략) ·입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림	주1) 입찰가격 평점산식 (현행과 같음) ·(입찰가격-A)을 (예정가격-A)------------ -------------------------------------------------------
·입찰가격이 예정가격이하로서 예정가격의 100분의 88.25이상인 경우의 평점은 75점으로 한다.	·(입찰가격-A)이 (예정가격-A)이하------- (예정가격-A)----------------------------- -------------
(생 략)	(현행과 같음)
5. 추정가격이 3억원미만 2억원이상인 공사(전기․정보통신․소방공사․문화재공사 등은 3억원미만 8천만원이상, 전문공사는 3억원미만 1억원이상)	5. 추정가격이 3억원미만 2억원이상인 공사(전기․정보통신․소방공사․문화재공사 등은 3억원미만 8천만원이상, 전문공사는 3억원미만 1억원이상)
주1) 입찰가격 평점산식 (생 략) ·입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림	주1) 입찰가격 평점산식 (현행과 같음) ·(입찰가격-A)을 (예정가격-A)------------ -------------------------------------------------------
·입찰가격이 예정가격이하로서 예정가격의 100분의 88.25이상인 경우의 평점은 85점으로 한다.	·(입찰가격-A)이 (예정가격-A)이하------- (예정가격-A)----------------------------- -------
(생 략)	(현행과 같음)
6. 추정가격이 2억원미만인 공사(전기․정보통신․ 소방공사․문화재공사 등은 8천만원미만, 전문공사는 1억원미만)	6. 추정가격이 2억원미만인 공사(전기․정보통신․ 소방공사․문화재공사 등은 8천만원미만, 전문공사는 1억원미만)
주1) 입찰가격 평점산식 (생 략) ·입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림	주1) 입찰가격 평점산식 (현행과 같음) ·(입찰가격-A)을 (예정가격-A)------------ -------------------------------------------------------
·입찰가격이 예정가격이하로서 예정가격의 100분의 88.25이상인 경우의 평점은 85점으로 한다.	·(입찰가격-A)이 (예정가격-A)이하------- (예정가격-A)------------------------------ ---------------------
	부 칙(2019.12.18.) 제1조(시행일) 이 계약예규는 2019년 12월18일부터 시행한다. 다만, 제5조제3항제5호의 개정규정은 2020년 3월18일부터 시행한다. 제2조(적용례) 이 계약예규는 부칙 제1조에 따른 시행일 이후 입찰공고를 하는 분부터 적용한다. 제3조(적격심사항목 및 배점한도에 대한 경과규정) [별표] 1.의 규정은 추정가격이 100억원 이상인 공사에 대해서는 2019년 12월17일까지 입찰공고한 분까지 효력을 가진다. 제4조(산업안전보건법령 위반에 따른 행정형벌에 대한 신인도 감점 관련 경과규정) 제5조제3항제5호에 따른 감점은 이 계약예규 시행일 이후 발생한 위반행위에 대해 행정형벌을 부과받은 분부터 산정한다.

5. 공사계약 종합심사낙찰제 심사기준

현  행

개  정

제3조(심사기준) ① (생  략)

제3조(심사기준) ① (현행과 같음)

1. (생 략)

1. (현행과 같음)

2. 시행령 제42조제4항의 공사 중 제1호에 해당하지 않는 공사(이하 이 예규에서 "일반공사"라고 한다): 제10조 내지 제13조, [별표1-1], [별표2] 내지 [별표4]

2. ---------------------------------- 추정가격 300억원 이상이면서 제1호-------------------------------------------------------------------------------------------

<신 설>

3. 시행령 제42조제4항의 공사 중 추정가격 300억원 미만이면서 제1호에 해당하지 않는 공사(이하 이 예규에서 “간이형 공사”라고 한다): 제10조 내지 제13조, [별표1-3], [별표2] 내지 [별표4]

② (생  략)

② (현행과 같음)

제6조(현장설명시 교부서류)① (생  략)

제6조(현장설명시 교부서류)① (현행과 같음)

②각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 시행령 제14조의2제2항 단서에 따라 현장설명을 실시하지 아니하는 경우 또는 현장설명을 실시하는 경우라도 필요하다고 인정되는 때에는 전자조달시스템에 제1항 각 호의 서류를 게재함으로써 입찰에 참가하고자 하는 자에 대한 교부를 갈음할 수 있다.

② ------------------계약담당공무원은 현장설명을 실시하지 아니하거나-------
---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

제7조(입찰서 등의 제출) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 입찰자로 하여금 입찰시 다음 각 호의 서류를 제출하게 하여야 한다. 다만, 제5호는 고난이도 공사에 한하여 제출하게 하여야 한다.

제7조(입찰서 등의 제출) ①----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

1. ∼ 2. (생 략)

1. ∼ 2. (현행과 같음)

3. 제6조제1항제1호에 따라 교부한 하도급계획서 작성방법에 따른 하도급계획서. <단서 신설>

3. -----------------------------------------
-----------------------------------------------. 다만, 간이형 공사는 계약담당공무원이 제10조에 따른 종합심사점수가 최고점인자에 한하여 제출하게 할 수 있다.

4. 심사를 위해 입찰공고에서 발주기관이 요구한 자료. <단서 신설>

4. -----------------------------------------
-----------------------. 다만, 간이형 공사의 경우 배치기술자 심사관련 서류의 제출일은 최초의 종합 심사서류 제출요구일로부터 15일 이후로서 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 별도로 지정한 날까지 제출하도록 하여야 한다.

5. (생  략)

5. (현행과 같음)

② (생  략)

② (현행과 같음)

제9조(심사서류의 보완) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제7조에 따라 입찰시 제출된 산출내역서, 하도급계획서 등의 내용이 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있다. <단서 신설>

제9조(심사서류의 보완) ①-----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 간이형공사의 경우에는 제7조제1항제3호에 따른 하도급계획서 등의 서류 미비 및 오류에 대하여도 1회에 한하여 보완하게 할 수 있다.

② (생  략)

② (현행과 같음)

제10조(종합심사 점수 산정)

<신 설>

제10조(종합심사 점수 산정) ⓛ간이형 공사는 공사수행능력점수(경영상태점수 포함), 사회적 책임점수(공사수행능력점수의 배점한도 내에서 가산한다), 입찰금액점수(단가 심사점수 및 하도급 계획 심사점수 포함) 및 계약신뢰도 점수를 합산하여 종합심사 점수를 산정한다.

① ∼ ② (생  략)

② ∼ ③ (현행과 같음)

③제1항 및 제2항에 따라 종합심사 점수를 산정할 때 제8조제1항에 해당하는 입찰자는 종합심사 점수를 산정하지 아니하며 낙찰자에서 배제한다.

④제1항부터 제3항-----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

④제1항 및 제2항에도 불구하고 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 하도급계획 심사는 하도급 계획을 제외한 종합심사점수가 최고점인 자부터 순차적으로 심사할 수 있다.

⑤제1항부터 제3항-----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

제11조(물량 및 시공계획 심사대상자 선정) 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 고난이도 공사에 대하여 제10조제1항 및 제4항에 따라 점수를 산정한 후 물량·시공계획 점수를 제외한 점수가 최고점 순으로 입찰공고에서 정하는 일정한 수의 업체를 우선순위 물량심사 및 시공계획심사 대상자로 선정한다.

제11조(물량 및 시공계획 심사대상자 선정)----------------------------------------
-----------------------------------------------------제5항----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

[별표2] 공사수행능력 세부 심사방법

1. 시공실적 심사

[별표2] 공사수행능력 세부 심사방법

1. 시공실적 심사

가. 시공실적 심사는 입찰참가업체가 보유한 입찰공고일 기준 10년 이내 준공된 해당 발주공사와 동일한 공법, 구조형식 등의 시공실적경험을 건수, 금액, 규모 등의 기준으로 합산하여 심사하는 것을 말한다. <단서 신설>

가------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 간이형 공사는 입찰공고일 기준 발주기관이 정하는 기간 이내 준공된 시공실적을 기준으로 심사할 수 있다.

나. 시공실적 심사의 산식은 다음과 같다.

나. ----------------------------------------
-----.

주 1)∼4) (생  략)

주 1)∼4) (현행과 같음)

주 5) 공동수급체의 경우 구성원별 시공실적에 시공비율을 반영하지 아니하고 합산한다. 다만, 일반공사 실적을 심사하는 경우에는 그러하지 아니하다.

주 5) -------------------------------------
-------------------------------------------------일반공사 및 간이형 공사의 실적------------------------------.

다. ∼ 라. (생  략)

다. ∼ 라. (현행과 같음)

3. 배치기술자 시공경력 심사

3. 배치기술자 시공경력 심사

가. 배치기술자 심사는 입찰참가 업체가 공사현장에 배치할 현장대리인 및 분야별 책임자의 시공참여 경력을 심사하는 것을 말한다. <단서 신설>

가. ----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 간이형 공사의 경우에는 분야별 책임자의 시공참여 경력 심사를 제외할 수 있다.

나. ∼ 자. (생  략)

나. ∼ 자. (현행과 같음)

<신 설>

차. 나. 에도 불구하고 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제3조제1항제3호의 공사에 대하여 최초의 종합 심사서류 제출요구일로부터 15일 이후로서 발주기관이 정하는 기준일까지 배치기술자가 재직한 경우 평가점수의 100%를 부여할 수 있다.

4. ∼ 7. (생  략)

4. ∼ 7. (현행과 같음)

<신 설>

8. 경영상태 심사

가. 경영상태 심사는 제3조제1항제3호의 공사에 한하여 적용한다.

나. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자가 평가한 회사채(또는 기업어음) 또는 기업신용평가등급(이하 "신용평가등급"이라 한다)으로 심사한다.

다. 심사기준일 이전에 평가한 유효기간내에 있는 회사채, 기업어음, 기업의 신용평가등급중에서 가장 최근의 등급으로 심사하고, 합병한 업체에 대하여는 합병후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 그 전까지는 합병대상업체중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

라. 공동수급체의 경우 구성원별 경영상태 점수에 시공비율을 곱한 후 합산하는 방식에 의한다.

[별표3] 입찰금액 평가 및 가격 산출의 적정성 심사방법

[별표3] 입찰금액 평가 및 가격 산출의 적정성 심사방법

1. (생 략)

1. (현행과 같음)

2. 가격 산출의 적정성 심사

2. 가격 산출의 적정성 심사

가. (생 략)

가. (현행과 같음)

나. 단가 심사(감점)

나. 단가 심사(감점)

1) ∼ 5) (생 략)

1) ∼ 5) (현행과 같음)

6) 세부공종 기준단가는 발주기관 내역서상 세부공종에 대한 예정가격의 100분의 70과 균형단가의 100분의 30에 해당하는 금액을 합산하여 산정하되, 구체적인 산정방법은 발주기관별로 세부 심사기준에 명시한다. <단서 신설>

6) -----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 간이형 공사의 세부공종 기준단가는 발주기관 내역서상 세부공종에 대한 예정가격과 균형단가를 90:10∼100:0의 범위에서 가중평균하여 산정하되, 구체적인 산정방법은 발주기관별 세부심사기준에 명시한다.

7) (생  략)

7) (현행과 같음)

<신 설>

8) 5)에도 불구하고 간이형 공사의 경우에는 세부공종 단가점수의 평가에 있어, 세부공종 기준단가의 ±15%이내인 경우 100점으로 평가한다. 다만, 5)에 따른 고정비용의 비중이 20% 이상인 공사에 대하여는 ±15%∼±18% 범위에서 적정단가의 기준을 설정할 수 있다.

다. 하도급계획 심사(감점)

다. 하도급계획 심사(감점)

1) ∼ 10) (생  략)

1) ∼ 10) (현행과 같음)

<신 설>

11) 1) ∼ 6)에도 불구하고 간이형 공사의 경우 전체 하도급 계약금액의 합계액을 기준으로 적정성을 심사하며, 하도급업체에 지급할 금액의 합계가 발주기관 내역서상 금액의 100분의 64이상으로서, 하도급할 부분에 대한 입찰금액(직·간접 노무비, 재료비, 경비를 기준으로 산출한 금액에 일반관리비, 이윤, 부가세를 포함한 금액, 지급자재 및 하도급대금 지급보증서 발급금액은 제외)의 100분의 82이상인 경우 100점으로 평가하고, 그 외는 0점으로 평가한다.

라. (생 략)

라. (현행과 같음)

마. 시공계획 심사(고난이도 공사에 한하여 적용)

마. 시공계획 심사(고난이도 공사에 한하여 적용)

1)～2) (생략)

1)～2) (현행과 같음)

3) 시공계획점수 평가내용 및 배점은 다음과 같다.

3) 시공계획점수 평가내용 및 배점은 다음과 같다.

세부항목	평가내용	배점	평가방법
1. 시공계획 적정성	- 공정관리 적정성 - 자재, 인력, 장비관리 적정성	10～40%	적정(100%) 보통(50%) 부적정(0)
2. 공사기간 적정성	- 공사계획 적정성 - 공사기간의 단축 효과 공사기간 산정의 적정성	10～30%	적정(100%) 보통(50%) 부적정(0)
<신 설>	<신 설>	<신 설>	<신 설>
3. 안정성 확보 및 환경오염방지	- 안전성 확보방안 - 소음, 오염방지 대책	10～30%	적정(100%) 보통(50%) 부적정(0)
4. 품질확보 방안	- 대체공법 시공가능성 - 품질관리계획 적정성	10～40%	적정(100%) 보통(50%) 부적정(0)
합 계		100

세부항목	평가내용	배점	평가방법
시공계획 적정성	-공정관리 적정성 -자재, 인력, 장비관리 적정성	10～40%	적정(100%) 보통(50%) 부적정(0)
2. 공사기간 적정성	-공사계획 적정성 -공사기간의 단축 효과 공사기간 산정의 적정성	10～30%	적정(100%) 보통(50%) 부적정(0)
3. 안전관리 역량 평가	-안전관리계획 적정성 -안전관리조직 운영 적정성	10～40%	적정(100%) 보통(50%) 부적정(0)
4. 안정성 확보 및 환경오염방지	-안전성 확보방안 -소음, 오염방지 대책	10～30%	적정(100%) 보통(50%) 부적정(0)
5. 품질확보 방안	-대체공법 시공가능성 -품질관리계획 적정성	10～40%	적정(100%) 보통(50%) 부적정(0)
합 계		100

[별표4] 사회적 책임 세부 심사방법

[별표4] 사회적 책임 세부 심사방법

1. 사회적 책임 분야 중 건설안전 심사방법은 다음과 같다.

1. -----------------------------------------
-----------.

가. 건설안전은 입찰자의 사망만인율 점수와 재해율 점수를 합산하여 평가한다.

가. --------- 산업안전보건법 시행규칙 별표 1에 따라 사고사망만인율을 산출-----.

나. 사망만인율은 다음의 계산식에 의거 산출하되, 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.

나. <삭 제>

1)∼3) (생략)

1)∼3) <삭 제>

다. 재해율은 다음의 계산식에 따라 산출하되, 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.

다. <삭 제>

1)∼3) (생략)

1)∼3) <삭 제>

라. 산업재해 발생보고 위반건수는 다음과 같이 산정한다.

라. 산업재해 발생보고 위반건수는 산업안전보건법 시행규칙 별표1 제1호 및 제6호에 따라 산정한다.

1)～3) (생략)

1)～3) <삭 제>

마. 사망만인율과 재해율의 점수 심사산식은 다음과 같다.

마. 사고사망만인율의 점수 심사산식은 다음과 같다.

구분	점수 심사산식	비고
사망 만인율	점수=100-50× [eqn: {해당업체``가중평균` {under{사망만인율}}} over {건설업``가중평균` {under{사망만인율}}}] * 해당업체 가중평균사망만인율이 건설업 가중평균사망만인율의 2배 이상인 경우는 0점	점수는 소수첫자리에서 반올림하여 정수로 표시하고, 점수한도는 100
재해율	점수=100-50× [eqn: {{under{해당업체`가중평균`재해율}}} over {{under{건설업`가중평균재해율}}}] * 해당업체 가중평균재해율이 건설업 가중평균 재해율의 2배 이상인 경우는 0점	점수는 소수첫자리에서 반올림하여 정수로 표시 하고, 점수한도는 100

구분	점수 심사산식	비고
사고사망 만인율	점수=100-50× [eqn: {해당업체``가중평균` {under{사고사망만인율}}} over {건설업``가중평균` {under{사고사망만인율}}}] * 해당업체 가중평균사고사망만인율이 건설업 가중평균사고사망만인율의 2배 이상인 경우는 0점	점수는 소수첫자리에서 반올림하여 정수로 표시하고, 점수한도는 100
<삭제>	< 삭 제>	< 삭 제>

1) 사망만인율과 재해율은 입찰공고일이 속하는 년도의 전전년도부터 과거 3개년의 가중평균*으로 산출한다.

1) 사고사망만인율의 가중평균은 다음 산식에 의하여 산정한다.

* 입찰공고일이 속하는 년도의 전전년도 사망만인율(재해율)×0.5+전전년도의 최근 1년전 사망만인율(재해율) ×0.3+전전년도의 최근 2년전 사망만인율(재해율)×0.2(입찰공고일이 속하는 년도의 전전년도의 최근 1년전 사망만인율(재해율) 또는 전전년도의 최근 2년전 사망만인율(재해율)을 산정하지 않은 경우에는 평균값으로 함)

· [최근년도 사고사망만인율×0.5+최근년도 1년전 사고사망만인율×0.3+최근년도 2년전 사고사망만인율×0.2] (단, 최근년도 1년전 사고사망만인율 또는 최근년도 2년전 사고사망만인율을 산정하지 않은 경우에는 최근년도 사고사망만인율과 산정한 연도 사고사망만인율의 평균값으로 한다.)

2) 산업재해 발생보고 위반건수는 입찰공고일이 속하는 년도의 전전년도의 1월 1일부터 12월 31일까지의 기간 중에 과태료 부과처분이 확정된 건으로 산정하고, 재해율에서 취득한 점수 범위내에서 다음과 같이 감점한다.

2) ------------------- 최근 1년동안의 기간 중에 과태료 부과처분이 확정된 건으로 산정하고, 사고사망만인율----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------.

위반건수	1건	2건	3건	4건	5건
감점	20	40	60	80	100

위반건수	1건	2건	3건	4건	5건
감점	20	40	60	80	100

바.～사. (생략)

바.～사. (현행과 같음)

2. 사회적 책임 중 공정거래 심사는 상호협력평가 점수에서 공정거래관련법 준수점수를 차감하여 산정한다.

가. 상호협력평가 점수

2. -----------------------------------------
--------------------------------------------------------.

가. 상호협력평가 점수

1) (생 략)

1) (현행과 같음)

2) 상호협력평가 점수(100점)는 국토교통부가 매년 5월 31일 공표하는 업체별 상호협력평가 등급에 따라 심사하며 등급별 점수는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 세부 심사기준으로 정한다.

2) -----------------------------------------
----------매년 6월 30일----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

나. (생 략)

나. (현행과 같음)

3. (생 략)

3. (현행과 같음)

<신 설>

4. 간이형 공사의 사회적 책임 중 건설인력 고용 심사는 [별표2] 7.에 따라 심사한다.

부   칙(2019.12.18.)

제1조(시행일) 이 계약예규는 2019년 12월18일부터 시행한다. 다만 [별표3] 제2호.마목.3)의 개정규정은 2020년3월18일부터 시행하고, [별표4] 제1호의 개정규정은 2020년7월1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 계약예규는 부칙 제1조에 따른 시행일 이후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

제3조(사회적 책임분야 중 건설안전 심사방법에 관한 적용례) [별표4] 1.마.1)의 가중평균 산정시 다음 각 호에 따라 종전의 사망만인율을 활용한다.

1. 시행일로부터 1년 이내: 최근년도 1년전 사망만인율 및 최근년도 2년전 사망만인율(단, 최근년도 1년전 사망만인율 또는 최근년도 2년전 사망만인율을 산정하지 않은 경우에는 최근년도 사고사망만인율과 산정한 연도 사망만인율의 평균값으로 한다)

2. 시행일로부터 2년 이내: 최근년도 2년전 사망만인율(단, 최근년도 1년전 사고사망만인율 또는 최근년도 2년전 사망만인율을 산정하지 않은 경우에는 최근년도 사고사망만인율과 산정한 연도 사망만인율 또는 사고사망만인율의 평균값으로 한다)

제4조(하도급계획심사에 대한 경과규정) 제9조 단서의 개정규정은 2020년 12월17일까지 효력을 가진다. 다만, 2020년 12월 17일까지 입찰공고한 사업에 대해서는 제9조 단서의 개정규정을 적용한다.

심사 분야	심사 항목		가중치	비고
공사수행능력 (40점)	경영상태	경영상태	20~30%
	전문성	시공실적	20~30%
		배치 기술자	20~30%
	역량	규모별 시공역량	0~20%
		공동수급체 구성	10~20%
	소계		100%
입찰금액 (60점)	입찰금액		100%
	가격 산출의 적정성(감점)	단가	감점
		하도급계획
	소계		100%
사회적책임 (가점: 2점)	건설안전		20~30%	※ 공사수행능력에 가산
	공정거래		20~30%
	건설인력고용		20~30%
	지역경제 기여도		20~40%
	소계		100%
계약신뢰도 (감점)	배치기술자 투입계획 위반		감점
	하도급관리계획 위반		감점
	하도급금액 변경 초과비율 위반		감점
	시공계획 위반		감점

[별표1-3] 간이형 공사의 분야별 심사항목 및 배점기준 < 신  설 >

6. 협상에 의한 계약체결기준

현 행	개 정
제4조(입찰공고) ① (생 략)	제4조(입찰공고) ① (현행과 같음)
② 입찰공고에는 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다.	② ----------------------------------------- --------------------.
1.∼3. (생 략)	1.∼3. (현행과 같음)
4. 시행령 제43조제5항에 따라 제안요청서에 대한 설명을 실시하는 경우에는 그 장소·일시 및 참가의무여부에 관한 사항	4. ----------------------------------------- --------------------------------------그 장소·일시에 관한 사항
5.∼9. (생 략)	5.∼9. (현행과 같음)
제5조(제안요청서의 교부 또는 열람 등) ① ∼ ③ (생 략)	제5조(제안요청서의 교부 또는 열람 등) ① ∼ ③ (현행과 같음)
④ 계약담당공무원은 계약의 성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 제안요청서 등에 대한 설명을 할 수 있으며, 설명을 실시하는 경우에는 설명에 참가한 자에 한하여 계약에 참가하게 할 수 있다.	④ ----------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------있다.
⑤ (생 략)	⑤ (현행과 같음)
제8조(협상적격자 및 협상순위의 선정) ① 계약담당공무원은 제7조에 따른 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.	제8조(협상적격자 및 협상순위의 선정) ① ------------------------------------제안서 평가결과, 입찰가격이 해당 사업예산(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 이하인 자로서------------------------------- -------------------------------------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
	부 칙(2019.12.18.) 제1조(시행일) 이 계약예규는 2019년 12월18일부터 시행한다. 제2조(적용례) 이 계약예규는 부칙 제1조에 따른 시행일 이후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

7. 공사계약일반조건

현 행	개 정
제11조(공사용지의 확보) ①∼②(생 략)	제11조(공사용지의 확보) ①∼②(현행과 같음)
<신 설>	③ 발주기관은 공사용지 확보 및 민원 대응 등 공사용지 확보와 직접 관련되는 업무를 계약상대자에게 전가하여서는 아니된다.
제17조(착공 및 공정보고) ①계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 공사를 착공하여야 하며 착공시에는 다음 각호의 서류가 포함된 착공신고서를 발주기관에 제출하여야 한다. <단서 신설>	제17조(착공 및 공정보고) ①-------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 계약담당공무원은 공사기간이 30일 미만인 경우 등에는 착공신고서를 제출하지 아니하도록 할 수 있다.
1.∼6. (생 략)	1.∼6. (현행과 같음)
<신 설>	②계약담당공무원은 공사의 규모・난이도・성격을 고려하여 착공일을 결정하되, 다음 각 호에서 정한 일자 이전의 날짜로 정하여서는 아니된다. 다만, 재해복구 등 긴급하게 착공하여야 할 필요가 있는 공사계약 및 장기계속공사의 1차 계약 이후 연차계약의 경우에는 계약상대자와의 협의를 거쳐 다음 각호에서 정한 일자 이전의 시점으로 착공일을 결정할 수 있다.
	1. 추정가격이 10억원 미만인 경우: 계약체결일로부터 10일
	2. 추정가격이 10억원 이상인 경우: 계약체결일로부터 20일
②(생 략)	③(현행과 같음)
③계약담당공무원은 제1항 및 제2항에 의하여 제출된 서류의 내용을 조정할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 계약상대자에게 이의 조정을 요구할 수 있다.	④------------------------제1항 및 제3항-- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
④계약담당공무원은 계약상대자로 하여금 월별로 수행한 공사에 대하여 다음 각호의 사항을 명백히 하여 익월 14일까지 발주기관에 제출하게 할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 이에 응하여야 한다.	⑤----------------- 제1항에 따라 착공신고서를 제출한 공사인 경우 계약상대자로 ---------------------------------------- -------------------------제출(「전자조달의 이용에 및 촉진에 관한 법률」제2조제4호 또는 동법 제14조에 의한 시스템을 통한 제출 포함)----------------------------- --------------------------------------------------------------------------.
1.∼4. (생 략)	1.∼4. (현행과 같음)
⑤계약담당공무원은 공정이 지체되어 소정기한내에 공사가 준공될 수 없다고 인정할 경우에는 제4항에 의한 월별 현황과는 별도로 주간공정현황의 제출 등 공사추진에 필요한 조치를 계약상대자에게 지시할 수 있다.	⑥------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------제5항------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제23조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정) ① 계약담당공무원은 공사계약에 있어서 제20조 및 제22조에 의한 경우 외에 공사기간·운반거리의 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위안에서 이를 조정(하도급업체가 지출한 비용을 포함한다)하며, 계약예규 「정부입찰·계약 집행기준」제15장(실비의 산정)을 적용한다.	제23조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정) ① ---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------제16장--------------.
②∼⑤ (생 략)	②∼⑤ (현행과 같음)
제32조(불가항력) ① 불가항력이라 함은 태풍·홍수 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동 기타 계약당사자의 통제범위를 벗어난 사태의 발생 등의 사유(이하 "불가항력의 사유"라 한다)로 인하여 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우를 말한다. 다만, 이는 대한민국 국내에서 발생하여 공사이행에 직접적인 영향을 미친 경우에 한한다.	제32조(불가항력) ①------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------공사이행에 직접적인 영향을 미친 경우로서 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우를 말한다.
②∼④(생 략)	②∼④(현행과 같음)
제33조(하자보수) ①계약상대자는 전체목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 시행령 제60조에 의하여 계약서에 정한 기간(이하 "하자담보책임기간"이라 한다)동안에 공사목적물의 하자(계약상대자의 시공상의 잘못으로 인하여 발생한 하자에 한함)에 대한 보수책임이 있다.	제33조(하자보수) ①---------------------------------------------------------------------------------먼저 도래한 날(공사계약의 부분 완료로 관리·사용이 이루어지고 있는 경우에는 부분 목적물을 인수한 날과 공고에 따라 관리·사용을 개시한 날 중에서 먼저 도래한 날을 말한다)-----------------------------------------------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
③제2항에도 불구하고 하자담보책임기간을 공종 구분없이 일률적으로 정하였거나 시행규칙 제70조에 의한 별표 1에 정해진 기간과 다르게 정하여 계약이행중인 경우에는 시행규칙에서 정한 대로 계약서상 하자담보책임기간을 조정하여야 한다.	③------------------------------------------ ------------------------------------------------ 시행규칙 제70조제1항각호--------- --------------------------------------------------------------------------------------------------.
④ (생 략)	④ (현행과 같음)
제39조(기성대가의 지급) ① (생 략)	제39조(기성대가의 지급) ① (현행과 같음)
② 계약담당공무원은 검사완료일부터 5일이내에 검사된 내용에 따라 기성대가를 확정하여 계약상대자에게 지급하여야 한다. 다만, 계약상대자가 검사완료일후에 대가의 지급을 청구한 때에는 그 청구를 받은 날부터 5일이내에 지급하여야 한다.	② ----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------지급(「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제9조의2제1항에 따른 시스템을 통한 지급 포함. 이하 이 조에서 같다.)--------------- ------------. -------------------------------- ---------------.
③～⑦ (생 략)	③～⑦ (현행과 같음)
제40조(준공대가의 지급)① (생 략)	제40조(준공대가의 지급)① (현행과 같음)
② 계약담당공무원은 제1항의 청구를 받은 때에는 그 청구를 받은 날로부터 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다. 이하 이조에서 같다)이내에 그 대가를 지급하여야 하며, 동 대가지급기한에도 불구하고 자금사정 등 불가피한 사유가 없는 한 최대한 신속히 대가를 지급하여야 한다. 다만, 계약당사자와의 합의에 의하여 5일을 초과하지 아니하는 범위안에서 대가의 지급기간을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.	② ----------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------지급(「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제9조의2제1항에 따른 시스템을 통한 지급 포함. 이하 이 조에서 같다)--------------------- ---. --------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------.
③～⑤ (생 략)	③～⑤ (현행과 같음)
제43조의2(하도급대금 등 지급 확인)① 계약상대자는 제39조 및 제40조에 의한 대가를 지급받은 경우에 15일 이내에 하수급인 및 자재·장비업자가 시공·제작·대여한 분에 상당한 금액(이하 "하도급대금 등"이라 한다)을 하수급인 및 자재·장비업자에게 현금으로 지급하여야 하며, 하도급대금 등의 지급 내역(수령자, 지급액, 지급일 등)을 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다) 이내에 발주기관 및 공사감독관에게 통보하여야 한다.	제43조의2(하도급대금 등 지급 확인)① ---- ------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------지급(「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제9조의2제1항에 따른 시스템을 통한 지급 포함. 이하 이 조에서 같다.)---------------- -----------------------------------------------.
②～③ (생 략)	②～③ (현행과 같음)
제43조의3(노무비의 구분관리 및 지급확인) ① (생 략)	제43조의3(노무비의 구분관리 및 지급확인) ① (현행과 같음)
② 계약담당공무원은 현장인 명부 등을 통해 제1항에 따른 노무비 청구내역을 확인하고 청구를 받은 날부터 5일 이내에 계약상대자의 노무비 전용계좌로 해당 노무비를 지급하여야 한다.	②------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------지급(「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제9조의2제1항에 따른 시스템을 통한 지급 포함. 이하 이 조에서 같다.)-------.
③～④ (생 략)	③～④ (현행과 같음)
제47조(공사의 일시정지) ①∼②(생 략)	제47조(공사의 일시정지) ①∼②(현행과 같음)
<신 설>	③제1항 각호의 사유가 발생한 경우로서 공사감독관이 제2항에 따른 통지를 하지 않는 경우 계약상대자는 서면으로 공사감독관 또는 계약담당공무원에게 공사 일시정지 여부에 대한 확인을 요청할 수 있다.
<신 설>	④공사감독관 또는 계약담당공무원은 제3항의 요청을 받은 날부터 10일 이내에 공사계약상대자에게 서면으로 회신을 발송하여야 한다.
③제1항에 의하여 공사가 정지된 경우에 계약상대자는 계약기간의 연장 또는 추가금액을 청구할 수 없다. 다만, 계약상대자의 책임있는 사유로 인한 정지가 아닌 때에는 그러하지 아니한다.	⑤제1항 및 제4항에 의하여 공사가 정지된 경우--------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------.
④(생 략)	⑥(현행과 같음)
	부 칙(2019.12.18.) 제1조(시행일) 이 계약예규는 2020년 3월18일부터 시행한다. 제2조(적용례) 이 계약예규는 부칙 제1조에 따른 시행일 이후 입찰공고를 하거나 수의계약을 체결하는 분부터 적용한다.

8. 공사입찰유의서

현 행	개 정
제3조의2(입찰참가자격의 판단기준일)①(생 략)	제3조의2(입찰참가자격의 판단기준일)①(현행과 같음)
②제1항에도 불구하고 시행령 제21조제1항제6호 및 시행규칙 제24조에 따라 지역제한경쟁입찰에 부치는 경우 그 주된 영업소의 소재지 기준일은 입찰공고일 전일(다만, 시행령 제72조제3항 제2호에 따른 사업의 경우에는 입찰공고일 전일 현재 해당업체의 전입일 익일부터 기산하여 90일 이상이 경과하고 있어야 한다)로 하며 계약체결일까지 계속 유지하여야 한다.	②------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ 법인등기부상 본점소재지 기준일(본점소재지가 변경된 경우 법인등기부상 본점소재지 변경일을 말한다.)---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
③∼④ (생 략)	③∼④ (생 략)
제3조의3(특별재난 선포지역의 지역제한경쟁입찰시 입찰참가자격의 판단기준일 관련 특례)①「재난 및 안전관리 기본법」제60조에 따라 특별재난지역으로 선포된 지역의 재난복구를 위하여 발주하는 공사를 시행령 제21조제1항제6호 및 시행규칙 제24조에 의하여 지역제한 경쟁입찰에 부치는 경우에는 그 주된 영업소의 소재지 기준일은 다음 각 호의 기준에 의하여야 한다.	제3조의3(특별재난 선포지역의 지역제한경쟁입찰시 입찰참가자격의 판단기준일 관련 특례)①----------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------법인등기부상 본점소재지 기준일(본점소재지가 변경된 경우 법인등기부상 본점소재지 변경일을 말한다.)----------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 특별재난지역 선포의 원인이 된 재난의 발생일 이후에 소재지를 이전한 업체의 경우에는 제3조의2제2항에 불구하고 입찰공고일 전일 현재 해당업체의 전입일 익일부터 기산하여 90일이상이 경과하고 있어야 하며 계약체결일까지 계속유지 하여야 함	2.------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------변경------------------------------------ ------------------------------------------------------.
②「재난 및 안전관리 기본법」제60조에 따라 특별재난지역으로 선포된 지역의 재난복구를 위하여 발주하는 공사를 시행령 제30조제4항 및 시행규칙 제33조제2항에 의하여 주된 영업소의 소재지로 견적서의 제출을 제한하는 경우에도 제1항 각 호를 준용한다.	②------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 법인등기부상 본점소재지로------------------------------- --------------------------------.
③ (생 략)	③ (생 략)
제4조(입찰에 관한 서류) ①계약담당공무원은 입찰공고일부터 입찰등록마감일까지 입찰에 참가하려는 자에게 다음 각 호의 서류(이하 "입찰관련서류"라 한다)를 열람하게 하고 교부하여야 한다. 다만, 설계서의 경우에는 교부를 요구한 경우에 한정한다.	제4조(입찰에 관한 서류) ① --------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. <단서 삭제>
1.∼11. (생 략)	1.∼11. (현행과 같음)
②∼③ (생 략)	②∼③ (현행과 같음)
제7조(입찰보증금) ① ~ ④ (생 략)	제7조(입찰보증금) ① ~ ④ (현행과 같음)
⑤계약담당공무원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰보증금 납부를 면제할 수 있다.	⑤------------------------------------------ -------------------------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 「건설산업기본법」·「전기공사업법」·「정보통신공사업법」 또는 「소방시설공사업법」등에 의하여 국가 또는 지방자치단체(이하 "국가기관 등"이라 한다)로부터 등록 등을 받아 입찰신청마감일 현재 해당 공사관련법령에 의한 사업을 영위하고 있는 자가 입찰에 참가하는 경우 단, 입찰신청마감일 현재 사업영위기간이 1년 미만인 자는 입찰참가자격제한 조치를 받은 사실이 없어야 함.	2. ----------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다.
<신 설>	가. 입찰공고일 이전 1년 이내에 시행령 제76조제1항제2호가목의 사유로 입찰참가자격제한을 받은 자(입찰참가자격 제한 기간 중인 경우를 포함한다)
<신 설>	나. 계약체결을 기피할 우려가 있어 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 입찰공고에 명시한 요건에 해당하는 자
⑥ (생 략)	⑥ (현행과 같음)
제11조(산출내역서의 제출) ①∼② (생 략)	제11조(산출내역서의 제출) ①∼② (현행과 같음)
③ 제1항 및 제2항에 의하여 제출하는 산출내역서의 모든 면에는 제9조제1항에 의한 인감으로 간인(서명의 경우에는 모든 면의 하단에 약식서명)하여야 한다.	③ 제1항 및 제2항에 의하여 제출하는 산출내역서는 모든 면에 제9조제1항에 의한 인감으로 간인하거나, 모든 면의 하단에 약식서명 또는 천공하여야 한다.
제17조(재입찰 및 재공고입찰) ①계약담당공무원은 경쟁입찰에서 2인이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없는 경우에는 같은 장소에서 재입찰에 부칠 수 있다. 이 경우에는 최초 입찰에의 참가유무 또는 입찰횟수의 제한을 받지 아니한다.	제17조(재입찰 및 재공고입찰) ①---------- ------------------------------------------- -------------------------------------------경우에는 재입찰에 부칠 수 있다. ---------------------------------------------------------------------------------------------.
②∼③ (생 략)	②∼③ (현행과 같음)
제24조(이의신청) 추정가격이 30억원 이상인 공사의 입찰에 있어 다음 각호의 어느 하나의 사유로 인하여 불이익을 받았다고 인정되는 자는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제28조제2항 및 제4항에서 정한 바에 따라 이의신청을 할 수 있다.	제24조(이의신청) 추정가격 30억원 이상인「건설산업기본법」에 따른 종합공사, 추정가격 3억원 이상인 「건설산업기본법」에 따른 전문공사, 추정가격 3억원 이상인 그 밖의 공사 ------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------.
1. ∼ 2. (생 략)	1. ∼ 2. (현행과 같음)
	부 칙(2019.12.18.) 제1조(시행일) 이 계약예규는 2020년 3월18일부터 시행한다. 다만, 제4조, 제7조, 제17조, 제24조의 개정규정은 2019년 12월 18일부터 시행한다. 제2조(적용례) 이 계약예규는 부칙 제1조에 따른 시행일 이후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

9. 용역계약일반조건

현 행	개 정
제24조(불가항력) ① 불가항력이라 함은 태풍·홍수 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동 기타 계약당사자의 통제범위를 벗어나는 사태(이하 "불가항력의 사유"라 한다)가 발생한 경우를 말한다. 다만, 이는 대한민국내에서 발생하여 용역수행에 직접적인 영향을 미친 경우에 한한다.	제24조(불가항력) ①------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------발생하여 용역수행에 직접적인 영향을 미친 경우로서 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우를 말한다.
②∼④(생 략)	②∼④(현행과 같음)
제26조(기성대가의 지급) ① (생 략)	제26조(기성대가의 지급) ① (현행과 같음)
② 계약담당공무원은 검사완료일부터 5일이내에 검사된 내용에 따라 기성대가를 확정하여 계약상대자에게 지급하여야 한다. 다만, 계약상대자가 검사완료일후에 대가의 지급을 청구한 때에는 그 청구를 받은 날부터 5일이내에 지급하여야 한다.	② ----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------지급(「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제9조의2제1항에 따른 시스템을 통한 지급 포함. 이하 이 조에서 같다.)--------------- -------------.
③～⑥ (생 략)	③～⑥ (현행과 같음)
제27조(대가의 지급)① (생 략)	제27조(대가의 지급)① (현행과 같음)
② 계약담당공무원은 제1항의 청구를 받은 때에는 그 청구를 받은 날로부터 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다. 이하 이조에서 같다)이내에 그 대가를 지급하여야 하며, 동 대가지급기한에도 불구하고 자금사정 등 불가피한 사유가 없는 한 최대한 신속히 대가를 지급하여야 한다. 다만, 계약당사자와의 합의에 의하여 5일을 초과하지 아니하는 범위안에서 대가의 지급기간을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.	② ----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------지급(「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제9조의2제1항에 따른 시스템을 통한 지급 포함. 이하 이 조에서 같다.)------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
③～⑥ (생 략)	③～⑥ (현행과 같음)
제27조의2(하도급대금 지급 확인)① 계약상대자는 제26조 및 제27조에 의한 대가를 지급받은 경우 15일 이내에 하도급대금을 하수급인에게 현금으로 지급하여야 하며, 하도급대금의 지급 내역(수령자, 지급액, 지급일 등)을 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다) 이내에 계약담당공무원에게 통보하여야 한다.	제27조의2(하도급대금 지급 확인)① --------- -------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------지급(「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제9조의2제1항에 따른 시스템을 통한 지급 포함. 이하 이 조에서 같다.)---------- -----------------------------.
②～④ (생 략)	②～④ (현행과 같음)
제27조의4(노무비의 구분관리 및 지급확인)① (생 략)	제27조의4(노무비의 구분관리 및 지급확인)① (현행과 같음)
② 계약담당공무원은 제1항에 따른 노무비 청구내역을 확인하고 청구를 받은 날부터 5일 이내에 계약상대자의 노무비 전용계좌로 해당 노무비를 지급하여야 한다.	② ----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------지급(「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제9조의2제1항에 따른 시스템을 통한 지급 포함. 이하 이 조에서 같다.)------.
③～④ (생 략)	③～④ (현행과 같음)
	부 칙(2019.12.18.) 제1조(시행일) 이 계약예규는 2020년 3월18일부터 시행한다. 제2조(적용례) 이 계약예규는 부칙 제1조에 따른 시행일 이후 입찰공고를 하거나 수의계약을 체결하는 분부터 적용한다.

10. 용역입찰유의서

현 행	개 정
제3조의2(입찰참가자격의 판단기준일)①(생 략)	제3조의2(입찰참가자격의 판단기준일)①(현행과 같음)
②제1항에도 불구하고 시행령 제21조제1항제6호 및 시행규칙 제24조에 따라 지역제한경쟁입찰을 부치는 경우 그 주된 영업소의 소재지 기준일은 입찰공고일 전일로 하며 계약체결일까지 계속 유지하여야 한다.	②------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------법인등기부상 본점소재지 기준일(본점소재지가 변경된 경우 법인등기부상 본점소재지 변경일을 말한다.)---------------- ----------------.
③∼④ (생 략)	③∼④ (현행과 같음)
제6조(입찰보증금) ① ~ ③ (생 략)	제6조(입찰보증금) ① ~ ③ (현행과 같음)
④계약담당공무원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰보증금 납부를 면제할 수 있다.	④------------------------------------------ -------------------------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 「건설기술관리법」·「엔지니어링기술진흥법」 또는 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 등 해당 용역관련법령에 의하여 국가기관 등으로부터 면허·허가 등을 받았거나 등록·신고 등을 하고 해당 용역관련법령상의 사업(해당 용역과 관계없는 면허·허가·등록·신고 등도 해당 용역관련법령상의 면허·허가·등록·신고 등은 포함)을 입찰참가신청마감일 현재 영위하고 있는 법인이 입찰에 참가하는 경우. 단, 입찰신청마감일 현재 사업영위기간이 1년 미만인 법인은 입찰참가자격제한 조치를 받은 사실이 없어야 함	2. ----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다.
<신 설>	가. 입찰공고일 이전 1년 이내에 시행령 제76조제1항제2호가목의 사유로 입찰참가자격제한을 받은 자(입찰참가자격 제한 기간 중인 경우를 포함한다)
<신 설>	나. 계약체결을 기피할 우려가 있어 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 입찰공고에 명시한 요건에 해당하는 자
⑤ (생 략)	⑤ (현행과 같음)
제14조(재입찰 및 재공고입찰) ①계약담당공무원은 경쟁입찰에서 2인이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없는 경우에는 같은 장소에서 재입찰에 부칠 수 있다. 이 경우에는 최초 입찰에의 참가유무 또는 입찰횟수의 제한을 받지 아니한다.	제14조(재입찰 및 재공고입찰) ①---------- ------------------------------------------- -----------------------------------------경우에는 재입찰에 부칠 수 있다.--------- -------------------------------------------------------------------------------------------.
②∼④ (생 략)	②∼④ (현행과 같음)
	부 칙(2019.12.18.) 제1조(시행일) 이 계약예규는2020년 3월18일부터 시행한다. 다만, 제6조, 제14조의 개정규정은 2019년 12월 18일부터 시행한다. 제2조(적용례) 이 계약예규는 부칙 제1조에 따른 시행일 이후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

11. 물품구매(제조)계약일반조건

현 행	개 정
제19조(검사) ① (생 략)	제19조(검사) ① (현행과 같음)
②「산업표준화법」 제15조에 따라 인증을 받은 제품, 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제6조에 따라 품질경영우수기업 등으로 선정된 자가 제조한 제품 및 「조달사업에 관한 법률」 제3조의3에 따라 조달청장이 고시한 품질관리능력 평가기준에 적합한 자가 제조한 물품에 대하여는 제1항에도 불구하고 검사를 면제하여야 한다. 다만, 해당 물품이 국민의 생명 보호, 안전, 보건위생 등을 위하여 검사가 필요하다고 인정하거나, 불량 자재의 사용, 다수의 하자 발생 등으로 품질의 확인이 필요한 것으로 인정되어 계약의 내용에 검사를 실시한다는 사항이 포함되도록 한 경우에는 그러하지 아니하다.	② ----------------------------------------- --------------, 같은 법 제31조의4제2항에 따라 수상자로 선정된 기업 등이 제조한 물품, 「조달사업에 관한 법률」 제3조의4에 따라 조달청장이 고시한 품질관리능력 평가기준에 적합한 자가 제조한 물품에------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------인정되거나 불량 자재의 사용, 다수의 하자 발생, 관계 기관의 결함보상명령 등으로 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
③ ~ ⑧ (생 략)	③ ~ ⑧ (현행과 같음)
제22조(대가의 지급) ① (생 략)	제22조(대가의 지급) ① (현행과 같음)
② 계약담당공무원은 제1항에 따른 청구를 받은 때에는 그 청구를 받은 날로부터 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다. 이하 이조에서 같다) 이내에 그 대가를 지급하여야 하며, 동 대가지급기한에도 불구하고 자금사정 등 불가피한 사유가 없는 한 최대한 신속히 대가를 지급하여야 한다. 다만, 계약상대자와의 합의에 의하여 5일을 초과하지 아니하는 범위안에서 대가의 지급기간을 연장하는 특약을 정할 수 있다.	② ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------지급(「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제9조의2제1항에 따른 시스템을 통한 지급 포함. 이하 이 조에서 같다.)--- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
③～⑦ (생 략)	③～⑦ (현행과 같음)
제22조의2(하도급대금 지급 확인)① 계약상대자는 제22조에 따른 대가를 지급받은 경우에는 15일 이내에 하도급대금을 하수급인에게 현금으로 지급하여야 하며, 하도급대금의 지급 내역(수령자, 지급액, 지급일 등)을 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다) 이내에 발주기관에게 통보하여야 한다.	제22조의2(하도급대금 지급 확인)① --------- -------------------------------------------- --------------------------------------------------------------지급(「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제9조의2제1항에 따른 시스템을 통한 지급 포함. 이하 이 조에서 같다.)------------------------------ -------------.
②～③ (생 략)	②～③ (현행과 같음)
	부 칙(2019.12.18.) 제1조(시행일) 이 계약예규는 2020년 3월18일부터 시행한다. 다만, 제19조의 개정규정은 2019년 12월 18일부터 시행한다. 제2조(적용례) 이 계약예규는 부칙 제1조에 따른 시행일 이후 입찰공고를 하거나 수의계약을 체결하는 분부터 적용한다.

12. 물품구매(제조)입찰유의서

현 행	개 정
제3조의2(입찰참가자격의 판단기준일)①(생 략)	제3조의2(입찰참가자격의 판단기준일)①(현행과 같음)
②제1항에도 불구하고 시행령 제21조제1항제6호 및 시행규칙 제24조에 따라 지역제한경쟁입찰을 부치는 경우 그 주된 영업소의 소재지 기준일은 입찰공고일 전일로 하며 계약체결일까지 계속 유지하여야 한다.	②------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------- 법인등기부상 본점소재지 기준일(본점소재지가 변경된 경우 법인등기부상 본점소재지 변경일을 말한다.)---------------- ------------------------------.
③·④ (생 략)	③·④ (생 략)
제6조(입찰보증금) ① ~ ③ (생 략)	제6조(입찰보증금) ① ~ ③ (현행과 같음)
④계약담당공무원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰보증금 납부를 면제할 수 있다.	④------------------------------------------ ------------------------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2.「식품위생법」 또는 「약사법」등 제조업관련 법령에 의하여 국가기관 등으로부터 면허·허가 등을 받았거나 등록·신고 등을 마친 자로서 입찰참가신청마감일 현재 해당 제조업을 영위하고 있는 법인이 입찰에 참가하는 경우. 단, 입찰신청마감일 현재 사업영위기간이 1년 미만인 법인은 입찰참가자격제한 조치를 받은 사실이 없어야 함	2. ----------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다.
<신 설>	가. 입찰공고일 이전 1년 이내에 시행령 제76조제1항제2호가목의 사유로 입찰참가자격제한을 받은 자(입찰참가자격 제한 기간 중인 경우를 포함한다)
<신 설>	나. 계약체결을 기피할 우려가 있어 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 입찰공고에 명시한 요건에 해당하는 자
⑤ (생 략)	⑤ (현행과 같음)
제15조(재입찰 및 재공고입찰) ①계약담당공무원은 경쟁입찰에서 2인이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없는 경우에는 같은 장소에서 재입찰에 부칠 수 있다. 이 경우에는 최초 입찰에의 참가유무 또는 입찰횟수의 제한을 받지 아니한다.	제15조(재입찰 및 재공고입찰) ①---------- ------------------------------------------- ----------------------------------------경우에는 재입찰에 부칠 수 있다.--------- ------------------------------------------- ----------------------------------------------------.
②∼④ (생 략)	②∼④ (현행과 같음)
	부 칙(2019.12.18.) 제1조(시행일) 이 계약예규는 2020년 3월18일부터 시행한다. 다만, 제6조, 제15조의 개정규정은 2019년 12월 18일부터 시행한다. 제2조(적용례) 이 계약예규는 부칙 제1조에 따른 시행일 이후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

13. 경쟁적대화에 의한 계약체결기준

현 행	개 정
제4조(입찰공고) ① (생 략)	제4조(입찰공고) ① (현행과 같음)
② 입찰공고에는 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다.	② 입찰공고에는 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다.
1.∼3. (생 략)	1.∼3. (현행과 같음)
4. 시행령 제43조제5항을 준용하여 기본 제안요청서에 대한 설명을 실시하는 경우에는 그 장소·일시 및 참가의무여부에 관한 사항	4. ----------------------------------------- ---------------------------------------------그 장소·일시에 관한 사항
5.∼10. (생 략)	5.∼10. (현행과 같음)
제5조(기본 제안요청서의 교부 또는 열람 등) ①∼② (생 략)	제5조(제안요청서의 교부 또는 열람 등) ①∼② (현행과 같음)
③ 계약담당공무원은 계약의 성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 기본 제안요청서 등에 대한 설명을 할 수 있으며, 설명을 실시하는 경우에는 설명에 참가한 자에 한하여 계약에 참가하게 할 수 있다.	③ ----------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------있다.
④ (생 략)	④ (현행과 같음)
	부 칙(2019.12.18.) 제1조(시행일) 이 계약예규는 2019년 12월18일부터 시행한다. 제2조(적용례) 이 계약예규는 부칙 제1조에 따른 시행일 이후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.