<첨 부 2>

‘06년 정부재정 SOC 현장 예산배정현황 및 현장운용 실태조사

1. 총  괄

(단위 : 개사, %)

업체명	SOC 현장수	예산배정 현황		예산 부족에 따른 현장운용실태
		원 활 현장수	부 족 현장수	소계	①사전 (외상)공사	② 공종 및 현장배치 인원축소하여 운용	③기타
A사	21	9	12(57.1)	12	3	9	-
B사	47	25	22(46.8)	22	1	21	-
C사	54	44	10(18.5)	10	-	10	-
D사	40	24	16(40.0)	16	-	16	-
E사	34	7	27(79.4)	27	22	5	-
F사	70	8	62(88.6)	62	6	-	56
G사	33	22	11(33.3)	11	11	-	-
H사	61	48	13(21.3)	13	4	7	2
I사	30	10	20(66.6)	20	15	2	3
J사	54	14	40(74.7)	40	11	27	2
K사	17	3	14(82.4)	14	1	12	1
L사	38	20	18(47.4)	18	-	10	8
M사	20	12	8(40.0)	8	8	-	-
N사	101	44	57(56.4)	57	8	11	38
K사	18	4	14(77.7)	14	11	-	3
15개사	638	294(46.1)	344(53.9)	344	101(29.4)	130(37.8)	113(32.8)

※ 1. 사전공사는 건설업체 자금으로 선시공하고 예산확보후 기성금 받는 공사(외상공사)

2. 기타는 예산부족에도 불구하고 간접비 등 현장경비를 부담하며 운영하는 현장

2. 예산부족 현장 사례(40개 현장)

(단위 : 억원, %)

현장명	총사업비	공사기간		‘06년도 예산			비 고
		당 초	변 경	당 초	배정액	공사수행 적정금액
A현장	941	‘02.11.01~ ’07.10.31	좌동	300	52	300(17.3)	3년연장 예상
B현장	1,226	‘01.12~ ’06.12	좌동	207	97	207(46.9)
C현장	817	‘02.10~ ‘07.10	좌동	70	38	70(54.3)
D현장	839	‘00.12~ ’05.12	‘00.12~ ‘07.12	70	58	70(82.9)	2년연장
E현장	700	‘01.12~ ‘06.12	좌동	200	108	250(43.2)	1년연장 예상
F현장	1,077	‘01.12~ ‘06.12	‘01.12~ ‘08.12	250	50	250(20.0)	2년연장
G현장	700	‘98.04~ ‘05.04	‘98.04~ ’07.04	105	82	105(78.1)	2년연장
H현장	1,143	‘04.12~ ‘12.11	좌동	160	89	105(55.6)
I현장	209	‘00.11~ ‘04.11	‘00.11~ ‘06.12	43	21	43(48.8)	2년연장
J현장	215	‘01.08~ ‘05.08	‘01.08~ 08.12	50	25	60(41.7)	3년연장
K현장	1,099	‘05.01~ ‘11.01	좌동	100	15	150(10.0)
L현장	1,497	‘03.08~ ‘08.08	‘03.08~ ’10.12	220	10	220(4.5)	2년연장
M현장	875	‘01.09~ ‘06.12	‘01.09~ ‘07.12	225	90	22540.0)	1년연장 예상
N현장	690	‘01.12~ ‘06.12	‘01.12~ ‘08.12	150	50	150(33.3)	2년연장 예상
O현장	1,477	‘04.04~ ‘10.04	좌동	115	85	115(73.9)
P현장	1,500	‘02.05~ ‘07.05	‘02.05~ ‘09.05	300	130	300(43.3)	2년연장 예상
Q현장	874	‘05.02~ ‘08.10	‘05.02~ ‘10.10	200	102	200(51.0)	2년연장 예상
R현장	661	‘03.06~ ‘08.12	좌동	229	170	229(74.2)
S현장	696	‘04.10~ ‘10.10	좌동	84	25	84(29.8)
T현장	853	‘01.11.12~ ‘06.11.21	‘01.11.22~ ‘07.11.21	150	57	150(38.0)	1년연장
U현장	1,109	‘01.03.06~ ‘07.03.05	‘01.03.06~ ‘09.03.05	200	90	220(40.9)	2년연장

현장명	총사업비	공사기간		‘06년도 예산			비 고
		당 초	변 경	당 초	배정액	공사수행 적정금액
V현장	1,084	‘04.11.01~ ‘11.10.31	좌동	120	43	165(26.1)
W현장	586	‘03.09~ ‘11.08	좌동	73	40	73억(54.8)
X현장	504	‘05.01~ ‘10.12	좌동	84	59	84(70.2)	공기연장 예상
Y현장	698	‘02.11~ ’07.11	좌동	100	80	100(80.0)	2년연장 예상
Z현장	457	‘02.06~ ‘07.06	좌동	50	40	120(33.3)	2년연장 예상
A-1현장	1,746	‘00.12~ ‘04.12	‘00.12~ ‘06.12	105	105	250(42.0)	2년연장
B-1현장	793	‘02.12~ ‘07.12	좌동	323	0	393(0)	예산미배정, 계약지연
C-1현장	1,329	‘03.10~ ‘09.09	좌동	42	42	230(18.2)
D-1현장	760	‘01.11~ ‘06.12	‘01.11~ ‘08.12	150	100	170(58.8)	2년 연장
E-1현장	470	‘03.10~ ‘08.10	‘03.10~ ‘11.10	50	30	80(37.5)	3년 연장
F-1현장	1,128.8	‘13.08.30	좌동	15	15	150(10.0)
G-1현장	659.2	‘10.03.01	좌동	130	20	130(15.3)
H-1현장	288.7	‘08.11.18	좌동	23	23	70(32.7)
I-1현장	1,885	‘01.05~ ‘06.05	‘01.05~ ‘08.12	260	260	300(86.7)	2.5년 연장
J-1현장	1,197	‘04.12~ ‘09.12	좌동	55	55	240(22.9)
K-1현장	956	‘01.12~ ‘06.12	‘01.12~ ’07.12	110	110	250(44.0)	1년 연장
L-1현장	1,173	‘02.03~ ‘07.02	좌동	86	86	220(39.1)
M-1현장	1,117	‘02.10~ ‘07.10	좌동	77	77	150(51.3)
N-1현장	307	‘04.08~ ’08.08	좌동	31	31	110(28.2)
40개 현장	-	-	-	5,312 (50.0)	2,660	-	당초 배정 예산 대비
				-	2,660	6,788(39.2)	공사수행 적정 금액 대비