새만금산업단지 대행개발 추진 계획

1	새만금산업단지 소개

새만금산업단지 개요

❍ 사업명 : 새만금·군산 경제자유구역 새만금지구 산업단지개발사업

❍ 위  치 : 전라북도 군산시 일원 (새만금 제4호 방조제 동측)

❍ 면  적 : 18,495,346㎡ (산업물류시설, 상업업무시설, 주택건설용지, 공공시설용지등)

새만금지구 산업단지 위치도	새만금지구 산업단지 토지이용계획

새만금산업단지 현황

❍ 새만금산업단지 공구별 공정 현황

구 분		1공구		2공구		5공구
		공정률	완료예정일	공정률	완료예정일	공정률	완료예정일
공정률	매립공사	100%	완료	97%	2015.10	21%	2017.10
	조성(내부)	59%	2015.12	20%	2017.12	0%
	조성(외곽)	74%	2015.12	0%		0%

❍ 새만금산업단지 주요 입주기업 현황

공구	입주기업	생산품	용지용도	면적(m2)
1공구	OCI	폴리실리콘	산업시설	571,352
2공구	OCISE	열·스팀·전기	열공급시설	162,153
	도레이첨단소재	PPS	장기임대	214,951
	솔베이실리카	고분산실리카	산업시설	69,934

※ 상기 4개 업체 외 군산도시가스, ㈜이씨에스 등 포함 전체 1,031,778m2

새만금산업단지 특장점

❍ 국내유일 한중FTA산업단지(‘15년) 및 종합보세구역(’14년)으로 지정

❍ 200ha 규모 장기임대용지 공급(외국인투자기업 대상 최장 100년)

❍ 대한민국 준정부기관인 한국농어촌공사가 사업 시행(분양가 평당 50만원)

2	대행개발사업 개요

대행개발사업 추진배경

❍ 민간자본의 참여기회 확대 및 투자유치 활성화 유도 필요

❍ 새만금산업단지 개발방식의 다양화를 통한 조기개발 필요

대행개발대상용지 현황 (새만금산업단지 6공구)

❍ 사  업  명 : 새만금산업단지 6공구 조성공사 대행개발사업

❍ 면      적 : 1,901,626㎡ (공급대상 산업시설용지 1,536,304㎡)

❍ 유치업종 : 자동차부품, 조선기자재, 일반기계부품, 신소재·나노융합,               의료·정밀 및 광학기계, 고부가가치식품, 신재생에너지

사업시행자와 대행개발사업자간 업무 분담

사업시행자	대행개발사업자
- 전체 산업단지 개발 및 실시계획 수립, 인·허가, 준공업무 - 전체 산업단지 조성공사에 대한 공정관리와 품질관리 - 대행공사의 설계변경 승인 - 대행공사 감리용역 발주 및 감리에 대한 지도관리 - 기타 산업단지 개발 및 실시계획으로 정하는 업무	- 대행공사의 시행 및 산업시설용지 공급가격의 납부 - 대행공사의 발주 및 계약 체결에 관한 사항 - 대행공사 시행에 따른 재원조달과 비용부담 - 사업시행자 업무의 협조

새만금산단 6공구 대행개발 추진 일정

❍ 기업 및 유관기관 대상 대행개발 사업설명회 개최(‘15년10월)

❍ 대행개발사업자 모집 공모 및 우선협상대상자 선정(‘15년11월)

❍ 대행개발사업 계약 체결 및 사업 시행(‘16년1월)